9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.10.2013

Bod pořadu jednání:	33.	
		
Název :	Podprogram 7. 2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – změna termínu využití finančních prostředků a předložení závěrečného vyúčtování podpořeného projektu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1419/13/RK	

Zpracoval:	Ing. Barbora Luková
zaměstnanec oddělení památkové péče
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 17. 9. 2013
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24. 10. 2013

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodloužení termínu využití finančních prostředků a termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. června 2014 na akci „I. etapa záchrany varhan z kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově“, na kterou byla Římskokatolické farnosti Bozkov přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, 1. výzvy Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, ve výši 250.000 Kč (dle smlouvy č. OLP/1554/2013)
a ukládá
Haně Maierové, náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, informovat o usnesení zastupitelstva Římskokatolickou farnost Bozkov.
Termín: 22. 11. 2013

Důvodová zpráva

Římskokatolické farnosti Bozkov (dále jen „příjemce dotace“) byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 199/13/ZK ze dne 28. 5. 2013 přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, 1. výzvy Podprogramu 7.2 - Záchrana a obnova památek ve výši 250.000,- Kč na akci „I. etapa záchrany varhan z kostela Navštívení Panny Marie v Bozkově.“ Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla dne 12. srpna 2013 uzavřena smlouva č. OLP/1554/2013 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen ukončit práce na podpořeném projektu a provést úhradu nákladů vztahujících se k jeho realizaci nejpozději do 20. listopadu roku 2013 (tj. roku, ve kterém poskytovatel rozhodl o poskytnutí dotace). Závěrečné vyúčtování projektu je příjemce dotace dle uzavřené smlouvy č. OLP/1554/2013 následně povinen předložit nejpozději do 12. prosince roku 2013. 

Po zahájení restaurátorských prací, kdy byly varhany demontovány, byl zjištěn větší rozsah jejich poškození, než se prvotně předpokládalo. Vnitřní píšťaly a prospektové píšťalnice jsou silně degradovány působením červotoče a záchrana těchto částí si vyžaduje časově náročný postup restaurování. Poškozené díly je nutno namáčet v lázni akrylátové pryskyřice a až po jejím dokonalém vyschnutí je možno pokračovat dalšími úkony. Vzhledem k tomu, že vysychání pryskyřice trvá až několik měsíců, není ukončení prací do stanoveného termínu, tj. 20. listopadu 2013, reálné.

Příjemce dotace proto z výše uvedeného důvodu požádal Liberecký kraj dopisem ze dne 6. září 2013 o prodloužení termínu využití finančních prostředků do 30. června 2014 a následně o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování akce do 30. června 2014. Tento termín byl zvolen po konzultaci s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu v souvislosti s tím, že k 30. červnu 2014 budou zároveň ukončeny projekty podpořené v rámci 2. výzvy podprogramu 7. 2 - Záchrana a obnova památek. V tomto případě tak dojde k termínové synchronizaci obou výzev.

Vzhledem k zažádanému prodloužení termínů ukončení a vyúčtování projektu je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/1554/2013 na základě dodatku, který uzavře Liberecký kraj a příjemce dotace. Radě kraje tak předkládáme ke schválení znění dodatku k výše uvedené smlouvě.

Dle podmínek Zásad pro poskytování dotací je příjemce dotace v případě, že nemůže předložit závěrečné vyúčtování projektu do 12. 12. běžného roku, (tj. roku, ve kterém poskytovatel rozhodl o přiznání dotace) povinen předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu k 31. 12. běžného roku. Tato podmínka byla zapracována do návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě, který předkládáme ke schválení.

Příloha:
033_P01_Žádost Římskokatolické farnosti Bozkov o prodloužení termínu