9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.10.2013

Bod pořadu jednání:	59.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 242/13 – navýšení příjmů kraje a úprava kapitoly 92006	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1388/13/RK ze dne 17.09.2013	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 17.09.2013
     
Výbor dopravy dne 22.10.2013
     
Finanční výbor dne 24.10.2013

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu – rozpočtové opatření č. 242/13, kterým se:
a)	navyšují příjmy kraje o částku 679.000 Kč jako odvod Krajské správy silnic Libereckého kraje, p.o.,	
b)	navyšují výdaje v kapitole 92006 – Kapitálové výdaje, odbor dopravy o částku 679.000 Kč na akci „Rekonstrukce silnice III/2887 Bozkov“	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana pro resort ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2013
Termín: 30. 11. 2013

Důvodová zpráva

V průběhu realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce silnice III/2887 - Bozkov, etapa I. a III.“ byla zjištěna neodkladná potřeba zadání dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Na dodatečné stavební práce po odečtení méněprací je potřeba částka 678.941,04 Kč včetně DPH. Ve schváleném rozpočtu rezortu dopravy v kapitole 92006 - číslo akce: 0690610000 - Rekonstrukce silnice III/2887 Bozkov nejsou na dodatečné stavební práce alokovány finanční prostředky. Usnesením rady Libereckého kraje č. 1206/13/RK byl schválen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OLP/434/2013 mezi Libereckým krajem a společností SaM silnice a mosty a.s., IČ 25018094, se sídlem: Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa, jehož předmětem jsou dodatečné stavební práce ve výši 561.108,30 Kč bez DPH, 678.941,04 Kč včetně DPH.
V rámci stavby "Rekonstrukce silnice III/2887 - Bozkov, etapa I. a III. je nahrazována původní vozovka silnice III. třídy ze žulové dlažby a vozovkou z asfaltobetonu. Celkové množství žulové dlažby, která bude nahrazena, je odhadováno na cca 800 - 1000 tun, z toho cca 50 tun žulové dlažby bude ponecháno na případné předláždění jiných akcí a zbylé množství je navrženo k odprodeji za cenu 1.000 až 1.200 Kč za tunu. Část finančních prostředků získaných prodejem tohoto nepotřebného movitého majetku navrhuje předkladatel použít na financování dodatečných stavebních prací, a to ve výši 679.000 Kč. Tato částka bude Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o., odvedena na základě § 28, odst. (6), písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde je psáno, že „Příspěvkové organizaci může její zřizovatel uložit odvod do svého rozpočtu, jestliže její plánované výnosy překračují její plánované náklady.“. Usnesením rady Libereckého kraje č. 1206/13/RK bylo uloženo Ing. Janu Růžičkovi, řediteli Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, zajistit prodej nepotřebného movitého majetku z akce „Rekonstrukce silnice III/2887 - Bozkov, etapa I. a III.“ do termínu 15.10.2013.

 

Přílohy:
059_P01_tabulky_ZR-RO_242-13