3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.03.2014

Bod pořadu jednání:	17.	
		
Název :	Podprogram 7. 2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – změna termínu využití finančních prostředků a předložení závěrečného vyúčtování podpořeného projektu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 322/14/RK	

Zpracoval:	Ing. Barbora Luková
zaměstnanec oddělení památkové péče
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4. 3. 2014
     
Výbor cestovního ruchu památkové péče a kultury Zastupitelstva Libereckého kraje dne 20. 3. 2014

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
prodloužení termínu využití finančních prostředků na akci „Obnova střešního pláště památkově chráněné roubené chalupy č. p. 103 v Jílovecké ulici v Semilech“, na kterou byla Muzeu a Pojizerské galerii Semily, IČ: 00085839, se sídlem Husova č. p. 2, 513 01 Semily, přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, 2. výzvy Podprogramu 7.2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, ve výši 100.000 Kč (dle smlouvy č. OLP/2189/2013), a to do 30. září 2014, a následně prodloužení termínu předložení závěrečného vyúčtování akce do 15. listopadu 2014
a ukládá
Haně Maierové, náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace.
Termín: 04. 04. 2014

Důvodová zpráva

Muzeu a Pojizerské galerii Semily (dále jen „příjemce dotace“) byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 297/13/ZK ze dne 27. 8. 2013 přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, 2. výzvy Podprogramu 7.2 - Záchrana a obnova památek ve výši 100.000,- Kč na akci „Obnova střešního pláště památkově chráněné roubené chalupy č. p. 103 v Jílovecké ulici v Semilech.“ Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla dne 7. října 2013 uzavřena smlouva č. OLP/2189/2013 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen ukončit práce na podpořeném projektu a provést úhradu nákladů vztahujících se k jeho realizaci nejpozději do 30. června roku 2014. Závěrečné vyúčtování projektu je příjemce dotace dle uzavřené smlouvy č. OLP/2189/2013 povinen předložit rovněž do 30. června 2014.

Dle Čl. II bodu 1 výše uvedené smlouvy o dotaci je příjemce dotace povinen podílet se na podpořeném projektu vlastními finančními prostředky nejméně ve výši 55,97 % z celkových nákladů. Z důvodu zajištění dostatečných finančních zdrojů na dofinancování podpořeného projektu požádal příjemce dotace o finančních příspěvek z Havarijního fondu Ministerstva kultury ČR na rok 2014. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledky dotačního řízení budou známy až v březnu 2014, bude samotná realizace podpořeného projektu včetně vypsání výběrového řízení pro příjemce dotace možná teprve v jarních měsících letošního roku. Pro zajištění bezproblémové realizace podpořeného projektu s dostatečnou časovou rezervou požádal příjemce dotace o prodloužení termínu využití přiznaných finančních prostředků z Dotačního fondu Libereckého kraje do 30. září 2014 a v návaznosti o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování akce do 15. listopadu 2014. Možnost prodloužení termínu realizace podpořeného projektu byla v předstihu konzultována s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu.

Pro požadované prodloužení termínů ukončení a vyúčtování projektu je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/2189/2013 na základě dodatku, který uzavře Liberecký kraj a příjemce dotace. Radě kraje tak předkládáme ke schválení znění dodatku k výše uvedené smlouvě. Vzhledem ke skutečnosti, že nejzazší termín ukončení podpořeného projektu byl stanoven v podmínkách podprogramu schválených usnesením č. 258/13/ZK ze dne 25. 6. 2013, předkládáme jeho změnu ke schválení zároveň Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Přílohy:
017_P01_Žádost Muzea a Pojizerské galerie Semily o prodloužení termínů