Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.11.2015

Bod pořadu jednání:	32.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2403/2015 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Levínská Olešnice	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1756/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 3. 11. 2015
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 10. 11. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Obec Levínská Olešnice, se sídlem Levínská Olešnice 94, 514 01 Levínská Olešnice, IČ: 00854662, o prodloužení termínu realizace projektu „Hřiště pro všechny“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 2.1 – Program obnovy venkova na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 224/15/ZK ze dne 26.5.2015,
schvaluje
1.	prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Hřiště pro všechny“ z 31. 12. 2015 na 30. 9. 2016, a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2016 na 19. 11. 2016, a z 31. 3. 2016 na 31. 12. 2016 pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí,	
2.	znění dodatku č. 1 ke smlouvě č.OLP/2403/2015, o poskytnutí účelové dotace  z Dotačního  fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Levínská Olešnice se sídlem č.p. 94, 514 01 Jilemnice, IČ 00854662 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování.	
a ukládá
1.	Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace	
Termín: 30. 11. 2015
2.	Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek k podpisu Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.	
Termín: 31. 12. 2015

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace obce Levínská Olešnice o změnu termínu ukončení realizace projektu „Hřiště pro všechny“, který byl schválen zastupitelstvem usnesením č. 224/15/ZK ze dne 26. 5. 2015 obci Levínská Olešnice rozhodnutím o poskytnutí dotace z podprogramu 2.1 Program obnovy venkova

Ve smlouvě č. OLP/2403/2015 v článku III. bod 4. je stanoven termín pro ukončení realizace projektu“ Hřiště pro všechny“ nejpozději do 31. 12. 2015. Dle čl. 7 musí být projekt vyúčtován nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. do 19. 2. 2016. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti, nejpozději však do 31. 3. 2016. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu rozhodnutí (dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejpozději však do 31. 3. 2016. 

Dne 21. 10. 2015 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost starostky obce Levínská Olešnice (příloha č. 1) o změnu termínu realizace projektu „Hřiště pro všechny“.  Důvodem žádosti je dlouhodobé neplnění smluvních závazků dodavatele akce. Dodavatel firma MARO CZ, s.r.o. soustavně a opakovaně neplní smluvní podmínky (např. nedodržování projektové dokumentace, nedodané certifikáty použitých materiálů, nedodržení smluvních termínů a řešení vad a nedodělků).
V současné době jedná obec Levínská Olešnice prostřednictvím právního zástupce o odstoupení od smlouvy a vše spěje k soudnímu řešení vzniklé situace (viz příloha č. 1). Z výše uvedených důvodů žádá obec Levínská Olešnice o prodloužení termínu realizace projektu „Hřiště pro všechny“ do 30. 9. 2016. 

Na základě žádosti obec Levínská Olešnice překládáme orgánům kraje dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2403/2015 o poskytnutí účelové dotace, ve kterém jsou uvedeny nové termíny pro ukončení a vyúčtování projektu. 

P01: Žádost příjemce
P02 Dodatek č. 1 k OLP/2403/2015