Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22.12.2015

Bod pořadu jednání:	8.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1645/2015	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1866/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Arnošt Svárovský
odborný zaměstnanec oddělení krizového řízení
	
Projednal:	Rada kraje dne  1. 12. 2015

Předkládá:	Martin Půta
hejtman
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1645/2015 mezi Okresním sdružením Liberec, IČ 64039145, se sídlem U Náspu 5, 460 01 Liberec 1 a Libereckým krajem, jehož předmětem je rozšíření termínu realizace projektu „Oprava budovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ na období od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2015.
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1645/2015 Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu.
Termín: 27. 01. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem předkládaného materiálu do Zastupitelstva Libereckého kraje je schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/1645/2015 mezi Libereckým krajem a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresním sdružením Liberec, IČ 64039145, se sídlem U Náspu 5, 460 01 Liberec 1.
	
Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresnímu sdružení Liberec ve výši 1.000.000,-Kč včetně Smlouvy o poskytnutí dotace bylo schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 26. 5. 2015 usnesením č. 205/15/ZK. 

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení Liberec projekt „Opravy budovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ začalo realizovat již v období května 2014 zpracováním projektu zateplení budovy. Sdružení na tento projekt obdrželo i dotaci ze Státního Fondu životního prostředí, u kterého byly uplatňovány výdaje již od tohoto zahájení projektu.  Vzhledem k tomu, že projekt byl fakticky zahájen již v květnu 2014, žádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení Liberec o rozšíření termínu realizace projektu „Oprava budovy Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska“ z původního termínu 1. 4. 2015 – 30. 9. 2015 na období od 1. 5. 2014 do 30. 9. 2015.

Příloha:
1. Dopis (žádost) Starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresního sdružení Liberec
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č OLP/1645/2015 
3. Původní smlouva ev. č. OLP/1645/2015