Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22.12.2015

Bod pořadu jednání:	39.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3120/2015 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Benecko	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1903/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 1. 12. 2015
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 8. 12. 2015

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obec Benecko, se sídlem Benecko 190, 512 37 Benecko, IČ: 00275581, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava místní komunikace Zákoutí“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, podprogramu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 224/15/ZK ze dne 26.5.2015,
schvaluje
1)	prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava místní komunikace Zákoutí“ z 31. 12. 2015 na 30. 6. 2016, a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2016 na 19. 8. 2016, a z 31. 3. 2016 na 30. 9. 2016 pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí,	
2)	znění dodatku č. 1 ke smlouvě č.OLP/3120/2015, o poskytnutí účelové dotace  z Dotačního  fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Benecko se sídlem č.p. 190, 512 37 Benecko, IČ 00275581 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování.	
a ukládá
1)	Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace	
Termín: 23. 12. 2015
2)	Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek k podpisu Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.	
Termín: 31. 12. 2015

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace obce Benecko o změnu termínu ukončení realizace projektu „Oprava místní komunikace Zákoutí“

Poskytnutí dotace na projekt bylo odsouhlaseno usnesením č. 801/15/RK ze dne 5. 5. 2015 a schváleno zastupitelstvem usnesením č. 224/15/ZK ze dne 26. 5. 2015 rozhodnutím o poskytnutí dotace z podprogramu 2.1 Program obnovy venkova.
Mezi Libereckým krajem a obcí Benecko byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Ve smlouvě č. OLP/3120/2015 v článku III. bod 4. je stanoven termín pro ukončení realizace projektu “Oprava místní komunikace Zákoutí“ nejpozději do 31. 12. 2015. Dle čl. 7 musí být projekt vyúčtován nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. do 19. 2. 2016. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti, nejpozději však do 31. 3. 2016. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu rozhodnutí (dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejpozději však do 31. 3. 2016. 

Dne 12. 11. 2015 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost starosty obce Benecko (příloha č. 1) o změnu termínu realizace projektu „Oprava místní komunikace Zákoutí“.
Dodavatelská firma nedoporučila zahájení prací na podzim z důvodu zvolené technologie opravy (penetrační makadam hrubý s dvojitým uzavíracím nátěrem), která vyžaduje určité teplotní podmínky, které v tomto ročním období již nelze zaručit. Komunikace se nachází v lokalitě s nadmořskou výškou 800 m, kde v tomto období není výjimkou i sněhová pokrývka.  Kvalitu prací by ovlivnilo také padající listí ze stromů, které lemují komunikaci. Pokud by obec i přes to trvala na provedení prací, dodavatel by odmítl převzít odpovědnost a záruky za kvalitu prací. 

Z výše uvedených důvodů žádá obec Benecko o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava místní komunikace Zákoutí“ do 30. 6. 2016. 

Na základě žádosti obce Benecko předkládáme zastupitelstvu kraje dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/3120/2015 o poskytnutí účelové dotace, ve kterém jsou uvedeny nové termíny pro ukončení a vyúčtování projektu. 

P01: Žádost příjemce
P02 Dodatek č. 1 k OLP/3120/2015