Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 22.12.2015

Bod pořadu jednání:	45.	
		
Název :	Změna termínu realizace  - Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje č. OLP/2095/2015 „částečná výměna otvorových výplní v tělocvičně a na severní stěně hlavního objektu“ a č. OLP/2094/2015 „oprava povrchu venkovního hřiště“ u Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1813/15/RK ze dne 18. 11. 2015	

Zpracoval:	Ing. Drahomír Nesvadba
rozpočet a financování školství
Bc. Renata Charvátová
analytik odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu
	
Projednal:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky
Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Finanční výbor Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
a)	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2095/2015 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje na projekt“ Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – částečná výměna otvorových výplní v tělocvičně a na severní stěně hlavního objektu“, uzavřené mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ:  70891508 a Základní školou a mateřskou školou logopedickou, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec, IČ: 46748059, kterým se prodlužuje termín realizace projektu do 31. 10. 2016,	
b)	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2094/2015 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje na projekt“ Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – oprava povrchu venkovního hřiště“, uzavřené mezi Libereckým krajem se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ:  70891508 a Základní školou a mateřskou školou logopedickou, Liberec, příspěvková organizace, se sídlem E. Krásnohorské 921, 460 01 Liberec, IČ: 46748059, kterým se prodlužuje termín realizace projektu do 31. 10. 2016	
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2095/2015 a Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2094/2015 k podpisu Aleně Losové, člence rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.
Termín: 31. 12. 2015

Důvodová zpráva

Změna termínu realizace  - Dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje č. OLP/2095/2015 „částečná výměna otvorových výplní v tělocvičně a na severní stěně hlavního objektu“ a č. OLP/2094/2015 „oprava povrchu venkovního hřiště“ u Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace  
___________________________________________________________________________

Předmětem materiálu je schválení:
1)	 Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2095/2015 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje na projekt“ Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – částečná výměna otvorových výplní v tělocvičně a na severní stěně hlavního objektu“ 
2)	Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2094/2015 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje na projekt“ Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – oprava povrchu venkovního hřiště“.
 
Zastupitelstvo kraje dne 25. 8. 2015 schválilo usnesením č. 356/15/ZK poskytnutí:
a)	účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 1.600.000 Kč na projekt „Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – částečná výměna otvorových výplní v tělocvičně a na severní stěně hlavního objektu“ 
b)	účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 500.000 Kč na projekt „Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – oprava povrchu venkovního hřiště“,
 
s termínem realizace obou projektů od 1. 9. 2015 a ukončením realizace projektů nejpozději do 31. 12. 2015.

a) Projekt „Částečná výměna otvorových výplní v tělocvičně a u severní stěny hlavního objektu“
Schválení projektu ve výši 1.600.000 Kč bylo rozhodnuto zastupitelstvem kraje dne 25. 8. 2015. Před tímto schválením byla připravena k zahájení veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna otvorových výplní v areálu školy“, která zahrnovala výměnu otvorových výplní na bytovém objektu a hlavním objektu (ve výměně nebyla zahrnuta severní stěna). Z tohoto důvodu bylo provedeno sjednocení obou částí projektových dokumentací na jednotný projekt „Výměna oken a dveří“ u Základní školy a mateřské školy logopedické, Liberec, příspěvková organizace.

	Původní předpokládaný časový harmonogram:
•	Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 6. 10. 2015
•	Lhůta pro podání nabídek 3. 11. 2015
•	Zahájení prací 10. 11. 2015
•	Termín dokončení prací koncem 12/2015

Vzhledem k tomu, že materiál předložený radě kraje dne 6. 10. 2015 ke schválení nebyl projednán, není možné ukončit termín realizace projektu dle smlouvy o poskytnutí dotace, tedy do 31. 12. 2015.

Aktuální předpokládaný časový harmonogram:
•	Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 20. 10. 2015
•	Lhůta pro podání nabídek 26. 11. 2015
•	Zahájení prací březen 2016
•	Termín dokončení prací květen 2016

b) Projekt „Oprava povrchu venkovního hřiště“
Schválení projektu „Oprava povrchu venkovního hřiště“ ve výši 500.000 Kč bylo rozhodnuto zastupitelstvem dne 25. 8. 2015. Smlouva o poskytnutí dotace byla podepsána dne 12. 10. 2015. Následně proběhlo poptávkové řízení na zpracování projektové dokumentace. Z poptávkového řízení vyplynulo, že v této době jsou dodací lhůty na zpracování projektové dokumentace delší, než byl původní předpoklad (vytíženost kapacit). Projektová dokumentace pro výběr zhotoviteli stavby bude předána příspěvkové organizaci dne 15. 12. 2015. 

Aktuální předpokládaný časový harmonogram:
•	Zahájení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu leden 2016
•	Zahájení prací březen - duben 2016 (v závislosti na klimatických podmínkách)
•	Termín dokončení prací květen - červen 2016

S ohledem na výše uvedené skutečnosti předkládáme orgánům kraje ke schválení:
1)	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2095/2015 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje na projekt“ Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – částečná výměna otvorových výplní v tělocvičně a na severní stěně hlavního objektu“, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace a využití poskytnutých finančních prostředků do 31. 10. 2016 a prodloužení termínu vyúčtování projektu do 20. 12. 2016.  Příjemce dotace, charakter a výše finančních prostředků zůstávají beze změny.
2)	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2094/2015 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje na projekt“ Základní škola a mateřská škola logopedická, Liberec, příspěvková organizace – oprava povrchu venkovního hřiště“, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace a využití poskytnutých finančních prostředků do 31. 10. 2016 a prodloužení termínu vyúčtování projektu do 20. 12. 2016.  Příjemce dotace, charakter a výše finančních prostředků zůstávají beze změny.
K podpisu smluv včetně jejich dodatků o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu byla zmocněna Alena Losová, dipl.um., členka Rady Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti usnesením č. 356/15/ZK ze dne 25. 8. 2015.

Příloha: 
Příloha č. 1 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2095/2015 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje
Příloha č. 2 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2094/2015 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 920 04 – kapitálové výdaje
Příloha č. 3 – Žádost ředitele