2. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 24.02.2015

Bod pořadu jednání:	35.	
		
Název :	Žádost o zmírnění sankcí - TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o. - SILNICE III/26314 PRYSK, HAVÁRIE OPĚRNÉ ZDI	

Důvod předložení:	Usnesení č. 179/15/RK ze dne 10.02.2015	

Zpracoval:	Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 10.02.0015
     
Výbor dopravy dne 17.02.2015
     
Výbor finanční dne 19.02.2015

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o odmítnutí žádosti o zmírnění sankcí společnosti  TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o., se sídlem Na Pankráci 332/14, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 44567961, ve věci porušení smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy č. OLP/120/2014, uzavřené mezi Libereckým krajem a společností TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o., se sídlem Na Pankráci 332/14, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 44567961,
a ukládá
Vladimíru Mastníkovi, členovi rady kraje pověřenému řízením resortu dopravy, písemně informovat společnost TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o., se sídlem Na Pankráci 332/14, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 44567961, o negativním stanovisku Libereckého kraje ke zmírnění sankcí vyplývajících z porušení smluvních podmínek smlouvy č. OLP/120/2014 uzavřené mezi Libereckým krajem a společností TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o., se sídlem Na Pankráci 332/14, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 44567961.
Termín: 15. 03. 2015

Důvodová zpráva

Dne 7. 1. 2015 obdržel Liberecký kraj - členové rady kraje, Ing. Jan Růžička, ředitel Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, a Ing. Jan Čáp, vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje dopis od společnosti TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o., se sídlem Na Pankráci 332/14, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 44567961 (dále jen“ TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o.“), ze dne 2. 1. 2015, který byl podepsán Jiřím Prokšem, jednatelem, ve kterém společnost TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o. žádá o zvážení zmínění sankcí. 

Na základě smlouvy o provedení stavby číslo OLP/120/2014 realizovala firma TORKRET – Zdeněk Bartoň s.r.o. stavení práce na akci: „SILNICE III/26314 PRYSK, HAVÁRIE OPĚRNÉ ZDI“. Jednalo se o odstraňování následků povodňových škod z června roku 2013. Akce byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Dle výše uvedené smlouvy a následujícím faktům vyplývá, že termín dokončení realizace díla byl 27. 10. 2014. (Předání staveniště proběhlo dne 27. 5. 2014, stavební práce pozastaveny do doby objednání záchranný arch. výzkum, které proběhlo dne 13. 7. 2014. Doba výstavby ze smlouvy činila 105 dnů, které jsou vyčerpány ke dni 27. 10. 2014). Protokolární převzetí výše uvedeného díla proběhlo dne 19. 12. 2014, to znamená 53 dní po sjednaném datu vyplývajícího ze smlouvy. 

TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o. porušila povinnost stanovenou v čl. VII odst. 3) smlouvy tím, že nedodržela termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla do 105 dnů od předání a převzetí staveniště. Tím vznikl Libereckému kraji nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII odst. 1 v celkové výši 363.015,02 Kč. Výše smluvní pokuty byla určena následujícím způsobem: 

porušení čl. …odst….	specifikace sankce za porušení / jednotka	výše sankce za porušení / jednotka v Kč	počet jednotek	výše sankce za porušení čl. celkem v Kč	
čl. VII odst. 3)	0,5% z ceny díla včetně DPH/den	6.849,34 Kč/ 1 den	53 dní	363.015,02 Kč	
Smluvní pokuta CEKEM	363.015,02 Kč	

Celková smluvní pokuta byla započtena proti faktuře č. 201483, s částkou k úhradě 386.266,07 Kč včetně DPH, s datem splatnosti 2. 2. 2015, doručené Libereckému kraji dne 19. 1. 2015 a z tohoto důvodu ze strany Libereckého kraje poukázána platba společnosti TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o. ve výši 23.251,05 Kč.

Krajská správa silnic Libereckého Kraje, příspěvková organizace, zaslala společnosti TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o. Výtku k provádění stavebních prací SILNICE III/26314 PRYSK, HAVÁRIE OPĚRNÉ ZDI Č.j.: 21/14/KD/6312 ze dne 10. 9. 2014. Dále pak dopisem Č.j. KULK 75512/2014 ze dne 10.11.2014 byla společnost TORKRET - Zdeněk Bartoň, s. r. o. Libereckým krajem, konkrétně dopisem Vladimíra Mastníka, člena rady kraje pověřeného řízením resortu dopravy, k dokončení plnění dle výše uvedené smlouvy. Oba dokumenty jsou přílohami tohoto materiálu. 

Jak již bylo výše uvedeno, stavební akce byla financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z čehož vyplývá, že by Liberecký kraj rozhodoval i o finančních prostředcích Státního fondu dopravní infrastruktury a vystavoval by se tak sám zbytečně hrozbě ztráty dotačních finančních prostředků spojených s povodněmi z roku 2013. Na základě všeho výše uvedené resort dopravy nesouhlasí se zmírněním sankce za nedodržení smluvních podmínek vyplývajících ze smlouvy o provedení stavby č. OLP/120/2014.

Přílohy:
035_P01_Dopis – TORKRET – Zdeněk Bartoň, s.r.o.
035_P02_Vytýkací dopis Krajská správa silnic Libereckého Kraje, příspěvková organizace Č.j.: 21/14/KD/6312
035_P03_Urgence ze strany Libereckého kraje Č.j.: KULK 75512/2014
035_P04_Smlouva OLP/120/2014
035_P05_Oznámení o započtení smluvní pokuty Č.j.: KULK 7270/2015