3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.03.2015

Bod pořadu jednání:	31.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1971/2014 – změna realizovaných prací v rámci podpořeného projektu na kostele v Letařovicích	

Důvod předložení:	Usnesení č. 313/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Barbora Luková
zaměstnanec oddělení památkové péče
	
Projednal:	Rada LK dne 3. 3. 2015
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury Zastupitelstva LK dne 27. 3. 2015

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu projektu s názvem „I. etapa obnovy havarijní fasády kostela sv. Jakuba Většího v Letařovicích – fasáda věže ke kordonové římse a záchrana fragmentů původní barevnosti na fasádě presbytáře včetně repase oken“, realizovaného Římskokatolickou farností – děkanství Český Dub, se sídlem Kostelní 9, 463, 43, IČ: 46747184, a podpořeného z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, na nový projekt s názvem „I. etapa obnovy havarijní fasády kostela sv. Jakuba Většího v Letařovicích - fasáda věže v celé ploše severní strany a části strany západní, včetně repase oken“
a ukládá
Haně Maierové, náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace.
Termín: 17. 04. 2015

Důvodová zpráva

Římskokatolické farnosti – děkanství Český Dub (dále jen „příjemce dotace“) byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 299/14/ZK ze dne 26. 8. 2014 přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek ve výši 150.000 Kč na akci „I. etapa obnovy havarijní fasády kostela sv. Jakuba Většího v Letařovicích – fasáda věže ke kordonové římse a záchrana fragmentů původní barevnosti na fasádě presbytáře včetně repase oken“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 14. října 2014 uzavřena smlouva č. OLP/1971/2014 o poskytnutí účelové dotace, dle které jsou schválené finanční prostředky poskytnuty na obnovu věže kostela sv. Jakuba Většího v Letařovicích v části ke kordonové římse a na záchranu fragmentů původní barevnosti na fasádě presbytáře včetně repase oken (viz. název projektu).

Po postavení lešení a zjištění skutečného stavu omítek na jednotlivých částech věže bylo ze strany investora přistoupeno k obnově fasády v celé ploše severní strany, která je značně namáhaná a vyžadovala si tak neodkladnou opravu. Tj., nedošlo k obnově pouze v části ke kordonové římse po celém obvodu věže. V roce 2014 byla kompletně obnovena fasáda severní strany věže (včetně korunní římsy, římsovaného ostění okna a zhotovení nové dřevěné okenice).

V roce 2015 by I. etapa obnovy měla pokračovat s pracemi v ploše západního průčelí – předpokládá se zhotovení kopie dřevěné okenice, obnova římsovaného ostění okenice včetně klenáku, restaurování kamenných ostění oken, průzkum fasády věže z lešení zaměřený na původní barevnost, vypracování zprávy o průzkumu a návrhu barevnosti, dopracování restaurátorské zprávy o stavu fasády severní strany, návrh restaurování a restaurování barevnosti niky v průčelí na západní straně fasádě. 

Vzhledem k výše uvedenému, požádal příjemce dotace o možnost změny realizace podpořeného projektu, která spočívá v obnově jiné části věže, než bylo v době podání žádosti o dotaci, předpokládáno. Schválené finanční prostředky ve výši 150.000 Kč by tak byly vynaloženy na kompletní obnovu fasády severní strany a části západní strany věže kostela sv. Jakuba Většího v Letařovicích.

Možnost změny podpořeného projektu byla v předstihu konzultována s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu s objasněním celé situace ze strany příjemce. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná pouze o upřesnění postupu prací, které směřují k realizaci podpořeného projektu (tj. k obnově fasády), pouze na jiné části kostela sv. Jakuba Většího v Letařovicích, než bylo původně předpokládáno, považujeme tuto drobnou změnu projektu za akceptovatelnou. Provedením obnovy fasády v celé ploše severní věže kostela a části strany západní dojde k naplnění projektu, na který byla dotace ze strany Libereckého kraje poskytnuta. Při realizaci stavebních prací není výjimkou nutnost odklonu od předpokládaného postupu, neboť ten musí vždy vycházet z aktuální situace a reagovat na zjištěný stav objektu. U památkově chráněných staveb platí toho tvrzení zejména, neboť jejich obnova nese určitá specifika a přesný postup prací nelze v době přípravy plně stanovit. Na základě těchto skutečností je změna projektu, jehož podstatou je obnova fasádního pláště kostela sv. Jakuba Většího v Letařovicích, z hlediska zájmů památkové péče přípustná, a to i s ohledem na skutečnost, že nikterak neohrozí účelovost poskytnutých finančních prostředků. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, jako administrátor poskytnuté dotace, se v souvislosti s požadovanou změnou projektu zabýval i jejími případnými dopady na celkové hodnocení projektu. Vzhledem ke skutečnosti, že stav vnějšího pláště kostela sv. Jakuba Většího v Letařovicích je komplexně hodnocen jako havarijní, přičemž podstata realizovaných prací zůstane zachována (tj. dojde k obnově fasády – pouze na jiné části věže kostela), nemá požadovaná změna projektu vliv na bodové hodnocení dle stanovených kritérií Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji.

Pro požadovanou změnu, resp. úpravu, podpořeného projektu je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/1971/2014 na základě dodatku, který uzavře Liberecký kraj a příjemce dotace. Radě kraje tak předkládáme ke schválení znění dodatku k výše uvedené smlouvě. Vzhledem ke skutečnosti, že poskytnutí podpory na projekt „I. etapa obnovy havarijní fasády kostela sv. Jakuba Většího v Letařovicích – fasáda věže ke kordonové římse a záchrana fragmentů původní barevnosti na fasádě presbytáře včetně repase oken“ byla schválena usnesením Zastupitelstva č. 299/14/ZK ze dne 26. 8. 2014, předkládáme jeho změnu ke schválení zároveň Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Příloha:
031_P01_Žádost Římskokatolické farnosti – děkanství Český Dub