6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 23.06.2015

Bod pořadu jednání:	55.	
		
Název :	Žádost o změnu v projektu „Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice“ příjemce obec Příšovice	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1072/15/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 16. 6. 2015
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje - korespondenčně

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
mění
část usnesení č. 224/15/ZK ze dne 26. 5. 2015 v části parametry projektu, celkové plánované náklady projektu a podíl dotace z celkových způsobilých výdajů na projekt v % u projektu „Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice“ příjemce obec Příšovice, IČ 00263125 takto:
Poř. číslo	Příjemce dotace/ žadatel	IČ	Dotační titul	Název projektu/účel	Parametry projektu	Celkové plánované náklady projektu (tis.Kč)	Podíl dotace z celkových způsobilých výdajů na projekt v %	Dotace v maximální výši	inv/neinv (I/N)	
3	Obec Příšovice	00263125	DT1	Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice	zařizovací předměty ks 46 
rozvody instalací m 398,
oprava povrchů m²  1 387;
nové zdivo m²  100,9	1.813.037   	16,54	300.000    	N	

a ukládá
Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace obec Příšovice o změnách v projektu.
Termín: 31. 07. 2015

Důvodová zpráva
Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace obce Příšovice o změny v projektu „Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice“ v části parametry projektu, celkové plánované náklady projektu a podíl dotace z celkových způsobilých výdajů na projekt v %, které byly odsouhlaseny usnesením č. 801/15/RK ze dne 5. 5. 2015 a schváleny zastupitelstvem usnesením č. 224/15/ZK ze dne 26. 5. 2015 obci Příšovice rozhodnutím o poskytnutí dotace z podprogramu 2.1 Program obnovy venkova

Obci Příšovice byla na základě předložené žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova schválena dotace ve výši 11,72 % z celkových plánovaných způsobilých výdajů projektu, maximálně však 300.000 Kč, která vycházela z plánovaných nákladů ve výši 2.560.485 Kč. Současně byly schváleny i parametry projektu - zařizovací předměty, rozvody instalací, oprava povrchů a nové zdivo, které bude příjemce z dotace realizovat. 

Dne 4. 6. 2015 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost starosty obce Příšovice (příloha č. 1) o úpravu parametrů projektu a zachování výše přidělené dotace po vysoutěžení nižší ceny oproti celkové výši plánovaných nákladů projektu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.

Žádost je zdůvodněna ustanoveními v „Podmínkách pro poskytování účelových dotací z rozpočtu LK z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova – podprogram č. 2.1 program obnovy venkova“ (příloha č. 2), které byly schváleny usnesením č. 517/14/ZK ze dne 16. 12. 2014 současně s výzvou k předkládání žádostí o dotaci z Programu obnovy venkova:

17)	Výstupy projektu uvedené v žádosti mohou být zpřesněny před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace.
18)	Celkové uznatelné náklady projektu uvedené v žádosti jsou závazné a mohou být změněny před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace pouze v důsledku změn, které vyplynuly z výběrového řízení na dodavatele/zhotovitele projektu. V takovém případě nesmí % podíl dotace z celkových uznatelných nákladů projektu převýšit stanovený limit uvedený v části B těchto Podmínek. 

Příjemce před podáním žádosti vycházel ze zpracované projektové dokumentace z roku 2008, která byla aktualizována pro potřeby zpracování žádosti o dotaci z POV. Po realizaci zadávacího řízení (16. 4. 2015 – 6. 5. 2015) byla schválena předložená nabídka s nejnižší cenou ve výši 1.813.037 Kč, tedy oproti plánovaným nákladům činí celková úspora 747.448 Kč. 
Z důvodu novely zákona č. 129/2000 Sb. o krajích je nově současně s rozhodnutím o poskytnutí dotace schvalována i smlouva nebo její vzor a v usneseních kromě výše dotace je schvalováno i procento poskytnuté dotace a závazné parametry projektu. Z tohoto důvodu by celkové snížení nákladů projektu znamenalo i nižší dotaci dle schváleného procentního podílu na celkových způsobilých výdajích projektu.
Podmínkou pro možné změny uvedené v žádosti ještě před podpisem smlouvy je, že nesmí mít vliv na bodové hodnocení, které je hodnoceno dle  kritérií pro hodnocení žádosti.

Bodové hodnocení závazného kritéria „Výše spolufinancování ze strany kraje“, které bylo schváleno v limitu do 30% z celkových způsobilých výdajů, nebude po změně dotčeno.

Podíl dotace z celkových způsobilých výdajů na projekt v %	
Původní	Nový	
11,72	16,54	

Na základě realizovaného výběrového řízení žádá příjemce o schválení nových parametrů projektu.
Parametry projektu 	
Původní	Nový	
zařizovací předměty ks 31; 
rozvody instalací m 362;
oprava povrchů m²   611;
nové zdivo m²  100	zařizovací předměty ks 46 
rozvody instalací m 398,
oprava povrchů m²   1 387;
nové zdivo m²  100,9	

Příjemce na základě výše uvedených skutečností, žádá orgány kraje o schválení změny procentního podílu dotace na celkových způsobilých výdajích projektu a úpravu parametrů projektu dle skutečnosti a zároveň o možnost zachování schválené výše dotace.
V případě, že by byl zachován schválený procentní podíl dotace na celkových způsobilých výdajích projektu, snížila by se částka dotace na 212.487 Kč, tedy o 87.513 Kč méně než původně požadovaná částka.
Návrh na usnesení byl konzultován a odsouhlasen právním odborem.

P01: Žádost příjemce
P02: Podmínky pro poskytnutí dotace z POV