7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.08.2015

Bod pořadu jednání:	45.	
		
Název :	Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1489/2015 z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogram 7. 2 – Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji  - změna parametrů realizovaných prací v rámci podpořeného projektu Oprava sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1310/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Tereza Vodňanská
zaměstnanec oddělení památkové péče
	
Projednal:	Rada kraje dne 4. 8. 2015
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury dne 20.8.2015

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Římskokatolické farnosti-děkanství Frýdlant, se sídlem Děkanská 85, 464 01 Frýdlant, IČ: 46745599, o změnu závazných parametrů v rámci projektu „Oprava sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7. 2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 122/15/ZK ze dne 31. 3. 2015,
rozhoduje
o změně závazných parametrů projektu „Oprava sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu“, z těchto:
Název parametru	jednotka	hodnota	
Demontáž krytiny	m2	25	
Lokální oprava krovu báně sanktusníku	ks	1	
Oprava makovice a kříže	ks	1	
Pokládka nové měděné krytiny	m2	51	

na tyto nové:
Název parametru	jednotka	hodnota	
Demontáž krytiny	m2	25	
Lokální oprava krovu báně sanktusníku	ks	1	
Nátěr makovice a kříže	ks	1	
Pokládka nové měděné krytiny	m2	37	
Tvarové kopie říms a konzol věnce báně	komplet	1	

schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1489/2015 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Oprava sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu“ uzavřené dne 22. května 2015 mezi Libereckým krajem a Římskokatolickou farností-děkanstvím Frýdlant, jehož předmětem je změna závazných parametrů projektu
a ukládá
1.	Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace	
Termín: 10. 09. 2015
2.	Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek k podpisu    Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury.	
Termín: 30. 10. 2015

Důvodová zpráva

Římskokatolické farnosti-děkanství Frýdlant, se sídlem Děkanská 85, 464 01 Frýdlant, IČ: 46745599 (dále jen „příjemce dotace“) byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 122/15/ZK ze dne 31. března 2015 přiznána účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši 90.000 Kč na akci „Oprava sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 22. května 2015 uzavřena smlouva č. OLP/1489/2015 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen realizovat projekt v rozsahu uvedených závazných parametrů.

Příjemce požádal dopisem ze dne 21. července 2015 poskytovatele o změnu závazných parametrů uvedených v Čl. I odst. 3 smlouvy č. OLP/1489/2015. Dle podané žádosti žádá příjemce dotace o změnu těchto závazných parametrů: oprava makovice a kříže, pokládka nové měděné krytiny a doplnění nového parametru tvarové kopie říms a konzol věnce báně. Důvodem pro změny závazných parametrů projektu je zjištění skutečného stavu sanktusové věže z postaveného lešení při zahájení realizace projektu. Krytina báně, která byla předmětem podpořeného projektu, je v pořádku. Při demontáži krytiny bylo zjištěno, že část plechování věžičky je provedena z pozinkovaného plechu a část báně cibule je z měděného plechu. Povrch obou plechů byl překryt sjednocujícím nátěrem, takže byl oprávněný předpoklad, že celá krytina je z pozinkovaného plechu. Protože měděný plech pod nátěrem je dobře zachovalý, nebude provedena výměna této krytiny. Výměra nově prováděného plechu tak bude celkově snížena. Dále bylo při demontáži plechu zjištěno rozsáhlé poškození profilovaných říms pod bání. Budou vytvořeny nové tvarové tesařské kopie říms a konzol věnce báně a následně oplechovány. Po odstranění plechu ze sloupů lucerny bylo zjištěno rozsáhlejší poškození sloupů, které budou před opětovným zaplechováním opatřeny hoblovanými příložkami. Je třeba také položit nové bednění ve spodní části nosných trámů věže. Hrotnice makovice je oproti předpokladu v pořádku a není nutná její výměna, makovice ani kříž tak nebudou sneseny. Dojde pouze k očištění na místě a natření kříže kovářskou černí, makovice zlatou barvou. Položky a výměry byly přesunuty v rámci projektu tak, aby rozsah prací a čerpaný finanční objem odpovídal původnímu projektu.

Novými závaznými parametry projektu tak jsou tvarové kopie říms a konzol báně (1 komplet), nátěr makovice a kříže (1 ks) a pokládka nové krytiny (37 m2). Parametr demontáž krytiny zůstává v původním rozsahu 25 m2, stejně jako lokální oprava krovu báně sanktusníku.

Provedením opravy jiné (spodní) části sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže dojde k naplnění projektu, na který byla dotace ze strany Libereckého kraje poskytnuta. Při realizaci stavebních prací není výjimkou nutnost odklonu od předpokládaného postupu, neboť ten musí vždy vycházet z aktuální situace a reagovat na zjištěný stav. U památkově chráněných staveb platí toto tvrzení zejména, neboť jejich obnova nese určitá specifika a přesný postup prací nelze v době přípravy plně stanovit. Na základě těchto skutečností je změna závazných parametrů projektu, jehož podstatou je oprava sanktusové věže na kostele Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu, z hlediska zájmů památkové péče přípustná, a to i s ohledem na skutečnost, že nikterak neohrozí účelovost poskytnutých finančních prostředků. Správce dotačního titulu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu se v souvislosti s požadovanou změnou projektu zabýval i jejími případnými dopady na celkové hodnocení projektu. Požadovaná změna projektu nemá vliv na bodové hodnocení dle stanovených kritérií Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. Správce dotačního titulu proto schválení změny parametrů doporučuje.

Pro požadovanou změnu závazných parametrů projektu je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/1489/2015 na základě dodatku, který uzavře Liberecký kraj a příjemce dotace. Poskytnutí neinvestiční dotace výše uvedenému příjemci na projekt „Oprava sanktusové věže kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu“ schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, zároveň se vzorovou smlouvou usnesením č. 122/15/ZK ze dne 31. března 2015.

Přílohy:
045_P01_ Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1489/2015
045_P02_Žádost ŘK farnosti-děkanství Frýdlant o změnu závazných parametrů