9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.10.2015

Bod pořadu jednání:	25.	
		
Název :	Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1498/2015 a dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1504/2015 z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogram 7. 2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji – prodloužení termínu realizace projektů	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1562/15/RK a 1563/15/RK	

Zpracoval:	Ing. Tereza Vodňanská
zaměstnanec oddělení památkové péče
	
Projednal:	Rada kraje dne 6. 10. 2015
     
Výbor cestovního ruchu, pamtákové péče a kultury dne 22.10.2015

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a)	žádost příjemce dotace Náboženské obce Církve československé husitské ve Frýdlantu v Čechách, se sídlem Vrchlického 945, 464 01 Frýdlant, IČ: 49111604, o prodloužení realizace projektu „Rekonstrukce střechy – výměna dožilé střešní krytiny na objektu fary čp. 945 – 4. etapa“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7. 2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 122/15/ZK ze dne 31. 3. 2015,	
b)	žádost příjemce dotace Římskokatolické farnosti Brenná, se sídlem Mimoňská 228, 471 23 Zákupy, IČ: 62237888, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7. 2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 122/15/ZK ze dne 31. 3. 2015,	
rozhoduje
a)	o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce střechy – výměna dožilé střešní krytiny na objektu fary čp. 945 – 4. etapa“ z 15. listopadu 2015 dle podmínek Podprogramu 7. 2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 32/15/ZK ze dne 27. 1. 2015, do 30. června 2016, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 31. července 2016,	
b)	o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa“ z 15. listopadu 2015 dle podmínek Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 32/15/ZK ze dne 27. 1. 2015, do 30. 6. 2016, a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 31. 7. 2016,	
schvaluje
a)	dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1498/2015 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Rekonstrukce střechy – výměna dožilé střešní krytiny na objektu fary čp. 945 – 4. etapa“, uzavřené dne 15. května 2015 mezi Libereckým krajem a Náboženskou obcí Církve československé husitské ve Frýdlantu v Čechách, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu,	
b)	dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1504/2015 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa“, uzavřené dne 22. 5. 2015 mezi Libereckým krajem a Římskokatolickou farností Brenná, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu	
a ukládá
1.	Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace	
Termín: 13. 11. 2015
2.	Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit výše schválené dodatky k podpisu Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury.	
Termín: 30. 11. 2015

Důvodová zpráva

1. 
Náboženské obci Církve československé husitské ve Frýdlantu v Čechách, se sídlem Vrchlického 945, 464 01 Frýdlant, IČ: 49111604 (dále jen „příjemce dotace“) byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 122/15/ZK ze dne 31. března 2015 přiznána účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši 67.000 Kč na akci „Rekonstrukce střechy – výměna dožilé střešní krytiny na objektu fary čp. 945 – 4. etapa“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 15. května 2015 uzavřena smlouva č. OLP/1498/2015 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen realizovat projekt do termínu stanoveného v Čl. III. odst. 5.

Příjemce požádal dopisem ze dne 22. září 2015 poskytovatele o prodloužení termínu ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. III odst. 5 smlouvy č. OLP/1498/2015. Dle podané žádosti žádá příjemce dotace o prodloužení termínu realizace projektu do 30. června 2016. Důvodem je aktuální nedostatek finančních prostředků žadatele na zajištění potřebné spoluúčasti. Žadatel čeká na rozhodnutí o přiznání dotace z doplňkového kola programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností.

Prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce střechy – výměna dožilé střešní krytiny na objektu fary čp. 945 – 4. etapa“ bylo konzultováno se správcem dotačního titulu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který s ohledem na aktuální finanční situaci příjemce a stav objektu prodloužení termínu doporučuje. Objekt fary při kostele Krista Spasitele ve Frýdlantu je dlouhodobě postupně opravován podle finančních možností náboženské obce. V roce 2015 se jedná o čtvrtou etapu rekonstrukce střechy (předchozí etapy byly realizovány v letech 2011–2013). Realizací tohoto projektu dojde k odstranění havarijního stavu dosud neopravené části střechy nad modlitebnou a celé pravé strany střechy. V současné době padající tašky ohrožují bezpečnost osob pohybujících se v okolí budovy, přes uvolněné tašky do objektu zatéká dešťová voda. V rámci projektu dojde k výměně dožilé střešní krytiny (bobrovka), výměně laťování střechy, výměně krytiny hřebenáčů a žlabů.

Pro požadované prodloužení termínu je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/1498/2015 na základě dodatku, který uzavře Liberecký kraj a příjemce dotace. Radě kraje tak předkládáme k odsouhlasení prodloužení termínu realizace projektu a znění dodatku k výše uvedené smlouvě. Nejzazší termín ukončení podpořeného projektu byl stanoven v podmínkách podprogramu schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 32/15/ZK ze dne 27. 1. 2015 a ve vzorové smlouvě schválené usnesením č. 122/15/ZK ze dne 31. března 2015, proto jeho změnu předkládáme ke schválení zároveň Zastupitelstvu Libereckého kraje.

2. 
Římskokatolické farnosti Brenná, se sídlem Mimoňská 228, 471 23 Zákupy, IČ: 62237888 (dále jen „příjemce dotace“) byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 122/15/ZK ze dne 31. března 2015 přiznána účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši 200.000 Kč na akci „Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 22. května 2015 uzavřena smlouva č. OLP/1504/2015 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen realizovat projekt do termínu stanoveného v Čl. III. odst. 5.

Příjemce požádal dopisem ze dne 14. září 2015 poskytovatele o prodloužení termínu ukončení realizace projektu uvedeného v Čl. III odst. 5 smlouvy č. OLP/1504/2015. Dle podané žádosti žádá příjemce dotace o prodloužení termínu realizace projektu do 30. června 2016. Důvodem je aktuální nedostatek finančních prostředků žadatele na zajištění potřebné spoluúčasti. Žadatel čeká na rozhodnutí o přiznání dotace Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví.

Prodloužení termínu realizace projektu „Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa“ bylo konzultováno se správcem dotačního titulu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který s ohledem na aktuální finanční situaci příjemce a stav objektu prodloužení termínu doporučuje. Objekt kostela sv. Jana Křtitele je dlouhodobě havarijní a nemůže tak být v současné době využíván ke svému účelu. Postupnou obnovou se Římskokatolická farnost Brenná snaží objekt zachránit. Projekt navazuje na obnovu střechy a omítek věže kostela provedené v roce 2014. Projekt v roce 2015 zahrnuje opravu 722 m2 omítek vnějšího fasádního pláště a výměnu 6 kusů oken v lodi kostela

Pro požadované prodloužení termínu je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/1504/2015 na základě dodatku, který uzavře Liberecký kraj a příjemce dotace. Radě kraje tak předkládáme k odsouhlasení prodloužení termínu realizace projektu a znění dodatku k výše uvedené smlouvě. Nejzazší termín ukončení podpořeného projektu byl stanoven v podmínkách podprogramu schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 32/15/ZK ze dne 27. 1. 2015 a ve vzorové smlouvě schválené usnesením č. 122/15/ZK ze dne 31. března 2015, proto jeho změnu předkládáme ke schválení zároveň Zastupitelstvu Libereckého kraje. 

Přílohy:
025_P01_Žádost o prodloužení termínu Římskokatolické farnosti Frýdlant
025_P02_Žádost o prodloužení termínu Římskokatolické farnosti Brenná
025_P03_Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1498/2015
025_P04_Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1504/2015