Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2016

Bod pořadu jednání:	29.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3142/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje	

Důvod předložení:	Usnesení č. 764/16/RK	

Zpracoval:	Ing. Naďa Veselá
vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
	
Projednal:	Rada kraje dne 3. 5. 2016, usnesení č. 764/16/RK
     
Výbor zdravotnictví dne 25. 5. 2016

Předkládá:	Petr Tulpa
člen rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3142/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČ 46744991, se sídlem Husova 976/37, 460 01 Liberec I-Staré Město, na projekt “Vozidlo technologické a komunikační připravenosti“, kterým se mění termín ukončení realizace projektu a termín vyúčtování projektu
a ukládá
Petru Tulpovi, členu rady kraje, řízení rezortu zdravotnictví, informovat o výsledku MUDr. Vladimíra Hadače, ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 06. 06. 2016

Důvodová zpráva
Smluvní strany uzavřely dne 10. prosince 2015 smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z  rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3142/2015. Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční účelové dotace na projekt „Vozidlo technologické a komunikační připravenosti“ ve výši 500.000 Kč Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje (dále jen ZZS LK) z rozpočtu Libereckého kraje. Odbor zdravotnictví obdržel od ZZS LK žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu. Termín ukončení realizace projektu ve smlouvě je nejpozději 31. 5. 2016. Důvod, který ZZS LK uvádí, je zdržení při zpracování technické dokumentace pro vyhlášení výběrového řízení. Požadavkem technické specifikace vozidla je také vybavení zástavby a příprava pro další systémy (sledování polohy, antény, radiostanice, dokovací stanice, kamery, tablety, tiskárny atd.) tak, aby bylo vozidlo plně kompatibilní s nově pořízenými vozidly RLP/RZP a RV. Proces zpracování dokumentace zdržela snaha, aby do technické specifikace vozidla v rámci výběrového řízení byly zapracovány v maximální míře všechny nově získané poznatky z testovacího a ostrého provozu nových vozidel.  
Na základě žádosti ZZS LK byl zpracován dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3142/2015. V dodatku dochází ke změně článku III., bodu 4 a 6 smlouvy:
4. 	Termín zahájení realizace projektu je 1. 12. 2015 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2016.
6. 	Projekt musí být vyúčtován do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 19. 2. 2017. Projekt musí být vyúčtován formou závěrečného vyúčtování na příslušném formuláři uvedeným v příloze č. 1 a 2 této smlouvy, který musí být v termínu pro vyúčtování předložen odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje. Závěrečné vyúčtování není vyžadováno v případě, že projekt nebyl realizován a veškeré poskytnuté prostředky byly příjemcem vráceny zpět na účet poskytovatele, ve lhůtě  dle čl. III. odst. 10, event., kdy příjemci nebyly finanční prostředky zaslány a to ani z části.

Přílohy:
Příloha č. 1 – dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3142/2015
Příloha č. 2 – smlouva OLP/3142/2015