Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.05.2016

Bod pořadu jednání:	34.	
		
Název :	Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1504/2015 – druhé prodloužení termínu realizace projektu „Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa“ a změna termínu realizace projektu „Výměna střešní krytiny včetně poškozených částí bednění, oprava komínů, výměna klempířských prvků u domu č. p. 172 v Novém Boru“ v návrhu smlouvy č. OLP/1331/2016	

Důvod předložení:	Usnesení č. 871/16/RK ze dne 17.05.2016	

Zpracoval:	Ing. Tereza Vodňanská
zaměstnanec oddělení památkové péče
	
Projednal:	Rada kraje dne 17.05.2016
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury dne 26.05.2016

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	PhDr.Mgr. René Brož
vedoucí odboru kultury, památkové péče a cest. ruchu
	
Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1.	žádost příjemce dotace Římskokatolické farnosti Brenná, se sídlem Mimoňská 228, 471 23 Zákupy, IČ: 62237888, o druhé prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7. 2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 122/15/ZK ze dne 31. března 2015,	
2.	žádost příjemce dotace Romana Bucka, nar. 21. dubna 1969, bytem Skalice u České Lípy 160, 471 17 Skalice u České Lípy, o změnu termínu realizace projektu „Výměna střešní krytiny včetně poškozených částí bednění, oprava komínů, výměna klempířských prvků u domu č. p. 172 v Novém Boru“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7. 2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016,	
rozhoduje
1.	o druhém prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa“ z 30. června 2016 dle dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1504/2015, schváleného usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 458/15/ZK ze dne 27. října 2015, do 30. září 2016, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 31. října 2016,	
2.	o změně termínu realizace projektu „Výměna střešní krytiny včetně poškozených částí bednění, oprava komínů, výměna klempířských prvků u domu č. p. 172 v Novém Boru“ z termínu uvedeného v žádosti o dotaci od 10. dubna 2016 do 20. května 2016, schváleného usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016, na nový termín realizace od 12. května 2016 do 31. srpna 2016, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 20. října 2016,	
schvaluje
1.	dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1504/2015 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k. ú. Brenná – II. etapa“, uzavřené dne 22. května 2015 mezi Libereckým krajem a Římskokatolickou farností Brenná, jehož předmětem je druhá změna termínu ukončení realizace projektu,	
2.	změnu návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, č. OLP/1331/2016, na projekt „Výměna střešní krytiny včetně poškozených částí bednění, oprava komínů, výměna klempířských prvků u domu č. p. 172 v Novém Boru“,	
a ukládá
1.	Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace.	
Termín: 20. 06. 2016
2.	René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek a návrh smlouvy k podpisu Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury.	
Termín: 30. 06. 2016

Důvodová zpráva

1. Římskokatolické farnosti Brenná (dále jen ŘKF Brenná), se sídlem Mimoňská 228, 471 23 Zákupy, IČ: 62237888 (dále jen „příjemce dotace“) byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 122/15/ZK ze dne 31. března 2015 přiznána účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Podprogramu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši 200.000 Kč na akci „Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 22. května 2015 uzavřena smlouva č. OLP/1504/2015 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen realizovat projekt do termínu stanoveného v Čl. III. odst. 5. Následně příjemce požádal dopisem ze dne 14. září 2015 poskytovatele o prodloužení termínu ukončení realizace projektu do 30. června 2016 z důvodu aktuálního nedostatku finančních prostředků na zajištění potřebné spoluúčasti. Pro požadované prodloužení termínu bylo nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/1504/2015 na základě dodatku č. 1, který schválilo usnesením č. 458/15/ZK ze dne 27. října 2015 Zastupitelstvo Libereckého kraje, a následně jej uzavřel Liberecký kraj a příjemce dotace dne 10. prosince 2015.

Nyní žádá příjemce dotace o druhé prodloužení termínu realizace projektu. Z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR byla ŘKF Brenná přislíbena dotace ve výši 650.000 a společně s přidělenou dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje je projekt možné zrealizovat a v letošním roce dokončit. Vzhledem k pozdnímu příslibu dotace z programu Ministerstva kultury a vzhledem k rozsahu prací není ale možné dodržet termín realizace projektu stanovený dodatkem č. 1 ke smlouvě č. OLP/1504/2015, tzn. do 30. června 2016, proto příjemce žádá o druhé prodloužení do 30. září 2016.

Prodloužení termínu realizace projektu „Oprava a doplnění omítek vnějšího fasádního pláště kostela sv. Jana Křtitele na pozemku stavební parcela č. 62 v k.ú. Brenná – II. etapa“ bylo konzultováno se správcem dotačního programu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který s ohledem na aktuálně přislíbené zdroje na zajištění realizace projektu a stav objektu druhé prodloužení termínu doporučuje. Objekt kostela sv. Jana Křtitele je dlouhodobě havarijní a nemůže tak být v současné době využíván ke svému účelu. Postupnou obnovou se ŘKF Brenná snaží objekt zachránit. Projekt navazuje na obnovu střechy a omítek věže kostela provedené v roce 2014. Předmětný projekt zahrnuje opravu 722 m2 omítek vnějšího fasádního pláště a výměnu 6 kusů oken v lodi kostela

Pro požadované prodloužení termínu je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/1504/2015 na základě dodatku č. 2, který uzavře Liberecký kraj a příjemce dotace. Radě kraje tak předkládáme k odsouhlasení druhé prodloužení termínu realizace projektu a znění dodatku č. 2 k výše uvedené smlouvě. Nejzazší termín ukončení podpořeného projektu byl stanoven v podmínkách podprogramu schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 32/15/ZK ze dne 27. 1. 2015 a ve vzorové smlouvě schválené usnesením č. 122/15/ZK ze dne 31. března 2015, proto jeho změnu předkládáme ke schválení zároveň Zastupitelstvu Libereckého kraje. 

2. Romanu Buckovi, nar. 21. dubna 1969, bytem Skalice u České Lípy 160, 471 17 Skalice u České Lípy (dále jen „příjemce dotace“) byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016 přiznána účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši 204.000 Kč na akci „Výměna střešní krytiny včetně poškozených částí bednění, oprava komínů, výměna klempířských prvků u domu č. p. 172 v Novém Boru“. Na základě usnesení č. 152/16/ZK připravil správce dotačního programu návrh smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, č. OLP/1331/2016. V čl. III. odst. 3 návrhu smlouvy je uveden dle údajů uvedených v žádosti o dotaci termín realizace projektu od 10. dubna 2016 do 20. května 2016. Po obdržení návrhu smlouvy kontaktoval příjemce dotace správce dotačního programu s žádostí o změnu termínu realizace projektu. Důvodem žádosti jsou nevhodné klimatické podmínky v měsíci dubnu, které znemožnily začít s pracemi dle naplánovaného harmonogramu. V důsledku toho, tak nemůže být dodržen termín realizace, který byl schválen usnesením č. 152/16/ZK. Příjemce dotace žádá o změnu termínu projektu od 12. května do 31. srpna 2016. Změna termínu realizace projektu nemá vliv na naplnění účelu projektu a dotačního programu, ani na bodové hodnocení projektu.

Pro požadovanou změnu termínu realizace je nutné upravit návrh smlouvy č. OLP/1331/2016, kdy bude změněno znění čl. III. odst. 3. Radě kraje tak předkládáme k odsouhlasení změnu termínu realizace projektu „Výměna střešní krytiny včetně poškozených částí bednění, oprava komínů, výměna klempířských prvků u domu č. p. 172 v Novém Boru“ z termínu uvedeného v žádosti o dotaci od 10. dubna 2016 do 20. května 2016 na nový termín realizace od 12. května 2016 do 31. srpna 2016. Původní termín realizace schválilo usnesením č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016 Zastupitelstvo Libereckého kraje, proto jeho změnu a nový návrh smlouvy předkládáme ke schválení zároveň Zastupitelstvu Libereckého kraje.

Příloha:
034_P01_Dodatek č. 2 smlouvy č. OLP/1504/2015
034_P02_Žádost Římskokatolické farnosti Brenná o prodloužení termínu ukončení realizace projektu
034_P03_Návrh smlouvy č. OLP/1331/2016
034_P04_Žádost Romana Bucka o změnu termínu realizace projektu