Upraveno po projednání

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	50.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1308/2016 – změna závazných parametrů projektu, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1400/2016 – změna závazných parametrů projektu, dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1325/2016 – prodloužení termínu realizace projektu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1404/16/RK	

Zpracoval:	Ing. Tereza Štochlová
zaměstnanec oddělení památkové péče
	
Projednal:	Rada kraje dne 16. 8. 2016
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury dne 25. 8. 2016

Předkládá:	Hana Maierová
náměstkyně hejtmana, řízení resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1.	žádost příjemce dotace Římskokatolické farnosti Mařenice, se sídlem Mařenice 1, 471 56 Mařenice, IČ: 62237918, o změnu závazných parametrů projektu „Restaurování vnějšího trojramenného přístupového schodiště s balustrádou“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016,	
2.	žádost příjemce dotace Římskokatolické farnosti Jezvé, se sídlem Křižíkova 49, 471 06 Horní Police, IČ: 62237764, o změnu závazných parametrů projektu „Farní kostel sv. Vavřince, Jezvé - oprava střešního pláště a krovu, 3. etapa“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016,	

3.	žádost příjemce dotace Ladislava Habáska, ''''''''' '''''''' ''''''''' ''''''''''''' '''''''''''''''' ''''''' '''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''''' ''''''''''''''''''''', o prodloužení termínu realizace projektu „Nátěry vnitřních dřevěných konstrukcí, rekonstrukce vnitřních vymazávek a podlah v 1. patře objektu č. p. 7 ve Žďáru v Podbezdězí“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016,	

rozhoduje
1.	o změně závazných parametrů projektu „Restaurování vnějšího trojramenného přístupového schodiště s balustrádou“, příjemce Římskokatolické farnosti Mařenice, z těchto:	
Název parametru	Jednotka	Hodnota	
Výroba nové dlažby podesty	m2	5,5	
Doplnění schodišťových zdí z pískovce	kpl	4	
Zemní práce – základové klenby z betonu	m3	7,6	
Výroba nových schodišťových předních stupňů	ks	7	
Výroba nových schod. stupňů levého a pravého ramene	ks	6	

na tyto nové:
Název parametru	Jednotka	Hodnota	
Výroba nové dlažby podesty	m2	1	
Restaurování dlažby podesty	m2	4,5	
Doplnění schodišťových zdí z pískovce	kpl	4	
Zemní práce – základové klenby z betonu	m3	7,6	
Výroba nových schodišťových předních stupňů	ks	7	
Výroba nových schod. stupňů levého a pravého ramene	ks	6	

2.	o změně závazných parametrů projektu „Farní kostel sv. Vavřince, Jezvé - oprava střešního pláště a krovu, 3. etapa“, příjemce Římskokatolické farnosti Jezvé, z těchto:	
Název parametru	Jednotka	Hodnota	
Výměna střešní krytiny z pálené bobrovky	m2	250	
Výměna částí krovu	mb	178	

na tyto nové:
Název parametru	Jednotka	Hodnota	
Výměna střešní krytiny z pálené bobrovky	m2	132	
Výměna částí krovu	mb	125	

3.	o prodloužení termínu realizace projektu „Nátěry vnitřních dřevěných konstrukcí, rekonstrukce vnitřních vymazávek a podlah v 1. patře objektu č. p. 7 ve Žďáru v Podbezdězí“ z 15. listopadu 2016 dle smlouvy č. OLP/1325/2016, schváleného usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016, do 15. února 2017, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 6. dubna 2017,	
schvaluje
1.	dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1308/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Restaurování vnějšího trojramenného přístupového schodiště s balustrádou“, uzavřené dne 23. května 2016 mezi Libereckým krajem a Římskokatolickou farností Mařenice, jehož předmětem je změna závazných parametrů projektu,	
2.	dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1400/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Farní kostel sv. Vavřince, Jezvé - oprava střešního pláště a krovu, 3. etapa“, uzavřené dne 23. května 2016 mezi Libereckým krajem a Římskokatolickou farností Jezvé, jehož předmětem je změna závazných parametrů projektu,	
3.	dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1325/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Nátěry vnitřních dřevěných konstrukcí, rekonstrukce vnitřních vymazávek a podlah v 1. patře objektu č. p. 7 ve Žďáru v Podbezdězí“, uzavřené dne 5. května 2016 mezi Libereckým krajem a Ladislavem Habáskem, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu,	
a ukládá
1.	Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana, pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace.	
Termín: 23. 09. 2016
2.	Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválené dodatky ke smlouvám k podpisu Haně Maierové, statutární náměstkyni hejtmana pověřené řízením resortu cestovního ruchu, památkové péče a kultury.	
Termín: 06. 10. 2016

Důvodová zpráva

1. Římskokatolické farnosti Mařenice (dále jen ŘKF Mařenice), se sídlem Mařenice 1, 471 56 Mařenice, IČ: 62237918 byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016 přiznána účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši 200.000 Kč na projekt „Restaurování vnějšího trojramenného přístupového schodiště s balustrádou“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 23. května 2016 uzavřena smlouva č. OLP/1308/2016 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace závazných parametrů uvedených v Čl. I. odst. 3 smlouvy. Příjemce požádal dopisem ze dne 21. července 2016 poskytovatele o změnu závazných parametrů projektu vzhledem k zjištěnému stavu dlažby podesty. 

Změna závazných parametrů projektu „Restaurování vnějšího trojramenného přístupového schodiště s balustrádou“ byla konzultována se správcem dotačního programu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu na místě realizace v rámci kontrolního dne 21. července 2016. Přístupové schodiště kostela sv. Máří Magdaleny se nacházelo dlouhodobě v havarijním stavu. Na základě rozkrytí dlažby podesty bylo zjištěno, že dlažba je v lepším stavu, než byl předpoklad, proto bylo rozhodnuto o výrobě pouze jedné nové dlaždice a zrestaurování zbývajících. Při realizaci stavebních prací není výjimkou nutnost odklonu od předpokládaného postupu, neboť ten musí vždy vycházet z aktuální situace a reagovat na zjištěný stav. U památkově chráněných staveb platí toto tvrzení zejména, neboť jejich obnova nese určitá specifika a přesný postup prací nelze v době přípravy plně stanovit. Na základě těchto skutečností je změna závazných parametrů projektu, jehož podstatou je zrestaurování vnějšího přístupového schodiště kostela sv. Máří Magdaleny, z hlediska zájmů památkové péče přípustná, a to i s ohledem na skutečnost, že nikterak neohrozí účelovost poskytnutých finančních prostředků. Správce dotačního titulu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu se v souvislosti s požadovanou změnou projektu zabýval i jejími případnými dopady na celkové hodnocení projektu. Požadovaná změna projektu nemá vliv na bodové hodnocení dle stanovených kritérií Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. Správce dotačního programu proto schválení změny parametrů doporučuje.
  
Novými závaznými parametry jsou:

Název parametru	Jednotka	Hodnota	
Výroba nové dlažby podesty	m2	1	
Restaurování dlažby podesty	m2	4,5	
Doplnění schodišťových zdí z pískovce	kpl	4	
Zemní práce – základové klenby z betonu	m3	7,6	
Výroba nových schodišťových předních stupňů	ks	7	
Výroba nových schod. stupňů levého a pravého ramene	ks	6	

Pro požadovanou změnu závazných parametrů je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/1308/2016 na základě dodatku č. 1, který uzavře Liberecký kraj a ŘKF Mařenice. Radě kraje tak předkládáme k odsouhlasení změnu závazných parametrů projektu a znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1308/2016. Poskytnutí neinvestiční dotace ŘKF Mařenice na projekt „Restaurování vnějšího trojramenného přístupového schodiště s balustrádou“ schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, zároveň se vzorovou smlouvou usnesením č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016.

2. Římskokatolické farnosti Jezvé (dále jen ŘKF Jezvé), se sídlem Křižíkova 49, 471 06 Horní Police, IČ: 62237764 byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016 přiznána účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši 280.000 Kč na projekt „Farní kostel sv. Vavřince, Jezvé - oprava střešního pláště a krovu, 3. etapa“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 23. května 2016 uzavřena smlouva č. OLP/1400/2016 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace závazných parametrů uvedených v Čl. I. odst. 3 smlouvy. Příjemce požádal dopisem ze dne 22. července 2016 poskytovatele o změnu závazných parametrů projektu vzhledem ke skutečně shromážděným finančním prostředkům na pokrytí spoluúčasti v letošním roce.

Změna závazných parametrů projektu „Farní kostel sv. Vavřince, Jezvé - oprava střešního pláště a krovu, 3. etapa“ byla konzultována se správcem dotačního programu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Požadovaná změna nikterak neohrozí účelovost poskytnutých finančních prostředků, ani nemá dopad na celkové hodnocení projektu dle stanovených kritérií Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. Správce dotačního programu proto schválení změny parametrů doporučuje.
  
Novými závaznými parametry jsou:

Název parametru	Jednotka	Hodnota	
Výměna střešní krytiny z pálené bobrovky	m2	132	
Výměna částí krovu	mb	125	

Pro požadovanou změnu závazných parametrů je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/1400/2016 na základě dodatku č. 1, který uzavře Liberecký kraj a ŘKF Jezvé. Radě kraje tak předkládáme k odsouhlasení změnu závazných parametrů projektu a znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1400/2016. Poskytnutí neinvestiční dotace ŘKF Jezvé na projekt „Farní kostel sv. Vavřince, Jezvé - oprava střešního pláště a krovu, 3. etapa“ schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, zároveň se vzorovou smlouvou usnesením č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016.

3. Ladislavu Habáskovi, '''''''' ''''''' ''''''''''' '''''''''''' '''''''''''''''' ''''''' ''''''''''''''''''''' '''''''''''''' ''''''''' '''''' '''''''''''''' ''''''''''''''''''' byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016 přiznána účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši 87.132 Kč na projekt „Nátěry vnitřních dřevěných konstrukcí, rekonstrukce vnitřních vymazávek a podlah v 1. patře objektu č. p. 7 ve Žďáru v Podbezdězí“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 5. května 2016 uzavřena smlouva č. OLP/1325/2016 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen ukončit projekt nejpozději do 15. listopadu 2016, jak je uvedeno v Čl. III. odst. 3 smlouvy. Příjemce požádal dopisem ze dne 26. července 2016 poskytovatele o prodloužení termínu realizace do 15. února 2017 z důvodu aktuální nespokojenosti s kvalitou práce domluvené realizátorské firmy. S nasmlouvanou firmou byla ukončena spolupráce a byla uzavřena nová smlouva o dílo s novým zhotovitelem, který se však podílí na realizaci více projektů podpořených dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje a není schopen zaručit realizaci projektu v plném rozsahu ve stanoveném termínu.
Prodloužení termínu realizace projektu „Nátěry vnitřních dřevěných konstrukcí, rekonstrukce vnitřních vymazávek a podlah v 1. patře objektu č. p. 7 ve Žďáru v Podbezdězí“ bylo konzultováno se správcem dotačního programu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který prodloužení termínu doporučuje. 

Pro požadované prodloužení termínu realizace je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/1325/2016 na základě dodatku č. 1, který uzavře Liberecký kraj a Ladislav Habásko. Radě kraje tak předkládáme k odsouhlasení prodloužení termínu realizace projektu do 15. února 2017 a znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1325/2016. Poskytnutí neinvestiční dotace Ladislavu Habáskovi na projekt „Nátěry vnitřních dřevěných konstrukcí, rekonstrukce vnitřních vymazávek a podlah v 1. patře objektu č. p. 7 ve Žďáru v Podbezdězí“ schválilo Zastupitelstvo Libereckého kraje, zároveň se vzorovou smlouvou usnesením č. 152/16/ZK ze dne 29. března 2016.

Přílohy:
050_P01_Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1308/2016
050_P02_Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1400/2016
050_P03_Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1325/2016