Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	63.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/3381/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Malá Skála	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1286/16/RK ze dne 19.7.2016	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 19. 7. 2016
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 16. 8. 2016

Předkládá:	Vít Příkaský
člen rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů  a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obec Malá Skála, se sídlem Vranové 122, 468 22 Malá Skála, IČ: 00262463, o prodloužení termínu realizace projektu „Podchycení ujíždějícího svahu místní komunikace na Záborčí“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 569/15/ZK ze dne 22.12.2015,
schvaluje
1.	prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Podchycení ujíždějícího svahu místní komunikace na Záborčí“ z 30. 9. 2016 na 30. 11. 2016, a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 11. 2016 na 19. 1. 2017, a z 31. 12. 2016 na 28. 2. 2017 pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí,	
2.	znění dodatku č. 1 ke smlouvě č.OLP/3381/2016, o poskytnutí účelové dotace  z Dotačního  fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Malá Skála, se sídlem Vranové 122, 468 22 Malá Skála, IČ: 00262463 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování.	
a ukládá
1.	Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace	
Termín: 15. 09. 2016
2.	Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek k podpisu Vítu Příkaskému, členu rady kraje, řízení resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova.	
Termín: 31. 12. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace obce Malá Skála o změnu termínu ukončení realizace projektu „Podchycení ujíždějícího svahu místní komunikace na Záborčí“.

Poskytnutí dotace na projekt bylo odsouhlaseno usnesením č. 1902/15/RK ze dne 1. 12. 2015 a schváleno zastupitelstvem usnesením č. 569/15/ZK ze dne 22. 12. 2015 rozhodnutím o poskytnutí dotace z programu 2.1 Program obnovy venkova.
Mezi Libereckým krajem a obcí Malá Skála byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje.

Ve smlouvě č. OLP/3381/2016 v článku III. bod 4. je stanoven termín pro ukončení realizace projektu “ Podchycení ujíždějícího svahu místní komunikace na Záborčí“ nejpozději do 30. 9. 2016. Dle čl. 7 musí být projekt vyúčtován nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. do 19. 11. 2016. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti, nejpozději však do 31. 12. 2016. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu rozhodnutí (dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejpozději však do 31. 12. 2016. 

Dne 12. 7. 2016 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost starosty obce Malá Skála (příloha č. 1) o změnu termínu realizace projektu „Podchycení ujíždějícího svahu místní komunikace na Záborčí“.
Na základě doporučení technického dozoru investora obec rozhodla, že konečná vrstva komunikace bude položena až po důkladném sesednutí všech konstrukčních vrstev v říjnu 2016. V současné době jsou dokončeny všechny práce na stabilizaci svahu a v říjnu dodavatelská firma dokončí povrch vozovky. 
Z výše uvedených důvodů žádá obec Malá Skála o prodloužení termínu realizace projektu „Podchycení ujíždějícího svahu místní komunikace na Záborčí“ do 30. 11. 2016. 

Na základě žádosti obce Malá Skála překládáme Zastupitelstvu Libereckého kraje dodatek 
č. 1 ke smlouvě OLP/3381/2016 o poskytnutí účelové dotace, ve kterém jsou uvedeny nové termíny pro ukončení a vyúčtování projektu. 

P01: Žádost příjemce
P02 Dodatek č. 1 k OLP/3381/2016