Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	92.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2927/2015 – investiční dotace městu Jilemnice na projekt s názvem: Jilemnice – všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1376/16/RK ze dne 16. 8. 2016	

Zpracoval:	Tomáš Pokorný
vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti, zástupce vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
	
Projednal:	Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu
Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Alena Losová
členka rady kraje, řízení resortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost města Jilemnice o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje (č. smlouvy OLP/2927/2015) na projekt s názvem Jilemnice – všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“,
schvaluje
1.	změnu termínu projektu s názvem Jilemnice – všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“ realizovaného městem Jilemnice, IČ 00275808, kterou dochází k posunu termínu ukončení realizace projektu z 31. 12. 2016 na 31. 12. 2017,	
2.	Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP2927/2015 uzavíraným mezi Libereckým krajem a městem Jilemnice	
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2927/2015 k podpisu Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje.
Termín: 30. 09. 2016

Důvodová zpráva
Zastupitelstvo Libereckého kraje, po předchozím projednání Radou Libereckého kraje a dalších příslušných orgánů kraje, na svém jednání dne 24. 11. 2015 přijalo usnesení č. 517/15/ZK, jehož citace je uvedena níže.

USNESENÍ č. 517/15/ZK
Rozhodnutí o poskytnutí dotace Městu Jilemnice na projekt: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka
Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
finanční spoluúčast Libereckého kraje na projektu: Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“ v celkové maximální výši 15.000.000 Kč v rozložení: rok 2015 – 5.000.000 Kč; v roce 2016 - 10.000.000 Kč,
rozhoduje
o poskytnutí dotace městu Jilemnice, IČ: 00275808, se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice na projekt s názvem: Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“ ve výši 15.000.000 Kč, za podmínky schválení projektu Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“ v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016
schvaluje
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/2927/2015 mezi Libereckým krajem a městem Jilemnice, IČ: 00275808, se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01  Jilemnice
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, zajistit předložení smlouvy OLP/2927/2015 k podpisu hejtmanovi Libereckého kraje, za podmínky schválení projektu Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“ v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 31. 12. 2015

V souladu s výše uvedeným usnesením a vnitřními předpisy Libereckého kraje a Krajského úřadu Libereckého kraje byly činěny administrativní kroky, které vedly k tomu, že smlouva nabyla účinnosti dne 10. 12. 2015. Následně byly realizovány kroky, které vedly k jejímu naplňování. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/2927/2015 je přílohou č. 3 této důvodové zprávy.

Dne 4. 7. 2016 byla Libereckému kraji doručena žádost města Jilemnice o změnu smlouvy spočívající v posunu termínu realizace projektu z původně plánovaného 31. 12. 2016 na 31. 12. 2017. Jako důvod pro posun termínu ukončení projektu je městem Jilemnice uváděno zrušení soutěže v rámci veřejné zakázky a nutnost opětovného vypsání otevřeného řízení formou významné veřejné zakázky. Vzhledem k této skutečnosti není město Jilemnice schopné dodržet původně stanovený termín pro ukončení realizace projektu. Žádost města Jilemnice je přílohou č. 2 této důvodové zprávy.

Resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti navrhuje uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2927/2015, který upraví termín ukončení realizace projektu. Konkrétně se jedná o:
•	Ustanovení čl. III. odst. 4, který upravuje termín realizace projektu.
•	Ustanovení čl. III. odst. 7, který upravuje termín pro předložení závěrečného vyúčtování.
•	Ustanovení čl. III. odst. 8, který upravuje povinnost města Jilemnice předložit průběžnou zprávu o realizaci projektu.

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2927/2015 je přílohou č. 1 této důvodové zprávy.

Přílohy:
P01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2927/2015
P02 Žádost města Jilemnice o změnu smlouvy
P03 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/2927/2015