Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	104.	
		
Název :	Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/313/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Svazek obcí Peklo, na projekt „Projektová dokumentace Cyklomagistrály Ploučnice – úsek D2 Stoupno – Horní Police“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1336/16/RK ze dne 16. 8. 2016	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 16. 8. 2016
     
Výbor dopravy dne 23. 8. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
znění Dodatku č. 1, kterým se mění termín realizace projektu a termín vyúčtování projektu stanovených ve smlouvě č. OLP/313/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje na projekt „Projektová dokumentace Cyklomagistrály Ploučnice – úsek D2 Stoupno – Horní Police“, uzavíraného mezi Libereckým krajem a Svazkem obcí Peklo, dobrovolný svazek obcí, Zahrádky 108, 471 01 Zahrádky, IČ: 70807604
a ukládá
Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajistit vyrozumění příjemce dotace o schváleném materiálu.
Termín: 12. 09. 2016

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je k projednání předkládán dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/313/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Svazku obcí Peklo, dobrovolný svazek obcí na projekt „Projektová dokumentace Cyklomagistrály Ploučnice – úsek D2 Stoupno – Horní Police“ uzavíraného mezi Libereckým krajem a Svazkem obcí Peklo, dobrovolný svazek obcí, se sídlem Zahrádky 108, 471 01 Zahrádky, IČ: 70807604.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o změnu termínu realizace projektu a termínu vyúčtování projektu, která byla doručena dne 22. 7. 2016. 

Příjemce dotace v žádosti o změnu projektu uvádí, že z důvodu složitosti jednání s dotčenými orgány a vlastníky pozemků není možné dodržet termín realizace projektu v rozsahu ve smlouvě uvedené, tj. do 30. 12. 2016, a vyúčtování projektu nejpozději do 19. 2. 2017. Žádá proto o změnu termínu realizace projektu z 30. 12. 2016 na 30. 6. 2017 a vyúčtování projektu do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, nejpozději do 18. 9. 2017. 
Odbor dopravy, jako správce dotace, souhlasí s těmito změnami projektu, jelikož jsou založeny na objektivní příčině.

Přílohy:
P01 Žádost o změnu projektu
P02 Dodatek č. 1 Smlouvy OLP/313/2016
P03 Smlouva č. OLP/313/2016