Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	105.	
		
Název :	Žádost o změnu projektu „Obnova povrchu silnice III/28211 Klokočí“ příjemce Obec Klokočí	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1337/16/RK ze dne 16. 8. 2016	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 16. 8. 2016
     
Výbor dopravy dne 23. 8. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o změně termínu realizace projektu „Obnova povrchu silnice III/28211 Klokočí“, příjemce Obec Klokočí, Klokočí 65, 511 01 Turnov, IČ 00580813, z termínu uvedeného v žádosti o dotaci od 1. 6. 2016 do 31. 8. 2016, na nový termín realizace od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2016 a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 20. 12. 2016,
schvaluje
nový návrh smlouvy OLP/1084/2016 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, na projekt „Obnova povrchu silnice III/28211 Klokočí“, ve výši 327.604,- Kč, uzavírané mezi Libereckým krajem a Obcí Klokočí, Klokočí 65, 511 01 Turnov, IČ 00580813 s doplněním možnosti čerpání zálohy 90% dotace na projekt „Obnova povrchu silnice III/28211 Klokočí“
a ukládá
Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajistit vyrozumění příjemce dotace o schváleném materiálu.
Termín: 12. 09. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace Obce Klokočí o změnu v projektu „Obnova povrchu silnice III/28211 Klokočí“ v části termín realizace projektu a v prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu a v doplnění smlouvy o možnost čerpání zálohy na podpořenou akci, která byla schválena zastupitelstvem usnesením č. 310/16/ZK ze dne 31. 5. 2016. 

Dne 5. 8. 2016 byla odboru dopravy doručena žádost místostarostky Obce Klokočí (příloha č. 1) o změnu termínu realizace projektu a doplnění možnosti čerpání zálohy, ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace OLP/1084/2016. Důvodem žádosti je získání možnosti čerpání zálohy na financování projektu, vzhledem k nedostatečnému rozpočtu obce. Vzhledem k těmto okolnostem Obec Klokočí zároveň požádala o posun termínu realizace akce. 

Obec Klokočí požaduje doplnit do smlouvy možnost čerpání zálohy na realizaci akce a změnu termínu realizace aktivit, a to od 1. 6. 2016 do 31. 10. 2016 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 20. 12. 2016. 
Odbor dopravy, jako správce dotace, souhlasí s těmito změnami projektu, jelikož jsou založeny na objektivní příčině.

Součástí materiálu je též Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Klokočí dne 25. 7. 2016 (příloha č. 2). Dne 25. 7. 2016 na Veřejném zasedání ZO Klokočí byl odvolán z výkonu funkce starosty obce Tomáš Opočenský. Nebyl zvolen nový starosta. ZO Klokočí jednohlasně odsouhlasilo zastupování obce místostarostkou Ludmilou Hudskou.

P01: Žádost příjemce
P02: Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Klokočí dne 25. 7. 2016
P03: Smlouva