Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	106.	
		
Název :	Žádost o změnu projektu „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“ příjemce Město Mimoň	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1338/16/RK ze dne 16. 8. 2016	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 16. 8. 2016
     
Výbor dopravy dne 23. 8. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
rozhoduje
o změně termínu realizace projektu „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“, příjemce Město Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČ 00260746, z termínu uvedeného v žádosti o dotaci od 1. 4. 2016 do 31. 1. 2017, schváleného usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 308/16/ZK ze dne 31. 5. 2016, na nový termín realizace od 1. 9. 2016 do 30. 12. 2017 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 18. 2. 2018,
schvaluje
změnu návrhu smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy č. OLP/2649/2016, na projekt „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“ ve výši 1.000.000, uzavírané mezi Libereckým krajem a Městem Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČ 00260746
a ukládá
Vladimíru Mastníkovi, členu rady kraje, řízení resortu dopravy, zajistit vyrozumění příjemce dotace o schváleném materiálu.
Termín: 12. 09. 2016

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace Města Mimoň o změnu v projektu „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“ v části termín realizace projektu a v prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu, který byl odsouhlasen usnesením č. 773/16/RK ze dne 3. 5. 2016 a schválen zastupitelstvem usnesením č. 308/16/ZK ze dne 31. 5. 2016 Městu Mimoň, rozhodnutím o poskytnutí dotace z programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy.

Městu Mimoň byla na základě předložené žádosti o dotaci z Programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy schválena dotace na projekt „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“ s termínem realizace projektu od 1. 4. 2016 do 31. 1. 2017. 

Dne 1. 6. 2016 byla odboru dopravy doručena žádost starosty Města Mimoň (příloha č. 1) o změnu termínu realizace projektu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. Důvodem žádosti o posun termínu realizace projektu je neobdržení dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále SFDI) v 1. termínu roku 2016. Město Mimoň bude svou žádost o dotaci ze SFDI uplatňovat znovu v letním termínu 2016. 
Vzhledem k těmto okolnostem žádá Město Mimoň o schválení změny termínu realizace aktivit, a to od 1. 9. 2016 do 30. 12. 2017 a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do 18. 2. 2018. 

Uvedená změna nemá vliv na bodové hodnocení projektu.

Z důvodu novely zákona č. 129/2000 Sb. o krajích jsou nově současně s rozhodnutím o poskytnutí dotace schvalovány v usneseních kromě výše dotace, závazných parametrů i termín realizace projektu. 
Z tohoto důvodu předkládáme orgánům kraje změnu termínu realizace projektu, který bude uveden ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace, jejíž vzor byl schválen zastupitelstvem usnesením číslo 308/16/ZK dne 31. 5. 2017.

P01: Žádost příjemce
P02: Smlouva