Projednáno - usnesení přijato

7. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.08.2016

Bod pořadu jednání:	109.	
		
Název :	Změna rozpočtu - rozpočtové opatření č. 269/16 – navýšení příjmů kraje a navýšení kapitoly 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy, poskytnutí investičního příspěvku KSS LK na akci „úprava křižovatky silnic II. třídy v lokalitě Zelený Háj“ včetně podmínek stanovených zřizovatelem	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1344/16/RK ze dne 16. 8. 2016	

Zpracoval:	Ing. Pavel Schröter
ekonom odboru dopravy
	
Projednal:	Rada kraje dne 16. 8. 2016
     
Výbor dopravy dne 23. 8. 2016
     
Finanční výbor dne 25. 8. 2016

Předkládá:	Vladimír Mastník
člen rady kraje, řízení resortu dopravy
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
změnu rozpočtu - rozpočtové opatření č. 269/16, kterým se:
1.	navyšují příjmy kraje v celkové výši 500.000 Kč, a to:	
     	a)	jakožto pokuta od společnosti SVS - stavitelství s.r.o. týkající se akce „III/27716 Český Dub - havárie propustku“ ve výši 267.632 Kč,	
     	b)	zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 ve výši 22.038 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním investiční dotace poskytnuté na akci „přeložka ČEZ na akci „Rekonstrukce mostu Jablonec nad Nisou, nám. B. Němcové III/28733-1“ dle smlouvy č. OLP/3220/2014,	
     	c)	zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 ve výši 136.360 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním neinvestiční dotace poskytnuté na akci „příprava a projektové dokumentace havarijních propustků“ dle smlouvy č. OLP/448/2015,	
     	d)	zaslaných Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06  Liberec 6, IČ 70946078 ve výši 73.970 Kč v souvislosti se závěrečným vyúčtováním neinvestiční dotace poskytnuté na akci „regulace provozu a výsprava cest v areálu bývalého vojenského letiště Hradčany“ dle smlouvy č. OLP/1279/2015,	
2.	navyšují výdaje v kapitole 912 06 – Účelové příspěvky PO, odbor dopravy na akci „úprava křižovatky silnic II. třídy v lokalitě Zelený Háj“ o částku 500.000 Kč	
a ukládá
Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu ekonomiky, investic, správy majetku a informatiky, aktualizovat stávající rozpočet Libereckého kraje na rok 2016.
Termín: 30. 09. 2016

Důvodová zpráva
Změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 73/16 byla zapojena částka ve výši 1.000.000 Kč na akci „úprava křižovatky silnic II. třídy v lokalitě Zelený Háj“ a KSS LK byl poskytnut mimořádný účelový investiční příspěvek ve výši 1.000.000 Kč. Částka 1.000.000 Kč byla stanovena odhadem na základě projektové dokumentace ve stupni studie, která byla zpracována samosprávou obce. Na základě zpracování podrobnějšího stupně projektové dokumentace a po projednání dokumentace s dotčenými orgány částka vzrostla na 1.900.000 Kč.  
KSS LK formou výběrového řízení zajistila výběr zhotovitele. Po výběrovém řízení na dodavatele byla daná akce zesmluvněna za 1.509.707,08 Kč. Z tohoto důvodu žádá KSS LK navýšení mimořádného příspěvku o částku 500.000 Kč.
Předkladatel navrhuje navýšení mimořádného příspěvku a navrhuje zapojit následující příjmy:
Na základě veřejné zakázky byla mezi Libereckým krajem a společností SVS - stavitelství s.r.o. uzavřena smlouva o provedení stavby č. OLP/191/2015 týkající se akce „III/27716 – Český Dub – havárie propustku“, která byla na částku 679.046 Kč včetně DPH. V roce 2015 nebylo uhrazeno z výše uvedené částky vůbec nic. Proto byla tato částka převedena do rozpočtu roku 2016 změnou rozpočtu – rozpočtovým opatřením č. 38/16. Zhotovitel u akce „III/27716 – Český Dub – havárie propustku“ porušil povinnost stanovenou v článku VII. odst. 3 výše uvedené smlouvy a předal dílo o 124 dní později. Libereckému kraji tímto vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty dle článku XIII. odst. 1 smlouvy v celkové výši 421.008,52 Kč. Zhotovitel vystavil poslední fakturu ve výši 674.039 Kč, která byla snížena o výše uvedenou pokutu. Navrhovatel navrhuje zapojit do rozpočtu roku 2016 částku ve výši 267.632 Kč.
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté investiční dotace na akci „přeložka ČEZ na akci „Rekonstrukce mostu Jablonec nad Nisou, nám. B. Němcové III/28733-1“ týkající se smlouvy č. OLP/3220/2014 vrátila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace (KSS LK) dne 22. 7. 2016 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 22.038 Kč. Navrhovatel navrhuje tuto částku zapojit do rozpočtu roku 2016. 
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté neinvestiční dotace na akci „příprava a projektové dokumentace havarijních propustků“ týkající se smlouvy č. OLP/448/2015 vrátila KSS LK dne 27. 6. 2016 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 136.360 Kč. Navrhovatel navrhuje tuto částku zapojit do rozpočtu roku 2016. 
Z důvodu závěrečného vyúčtování přijaté neinvestiční dotace na akci „regulace provozu a výsprava cest v areálu bývalého vojenského letiště Hradčany“ týkající se smlouvy č. OLP/1279/2015 vrátila KSS LK dne 9. 2. 2016 na bankovní účet Libereckého kraje částku ve výši 73.970 Kč. Navrhovatel navrhuje tuto částku zapojit do rozpočtu roku 2016. 

Přílohy
P01_tabulky_ZR-RO_269-16
P02_zadost_KSS_LK
P03_foto_prubeh_stavby_Zeleny_Haj