Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.11.2017

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2879/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2049/17/RK	

Zpracoval:	Ing. Naďa Veselá
vedoucí oddělení ekonomiky a zdravotní politiky
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 7. 11. 2017, usnesení č. 2049/17/RK
     
Výbor finanční dne 24. 11. 2017
     
Výbor zdravotnictví dne 27. 11. 2017

Předkládá:	MUDr. Přemysl Sobotka
náměstek hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ 46744991, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I-Staré Město, o prodloužení termínu realizace projektu „Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“, na jehož realizaci byla přiznána dotace na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 505/15/ZK ze dne 24. 11. 2015,
rozhoduje
o prodloužení termínu realizace projektu „Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“, schváleného usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 505/15/ZK ze dne 24. 11. 2015, z  31. 12. 2017 do 31. 12. 2018, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2018 do 19. 2. 2019,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2879/2015 o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, IČ 46744991, se sídlem Klášterní 954/5, 460 01 Liberec I-Staré Město, na projekt „Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“, kterým se mění termín ukončení realizace projektu a závěrečného vyúčtování
a ukládá
MUDr. Přemyslu Sobotkovi, náměstkovi hejtmana, řízení rezortu zdravotnictví, informovat o výsledku MUDr. Jana Lejska, ředitele Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje, příspěvkové organizace.
Termín: 15. 12. 2017

Důvodová zpráva
Liberecký kraj a Zdravotnická záchranná služba LK uzavřely dne 10. prosince 2015 smlouvu o poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2879/2015. Předmětem této smlouvy je poskytnutí investiční účelové dotace ve výši 1.500.000 Kč Zdravotnické záchranné službě Libereckého kraje (dále jen ZZS LK) z rozpočtu Libereckého kraje na projekt „Realizace přístavby objektu výjezdové základny na letišti v Liberci“. Termín ukončení realizace projektu je nejpozději do 31. 12. 2017. Odbor zdravotnictví obdržel od ZZS LK žádost o prodloužení termínu realizace do 31. 12. 2018. Hlavním důvodem byl vleklý odkup pozemků od Statutárního města Liberec a zapracování požadavků na změnu původního projektu z prostorových důvodů. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace rekonstrukce a dostavby výjezdové základny Letecké zdravotnické služby.  Proto je nereálné vyčerpání finančních prostředků do konce roku 2017 a ZZS LK žádá o prodloužení čerpání finančních prostředků ve výši 1.500.000 Kč do konce roku 2018.
Na základě žádosti ZZS LK byl zpracován dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2879/2015. V dodatku dochází ke změně článku III., bodu 4 a 6 smlouvy, kde dochází ke změně termínu ukončení realizace projektu nejpozději 31. 12. 2018 a předložení vyúčtování projektu nejpozději do 19. 2. 2019. 

Přílohy:
Příloha č. 1 – dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2879/2015
Příloha č. 2 – smlouva OLP/2879/2015