Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.11.2017

Bod pořadu jednání:	29.	
		
Název :	Dodatky ke smlouvám č. OLP/1961/2017 a OLP/1860/2017 o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch - změna termínu realizace projektů a posun závěrečného vyúčtování projektů	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2073/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Lucie Prandnerová
vedoucí oddělení památkové péče
	
Projednal:	Rada kraje dne 7. 11. 2017
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury                                 dne 14. 11. 2017

Předkládá:	Ing. Květa Vinklátová
členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
a)	žádost příjemce dotace Římskokatolické farnosti Rokytnice nad Jizerou, se sídlem Dolní Rokytnice 15, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 1, IČ 49295888, o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova fasády a restaurování oken kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou – I. etapa“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK ze dne 30. 5. 2017,	
b)	žádost příjemce dotace Obce Sloup v Čechách, se sídlem Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách, IČ 00525677, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava střešního pláště Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“, na jehož realizaci byla přiznána účelová dotace z oblasti podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 271/17/ZK ze dne 27. 6. 2017,	
rozhoduje
a)	o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova fasády a restaurování oken kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou – I. etapa“ z 15. 11. 2017 na 31. 5. 2018 a o prodloužení termínu pro podání vyúčtování z 1. 12. 2017 na 30. 6. 2018,	
b)	o změně závazného parametru projektu „Oprava střešního pláště Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“ z tohoto:	
Název parametru smlouvy	Jednotka	Hodnota	
Oprava krovu střechy	Komplet	1	

na tento nový:
Název parametru smlouvy	Jednotka	Hodnota	
Oprava hlavního krovu střechy	Komplet	1	

c)	o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava střešního pláště Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“ z 30. 11. 2017 na 15. 12. 2017 a o prodloužení termínu pro podání vyúčtování z 19. 1. 2018 na 31. 1. 2018,	
schvaluje
a)	dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1961/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Obnova fasády a restaurování oken kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou – I. etapa“, uzavřené dne 14. 7. 2017, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu a termínu pro podání závěrečného vyúčtování,	
b)	dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1860/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch na projekt „Oprava střešního pláště Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“ uzavřené dne 24. 8. 2017, jehož předmětem je změna závazného parametru smlouvy a termínu ukončení realizace projektu a termínu pro podání závěrečného vyúčtování	
a ukládá
a)	Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace	
Termín: 20. 12. 2017
b)	Ing. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválené dodatky ke smlouvám k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.	
Termín: 20. 12. 2017

Důvodová zpráva

1.	
Římskokatolické farnosti Rokytnice nad Jizerou, se sídlem Dolní Rokytnice 15, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 1, byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK ze dne 30. 5. 2017 přiznána účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši 300.000,- Kč na projekt „Obnova fasády a restaurování oken kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou  - I. etapa“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 14. 7. 2017 uzavřena smlouva č. OLP/1961/2017 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen realizovat projekt v termínu uvedeném v Čl. III odst. 4 smlouvy. Příjemce požádal dopisem ze dne 11. 10. 2017 poskytovatele o změnu termínu realizace projektu to vzhledem k tomu, že při provádění prací došlo k úpravě technologie při obnově fasády kostela sv. Michaela Archanděla a prodloužení realizace vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám doprovázejícím realizaci stavby. Během stavby byl zjištěn větší rozsah poškození kamenných prvků fasády, technologie opravy omítek byla upravena vzhledem k tomu, že původní omítky bylo možné zčásti pouze zpevnit a zachovat na místě, nové omítky byly doplněny lokálně na místech, kde nebylo možné zachovat kvůli úplné degradaci omítky původní. Z hlediska památkové péče je použitá technologie pro obnovu omítek pro autentickou materiálovou výpověď památky příznivější, než úplné odstranění omítek a nahrazení zcela novou omítkovou vrstvou. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, kdy v září bylo velmi chladné počasí, znemožňující provádění mokrých procesů (nových omítek), došlo k prodloužení realizace obnovy omítek. Restaurování oken bylo již v září dokončeno, díky prodloužení realizace obnovy omítek dojde ke zpoždění u montáže již zrestaurovaných oken, která se umísťují na objekt až po dokončení obnovy fasády, aby nedošlo k jejich poškození při fasádních pracích. Následně požádal příjemce o nový termín ukončení realizace dotace a to vzhledem k tomu, že práce nelze provádět v zimním období

Změna závazných parametrů projektu „Obnova fasády a restaurování oken kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou  - I. etapa“ byla konzultována se správcem dotačního programu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Žadatel uvedl v žádosti o dotaci, že bude projekt realizovat mj. v rozsahu 650 m2 fasády. Tato hodnota parametru byla uvedena též v čl. I. odst. 3 smlouvy o poskytnutí dotace. Ve své žádosti příjemce předložil nutnost změnit technologii obnovy fasády, rozsah obnovy však zůstane zachován. Vzhledem ke změně technologie provádění obnovy fasády a vzhledem k nepřízni počasí a nemožnosti realizovat práce v zimním období, je nutné prodloužit termín realizace obnovy fasády kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou z 15. 11. 2017 na 31. 5. 2018.		
              
Prodloužení termínu realizace projektu „Obnova fasády a restaurování oken kostela sv. Michaela Archanděla v Rokytnici nad Jizerou – I. etapa“ bylo konzultováno se správcem dotačního programu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který prodloužení termínu doporučuje. Požadovaná změna nikterak neohrozí účelovost poskytnutých finančních prostředků, ani nemá dopad na celkové hodnocení projektu dle stanovených kritérií Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji.

2.	
Obci Sloup v Čechách, se sídlem Komenského 236, 471 52 Sloup v Čechách, IČ 00525677, byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 271/17/ZK ze dne 27. 6. 2017 přiznána účelová dotace z rozpočtu kraje na základě individuální žádosti o dotaci z oblasti podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch – kapitoly 917 07 – Transfery ve výši 500.000 Kč na projekt „Oprava střešního pláště Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 24. 8. 2017 uzavřena smlouva č. OLP/1860/2017 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace závazných parametrů uvedených v Čl. I odst. 3 smlouvy a v termínu uvedeném v Čl. III. odst. 4 smlouvy.  Příjemce dotace informoval dne 12. října 2017 poskytovatele o změnu termínu realizace projektu to vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám a k většímu rozsahu poškození krovu střechy kaple, která byla dlouhodobě v havarijním stavu, a několik let do ní zatékalo. O prodloužení termínu realizace uzavřel příjemce dotace s realizační firmou dodatek ke smlouvě č. 1, který zaslal poskytovateli dotace i spolu s novým rozpočtem projektu. I když je celkový rozpočet snížen na 910.000 Kč bez DPH, bude provedena oprava krovu hlavní střechy, a tudíž příjemce dotace žádá o změnu termínu realizace projektu a posun termínu vyúčtování dotace a změnu závazného parametru smlouvy v Čl. I odst. 3, který zněl na „opravu krovu střechy“ a nyní bude upřesněn na „opravu krovu hlavní střechy“.

Prodloužení termínu realizace projektu a změnu závazného parametru smlouvy „Oprava střešního pláště Kaple sv. Jana Nepomuckého ve Sloupu v Čechách“ bylo konzultováno se správcem dotačního programu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který prodloužení termínu doporučuje. Požadovaná změna nikterak neohrozí účelovost poskytnutých finančních prostředků.
    
Přílohy:

029_P01 Žádost o změnu termínu realizace projektu ŘKF Rokytnice nad Jizerou I.
029_P02 Žádost o změnu termínu realizace projektu ŘKF Rokytnice nad Jizerou II.
029_P03 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1961/2017 
029_P04 Žádost o změnu závazného parametru a změnu termínu realizace projektu
029_P05 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1860/2017