Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.11.2017

Bod pořadu jednání:	37.	
		
Název :	Žádost o změnu projektu „Obnova a rozvoj obecní infrastruktury na území mikroregionu“ příjemce Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2092/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 7. 11. 2017
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 23.11.2017

Předkládá:	Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko o změnu v projektu „Obnova a rozvoj obecní infrastruktury na území mikroregionu“
mění
část usnesení č. 340/17/ZK ze dne 29.8. 2017 v částech termín realizace projektu a parametry projektu „Obnova a rozvoj obecní infrastruktury na území mikroregionu“ příjemce Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko, náměstí.1.máje 1, 463 31 Chrastava, IČ 70908222 takto:
Poř. číslo	28	
IČ	70908222	
Příjemce dotace/ žadatel	Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko	
Dotační titul	DT7	
Název projektu	Obnova a rozvoj obecní infrastruktury na uzemí mikroregionu	
Účel projektu	Účelem projektu je obnova a rozvoj obecní infrastruktury jako jsou místní komunikace, chodníky či veřejné osvětlení,  kdy rozvoj navazuje na dřívější mikroregionem realizované projekty.	
Parametry projektu	záměry obcí-ks-9	
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	1.000.000	
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	30	
Požadované prostředky (Kč)	300.000	
Investice/           neinvestice	Neivestiční	
Termín realizace projektu	1.2.2017 - 30.06.2018	

a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace Mikroregion Hrádecko-Chrastavsko o změně v projektu.
Termín: 31. 12. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace Mikroregion Hrádecko Chrastavsko o změnu v projektu „Obnova a rozvoj obecní infrastruktury na území mikroregionu“ v částech termín realizace projektu a parametry projektu. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 29.8.2017 rozhodlo o poskytnutí dotace z programu 2.1 Program obnovy venkova výše uvedenému příjemci usnesením č. 340/17/ZK. 

Mikroregionu Hrádecko- Chrastavsko byla na základě předložené žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova schválena účelová neinvestiční dotace na projekt „Obnova a rozvoj obecní infrastruktury na území mikroregionu“ s termínem realizace projektu od 1.2.2017 do 31.10.2017. 
Dne 31. 10. 2017 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost předsedkyně Mikroregionu Hrádecko-Chrastavsko (příloha č. 1) o změny v projektu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace s níže uvedenými důvody:

1) Změna termínu realizace projektu:
Žadatel o dotaci si při podání žádosti neuvědomil, že Zastupitelstvo Libereckého kraje bude schvalovat poskytnutí dotací v srpnu 2017 a na zkoordinování takto rozsáhlého projektu zahrnujícího akce 9 členských obcí  původně uvedený termín realizace do 31.10.2017 není reálný. Z tohoto důvodu   žádá předsedkyně mikroregionu schválení změny termínu ukončení realizace projektu, a to z 31.10.2017 na 30.6.2018. 

2) Změna parametru projektu:
Po potvrzení přidělené dotace mikroregion začal uzavírat smlouvy s dodavateli. Jedna členská obec plánovala původně 2 akce, ale vzhledem k finanční náročnosti se rozhodla zrealizovat pouze 1 akci. Finanční náročnost jednotlivých akcí je i důvodem zvýšení celkových nákladů. Z výše uvedeného důvodu žádá předsedkyně mikroregionu o změnu parametru projektu z 10 ks záměrů obcí na 9 ks záměrů obcí. 

Uvedené změny nemají vliv na bodové hodnocení projektu.

Po schválení změn v usneseních orgánů kraje, budou změny projektu uvedeny ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace, jejíž vzor byl schválen zastupitelstvem usnesením číslo 340/17/ZK dne 29.8.2017.

P01: Žádost příjemce