Projednáno - usnesení přijato

10. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.11.2017

Bod pořadu jednání:	45.	
		
Název :	Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/4838/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Město Rokytnice nad Jizerou, na projekt „Rozšíření bikeparku Rokytnice nad Jizerou“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2060/17/RK ze dne 7. 11. 2017	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne  7. 11. 2017
     
Výbor dopravy dne 21. 11. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 00276057, ze dne 18. 10. 2017 ve věci změny termínu ukončení realizace projektu „Rozšíření bikeparku Rokytnice nad Jizerou“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Rozšíření bikeparku Rokytnice nad Jizerou“, ze dne 15. 12. 2017 na 30. 6. 2018, a s prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 3. 2. 2018 na 19. 8. 2018, z důvodu komplikací ve správním řízení ve věci projednání trasy, které vyžadují vydání výjimky ochrany přírody v národním parku,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/4838/2016 mezi Libereckým krajem a Městem Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 00276057, kterým se mění termín ukončení realizace projektu z 15. 12. 2017 na 30. 6. 2018 a termín závěrečného vyúčtování projektu z 3. 2. 2018 na 19. 8. 2018
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,	
Termín: 05. 12. 2017
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek zajistit podpis Dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/4838/2016.	
Termín: 22. 12. 2017

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je k projednání předkládán Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/4838/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu na projekt „Rozšíření bikeparku Rokytnice nad Jizerou“ uzavíraného mezi Libereckým krajem a příjemcem Městem Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou, IČ 00276057.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce dotace o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 15. 12. 2017 na 30. 6. 2018 a termínu závěrečného vyúčtování z 3. 2. 2018 na 19. 8. 2018 u výše uvedeného projektu, která byla odboru dopravy doručena dne 18. 10. 2017.
Příjemce ve své žádosti uvádí, že projektová dokumentace byla zpracovatelem firmou SNOWPLAN, spol. s r. o., předána 22. 12. 2016.  V lednu 2017 začalo projednání dokumentace rozšíření bikeparku s orgány státní správy. Na jaře 2017 pokračovala jednání v terénu v době vegetace chráněných i ostatních sledovaných druhů rostlin, na základě kterých Správa KRNAP stanovila první požadavky na úpravu tras v projektu. V červnu a červenci po dalších terénních šetřeních byly projektantem zapracovány nové požadavky na úpravu tras s tím, že na jednu trasu si KRNAP vyžádal vydání výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů rostlin. Tato výjimka ochrany přírody v národním parku se uděluje ve správním řízení a celé projednání se tedy dostává do skluzu. Z toho důvodu příjemce dotace rozdělil povolovací projednání na 2 samostatná řízení. V prvním správním řízení se projednávají trasy, které nevyžadují vydání výjimky ochrany přírody v národním parku,  a ve druhém správním řízení se projednává trasa, pro kterou musí být ještě před konečným stanoviskem KRNAPu vydaná výjimka.
Příjemce předpokládá, že v obou samostatných řízeních budou příslušná povolení vydaná v navrhovaném prodlouženém termínu realizace projektu, tj. do 30. 6. 2018.
V podmínkách Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – Podpora projektové přípravy, schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 309/16/ZK, byl stanoven termín realizace aktivit od 1. 1. 2016 – 30. 12. 2017. Smlouva s příjemcem byla podepsána 24. 10.2016. Požadovaný posun termínu realizace projektu do 30. 6. 2018, je již nad rámec termínu realizace aktivit od 1. 1. 2016 – 30. 12. 2017. Požadovaná změna oproti schváleným podmínkám a vyhlášení programu Dotačního fondu LK 6.3 Podpora projektové přípravy nemá dodatečný dopad na provedené bodové hodnocení projektů, neovlivní účel, na který byla dotace poskytnuta, ani závazné parametry projektu.

Resort dopravy z výše uvedených důvodů konstatuje, že pokud dostane příjemce možnost pokračovat v projektové přípravě prodloužením termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování projektu, bude bikepark vyprojektován a následně i postaven a tím se zvýší turistický potenciál oblasti v letním a v podzimním období. Město Rokytnice nad Jizerou je smlouvou č. OLP/4838/2016 zavázáno k následné stavební realizaci vyprojektovaného úseku.

Na základě žádosti příjemce dotace předkládá odbor dopravy, jako administrátor dotace,  dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/4838/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, v kterém je prodloužen termín realizace projektu a termín závěrečného vyúčtování projektu, ke schválení orgánům kraje. 

Přílohy:
P01 Žádost o změnu projektu
P02 Smlouva OLP_4838_2016 
P03 Dodatek č. 1_smlouvy_OLP_4838_2016