Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	9.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1199/2017 s obcí Jestřabí v Krkonoších – změna termínu ukončení realizace projektu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2241/17/RK	

Zpracoval:	Bc. Zuzana Škodová
odborný zaměstnanec oddělení krizového řízení - dotace
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 12. 2017

Předkládá:	Martin Půta
hejtman
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Jestřabí v Krkonoších, se sídlem Jestřabí v Krkonoších 42, 51401 Jestřabí v Krkonoších, IČO: 00275794, o prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úprava garážových vjezdů a výměna vrat hasičské zbrojnice“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 185/17/ZK dne 30. 5. 2017,
schvaluje
1) prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Stavební úprava garážových vjezdů a výměna vrat hasičské zbrojnice“ z 31. 12. 2017 na 30. 9. 2018, a termín pro předložení závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2018 na 19. 11. 2018,
2) dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1199/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Jestřabí v Krkonoších, se sídlem Jestřabí v Krkonoších 42, 51401 Jestřabí v Krkonoších, IČO: 00275794, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a předložení závěrečného vyúčtování,
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/1199/2017, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 29. 12. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem předkládaného materiálu je schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, č. OLP/1199/2017 mezi Libereckým krajem a obcí Jestřabí v Krkonoších, se sídlem Jestřabí v Krkonoších 42, 51401 Jestřabí v Krkonoších, IČO: 00275794, o prodloužení termínu realizace projektu „Stavební úprava garážových vjezdů a výměna vrat hasičské zbrojnice“.
Poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje obci Jestřabí v Krkonoších ve výši 
100.000,- Kč investičního charakteru na projekt „Stavební úprava garážových vjezdů a výměna vrat hasičské zbrojnice“, včetně vzorové smlouvy o poskytnutí dotace, bylo schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 30. 5. 2017 usnesením č. 185/17/ZK. 
Podepsaná smlouva stanoví v článku III., bod 4) termín realizace projektu do 31. 12. 2017. Tuto lhůtu však není možné dodržet z důvodů, které obec Jestřabí v Krkonoších uvádí ve své žádosti (příloha č. 1). Zahájení realizace projektu bylo zpožděno především dlouho trvajícím stavebním řízením a následně prodlouženou dodací lhůtou garážových vrat. Nepříznivé klimatické podmínky již nedovolují realizaci projektu dokončit v původním termínu. Obec Jestřabí v Krkonoších tedy žádá o prodloužení termínu realizace akce do 30. 9. 2018, aby byla schopna zajistit řádnou realizaci projektu.
Z výše uvedeného důvodu je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1199/2017, kterým se prodlužuje doba termínu realizace z 31. 12. 2017 na 30. 9. 2018 a zároveň lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2018 na nejpozději do 19. 11. 2018.

Přílohy:
1. Žádost o změnu smlouvy
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č OLP/1199/2017
3. Původní smlouva ev. č. OLP/1199/2017