Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	12.	
		
Název :	Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2649/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Město Mimoň na projekt „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2395/17/mRK z 11. 12. 2017	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Mimořádná rada Libereckého kraje dne 11. 12. 2017
     
Výbor dopravy dne 12. 12. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČ 00260746, ze dne 1. 12. 2017 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“ ze dne 30. 12. 2017 na 30. 12. 2018 a o změně termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2018 na 18. 2. 2019, z důvodu problematických majetkoprávních vztahů v rámci stavby cyklostezky – Zámecký most – Srní Potok,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2649/2016, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“ z 30. 12. 2017 na 30. 12. 2018 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2018 na 18. 2. 2019
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,	
Termín: 20. 12. 2017
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2649/2016.	
Termín: 30. 12. 2017

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je k projednání předkládán Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2649/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu na projekt „Cyklostezka – Zámecký most – Srní Potok“ uzavíraný mezi Libereckým krajem a příjemcem Městem Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČ 00260746.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 30. 12. 2017 na 30. 12. 2018 u výše uvedeného projektu, která byla odboru dopravy doručena dne 1. 12. 2017.

Příjemce dotace v žádosti o změnu projektu uvádí, že změnu termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování požaduje z důvodu problematických majetkoprávních vztahů v rámci v rámci stavby cyklostezky – Zámecký most – Srní Potok. Vzhledem k časové náročnosti výstavby cyklostezky – Zámecký most – Srní Potok nelze termín ukončení realizace projektu splnit. 

V podmínkách Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.1 – rozvoj cyklistické dopravy schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 49/16/ZK byl stanoven termín realizace aktivit od 1. 1. 2015 – 30. 12. 2017. Smlouva s příjemcem byla podepsána 7. 11. 2016 a realizaci příjemce dle žádosti o dotaci zahájil 1. 9. 2016.

Resort dopravy konstatuje, že prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 12. 2017 na 30. 12. 2018 a termínu závěrečného vyúčtování z 18. 2. 2018 na 18. 2. 2019 u výše uvedeného projektu by bylo již nad rámec termínu realizace aktivit od 1. 1. 2015 – 30. 12. 2017 stanoveného v příslušném Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.1 – rozvoj cyklistické dopravy schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 49/16/ZK. Požadovaná změna, oproti schváleným podmínkám a vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy, nemá dodatečný dopad na provedené bodové hodnocení projektů, neovlivní účel, na který byla dotace poskytnuta, ani závazné parametry projektu. 

Z výše uvedených důvodů je pravděpodobné, že pokud dostane příjemce možnost pokračovat ve výstavbě cyklostezky prodloužením termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování projektu, bude úsek cyklostezky dokončen a město nepřijde o přidělenou dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Dostavbou úseku dojde jednoznačně ke zvýšení podílu cyklodopravy, jakožto udržitelné formy dopravy, při každodenní dojížďce za prací a zároveň bude zkvalitněna celá dálková trasa z hlediska turistického potenciálu.

Z výše uvedených důvodů, na základě žádosti příjemce dotace předkládá odbor dopravy, jako administrátor dotace,  dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2649/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, v kterém je prodloužen termín realizace projektu a termín závěrečného vyúčtování projektu, ke schválení orgánům kraje. 

Přílohy:
012_P01 Žádost o změnu projektu
012_P02 Smlouva OLP/2649/2016 
012_P03 Dodatek č. 1 Smlouvy OLP/2649/2016