Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Žádost o změnu projektu „Rekonstrukce obecních komunikací v intravilánu obce Zlatá Olešnice“ příjemce obec Zlatá Olešnice	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2333/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 5. 12. 2017
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 14.12.2017

Předkládá:	Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Zlatá Olešnice o změnu v projektu „Rekonstrukce obecních komunikací v intravilánu obce Zlatá Olešnice“
mění
část usnesení č. 340/17/ZK ze dne 29.8. 2017 v části termín realizace projektu „Rekonstrukce obecních komunikací v intravilánu obce Zlatá Olešnice“ příjemce obec Zlatá Olešnice, č.p.172, 468 47 Zlatá Olešnice, IČ 00262625 takto:
Poř. číslo	61	
IČ	00262625	
Příjemce dotace/ žadatel	Obec Zlatá Olešnice	
Dotační titul	DT4	
Název projektu	Rekonstrukce obecních komunikací v intravilánu obce Zlatá Olešnice	
Účel projektu	Pokračování v důkladných opravách silnic v intravilánu obce. Toto bylo schváleno v rozvojovém plánu obce a rovněž v rozpočtovém výhledu obce na roky 2016 až 2020, kterým chce vedení obce dostát a zabezpečit občanům důstojný příjezd k domům.	
Parametry projektu	opravená a vysfaltovaná komunikace-m-340	
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	900.000	
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	33,34	
Požadované prostředky (Kč)	300.000	
Investice/           neinvestice	Investiční	
Termín realizace projektu	1.7.2017 - 30.9.2018	

a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace obec Zlatá Olešnice o změně v projektu.
Termín: 31. 12. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace obce Zlatá Olešnice o změnu v projektu „Rekonstrukce obecních komunikací v intravilánu obce Zlatá Olešnice“ v části termín realizace projektu. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 29.8.2017 rozhodlo o poskytnutí dotace z programu 2.1 Program obnovy venkova výše uvedenému příjemci usnesením č. 340/17/ZK. 

Obci Zlatá Olešnice byla na základě předložené žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova schválena účelová investiční dotace na projekt „Rekonstrukce obecních komunikací v intravilánu obce Zlatá Olešnice“ s termínem realizace projektu od 1.7.2017 do 31.12.2017. 

Dne 22. 11. 2017 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost starosty obce Zlatá Olešnice (příloha č. 1) o změnu termínu realizace projektu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
Firma STRABAG a.s., která uspěla v poptávkovém řízení na realizaci projektu, v důsledku vytíženosti, by mohla nastoupit až koncem listopadu. Bohužel počasí nedovoluje realizovat projekt pro dodržení technologických postupů a proto by firma nemohla ručit za kvalitu díla. Z výše uvedeného důvodu žádá starosta obce Zlatá Olešnice o schválení změny ukončení termínu realizace projektu, a to z 31.12.2017 na 30.9.2018. 

Uvedená změna nemá vliv na bodové hodnocení projektu.

Vzhledem k tomu, že termín realizace byl schválen orgány kraje, předkládáme ke schválení změnu termínu realizace projektu, který bude uveden ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace, jejíž vzor byl schválen zastupitelstvem usnesením číslo 340/17/ZK dne 29.8.2017.

P01: Žádost příjemce