Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	41.	
		
Název :	Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Nový Oldřichov	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2336/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 12. 2017
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 14.12.2017

Předkládá:	Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Nový Oldřichov, se sídlem Mistrovice č.p. 51, 471 13 Nový Oldřichov, IČO: 00260789, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 375/16/ZK ze dne 21.6.2016,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“ z 31. 12. 2017 na 31. 12. 2018, a prodloužením termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 2. 2018 na 19. 2. 2019, a z 31. 3. 2018 na 31. 3. 2019 pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí,
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č.OLP/5378/2016, o poskytnutí účelové dotace  z Dotačního  fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Nový Oldřichov, se sídlem Mistrovice č.p. 51, 471 13 Nový Oldřichov, IČO: 00260789 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování, projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“.
a ukládá
1)	Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace	
Termín: 31. 12. 2017
2)	Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, k podpisu	
Termín: 31. 12. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace obce Nový Oldřichov o změnu termínu ukončení realizace projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“.

Poskytnutí dotace na projekt „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“ bylo schváleno zastupitelstvem usnesením č. 375/16/ZK ze dne 21. 6. 2016 rozhodnutím o poskytnutí dotace z programu 2.1 Program obnovy venkova.

Mezi Libereckým krajem a obcí Nový Oldřichov byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/5378/2016 (příloha č. 2). V článku III. bod 4. byl stanoven termín pro ukončení realizace výše uvedeného projektu nejpozději do 30. 6. 2017. 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů obdržel dne 12. 6. 2017 žádost starostky obec Nový Oldřichov o změnu termínu realizace projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“ do 31. 12. 2017. Důvodem žádosti bylo, že dodavatelská firma dílo nedokončila, a dílo vykazovalo vady a nedodělky, které bránily řádnému užívání. 
Prodloužení termínu  a znění dodatku č. 1 ke smlouvě OLP/5378/2016 (příloha č.3) 
o poskytnutí dotace na projekt „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy bylo odsouhlaseno radou kraje usnesením č. 1204/17/RK ze dne 20. 6. 2017 a schváleno zastupitelstvem usnesením č. 296/17/ZK ze dne 27. 6. 2017. 
Obec se snažila postupovat tak, aby neohrozila čerpání dotace a dílo dokončila. Po vypracovaném odborném posudku požádala o vytvoření rozpočtu na opravu střechy z hlediska stavu, ve kterém se rozpracovaný projekt nacházel. Rozpočtář s poukazem na vypracované odborné stanovisko opravu nedoporučil a navrhl střechu udělat zcela novou. Žádná s oslovených firem nenabídla řešení, kterým by bylo dokončení opravy střechy s potvrzením příslušné záruky na dílo.
Do střechy začalo zatékat a obec musela tento havarijní stav okamžitě řešit. Firma Tesařství Třísko, Kunratice u Cvikova 161, provizorně zabezpečila havarijní stav střechy a zároveň předložila obci nabídku na komplexní opravu střechy. Zastupitelstvo obce nabídku schválilo na svém zasedání dne 10. 11. 2017 s tím, že firma upozornila, že s ohledem na klimatické podmínky není možné dílo dokončit do 31. 12. 2017.

Z výše uvedeného důvodu proto požádala dne 27. 11. 2017 starostka obce Nový Oldřichov znovu o změnu termínu realizace projektu do 31. 12. 2018 (příloha č. 1). 

Na základě žádosti obce Nový Oldřichov překládáme orgánům kraje dodatek č. 2 ke smlouvě OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace, ve kterém je uveden nový termín pro ukončení a vyúčtování projektu. 

P01: Žádost příjemce
P02 Smlouva OLP/5378/2016
P03 Dodatek č. 1 k OLP/5378/2016
P04 Dodatek č. 2 k OLP/5378/2016