Upraveno po projednání

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	45.	
		
Název :	Jilemnice – Všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“ – dodatek číslo 2 ke smlouvě o poskytnutí ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2927/2015	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2274/17/RK ze dne 5. 12. 2017                        zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,                         zákon č. 129/2000 Sb., o krajích	

Zpracoval:	Tomáš Pokorný
vedoucí oddělení mládeže, sportu a zaměstnanosti, zástupce vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu.
	
Projednal:	Mgr. René Havlík
ředitel krajského úřadu
Výbor pro tělovýchovu a sport Zastupitelstva Libereckého kraje
     
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Libereckého kraje

Předkládá:	Petr Tulpa
náměstek hejtmana, řízení rezortu školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
schvaluje
dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje číslo OLP/2927/2015, uzavřené mezi Libereckým krajem a městem Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ 00275808
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, zajistit předložení Dodatku číslo 2 ke smlouvě o poskytnutí z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/2927/2015 Martinu Půtovi, hejtmanovi, k podpisu.
Termín: 31. 12. 2017

Důvodová zpráva 

Orgánům Libereckého kraje je předkládána k posouzení žádost Města Jilemnice o prodloužení termínu realizace projektu s názvem Jilemnice - Všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“ a navýšení dotace o 10.000.000 Kč na celkovou částku 25.000.000 Kč.

1.	Změna termínu realizace projektu.
Zastupitelstvo Libereckého kraje svým usnesením č. 517/15/ZK ze dne 24. 11. 2015 rozhodlo o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje ve výši 15.000.000 Kč na realizaci projektu s názvem Jilemnice -  Všesportovní a volnočasový areál „Hraběnka“. Následně byl schválen Dodatek č. 1 k této smlouvě. Předmětem dodatku č. 1 byla změna termínu realizace projektu, který byl nově stanoven na 31. 12. 2017.

Dne 16. 11. 2017 byla prostřednictvím datové schránky doručena Libereckému kraji žádost města Jilemnice o změnu termínu realizace projektu, jehož ukončení by nově bylo stanoveno na 30. 6. 2018. Požadovaná změna se dotýká Čl. III odst. 4, který nyní zní (ve smyslu uzavřeného dodatku č. 1):

„Termín zahájení realizace projektu je 28. 1. 2015 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 31. 12. 2017.“

Po případném schválení žádosti bude tento článek znít:

„Termín zahájení realizace projektu je 28. 1. 2015 a termín ukončení realizace projektu je nejpozději 30. 6. 2018.“

Žádost Města Jilemnice je přílohou č. 1 této důvodové zprávy a obsahuje podrobné zdůvodnění změny termínu realizace projektu.

V souvislosti se změnou termínu ukončení realizace projektu dojde i k úpravě Čl. III odst. 7 a Čl III. odst. 8, které upravují termíny pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování projektu.

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu považuje žádost o změnu termínu realizace projektu za odůvodněnou a doporučuje vyhovět jí. V případě, že nedojde k prodloužení termínu realizace projektu, bude Město Jilemnice povinno předložit závěrečné vyúčtování projektu včetně kolaudačního rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že není možné, aby byl areál efektivně dokončen do 31. 12. 2017, není možné očekávat, že by do termínu předložení vyúčtování dotace mohlo být předloženo rozhodnutí o kolaudaci areálu. Tato skutečnost by se stala důvodem k zahájení řízení o porušení rozpočtové kázně s Městem Jilemnice. 

2.	navýšení podílu (dotace) ze strany libereckého kraje.
Druhá část žádosti Města Jilemnice obsahuje požadavek na navýšení dotace z rozpočtu Libereckého kraje o 10.000.000 Kč na celkovou částku 25.000.000 Kč. Rovněž tato část žádosti je podpořena argumenty, které jsou obsaženy v přiložené žádosti.

Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu aktuálně nedoporučuje vyhovění žádosti o navýšení dotace z rozpočtu Libereckého kraje. V rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017 nejsou prostředky na navýšení celkové dotace alokovány. Ani v připravovaném rozpočtu na rok 2018 není s podporou tohoto projektu počítáno. Město Jilemnice podalo žádost o kofinancování tohoto projektu na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT). Ze zveřejněných informací vyplývá, že žádosti Města Jilemnice bude vyhověno. Není však zveřejněna informace o výši dotace ze státního rozpočtu. Ve věci možného navýšení podílu (dotace) ze strany Libereckého kraje proběhnou další jednání mezi představiteli obou samospráv a budou hledány možnosti pro vyhovění žádosti Města Jilemnice

Přílohy:
P01	Žádost Města Jilemnice
P02	Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/2927/2015
P03	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/2927/2015
P04	Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje OLP/2927/2015