Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	48.	
		
Název :	Dodatek č. 2 smlouvy č. OLP/2659/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Město Semily na projekt „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2300/17/RK z 5. 12. 2017	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 5. 12. 2017
     
Výbor dopravy dne 12. 12. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Semily, Husova 82, 513 01 Semily, IČ 00276111, ze dne 2. 11. 2017 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“ ze dne 30. 12. 2017 na 31. 3. 2019 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2018 na 20. 5. 2019, z důvodu problematických majetkoprávních vztahů v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení,
schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě OLP/2659/2016, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“ z 30. 12. 2017 na 31. 3. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2018 na 20. 5. 2019
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,	
Termín: 20. 12. 2017
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, podepsat Dodatek č. 2 ke smlouvě OLP/2659/2016.	
Termín: 30. 12. 2017

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je k projednání předkládán Dodatek č. 2 smlouvy č. OLP/2659/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu na projekt „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“ uzavíraný mezi Libereckým krajem a příjemcem Městem Semily, Husova 82, 513 01 Semily, IČ 00276111.

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je již druhá žádost příjemce, ze dne 2. 11. 2017, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 30. 12. 2017 na 31. 3. 2019. První žádost o změnu projektu byla odboru dopravy doručena dne 24. 4. 2017 a týkala se změny termínu ukončení realizace projektu ze dne 30. 6. 2017 na 30. 12. 2017 u výše uvedeného projektu z důvodu problematických majetkoprávních vztahů v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení. 

Původní smlouva s příjemcem byla podepsána 19. 7. 2016 a realizaci dle žádosti o dotaci příjemce zahájil 1. 6. 2016.
Usnesením č. 225/17/ZK byl schválen Dodatek č.1, který byl podepsán 27.6.2017. Dodatek č.1 umožnil zrealizovat projekt v termínu do 30.12.2017, což bylo v souladu s podmínkami Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – podpora projektové přípravy. V tomto Vyhlášení byl termín realizace projektů stanoven od 1. 1. 2015 – 30. 12. 2017. 

Příjemce dotace v současné žádosti o změnu projektu uvádí, že problematické majetkoprávní vztahy v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení setrvávají. V současné době probíhá projednání projektové dokumentace pro územní řízení. Bohužel nedošlo k dohodě mezi společností GasNet, s.r.o. a majitelem pozemku, na který by mělo být umístěno dočasné vedení plynovodu po dobu rekonstrukce lávky, na které je plynovod umístěn. Majitel pozemku s realizací stavby souhlasí, ale nesouhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemenu na dočasné umístění stavby, zatímco společnost GasNet s.r.o. na uzavření trvá a vydala tak zamítavé stanovisko k dokumentaci, viz příloha č.P01. Tento spor zablokoval přípravu stavby na několik měsíců. Město Semily vstoupilo do jednání s majitelem pozemku a snaží se o odkoupení části pozemku pro dočasné umístění plynovodu.  
Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, časové náročnosti celého zpracování této projektové dokumentace a následného dopracování dokumentace pro stavební řízení, nelze ani prodloužený termín ukončení realizace projektu splnit. Město Semily, příjemce dotace, žádá znovu o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 31. 12. 2017 na 31. 3. 2019.
 
Resort dopravy konstatuje, že prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 30. 12. 2017 na 31. 3. 2019 a termínu závěrečného vyúčtování z 18. 2. 2018 na 20. 5. 2019 u výše uvedeného projektu by bylo již nad rámec termínu realizace aktivit od 1. 1. 2015 – 30. 12. 2017 stanoveného v příslušném Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu. Požadovaná změna, oproti schváleným podmínkám a vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – podpora projektové přípravy Libereckého kraje, schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 49/16/ZK, nemá dodatečný dopad na provedené bodové hodnocení projektů, neovlivní účel, na který byla dotace poskytnuta, ani závazné parametry projektu. Zároveň je Město Semily smlouvou OLP/2659/2016 zavázáno k následné stavební realizaci vyprojektovaného úseku. 

Z výše uvedených důvodů je pravděpodobné, že pokud dostane příjemce možnost pokračovat v projektové přípravě prodloužením termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování projektu, bude úsek cyklostezky vyprojektován a následně i postaven a dojde v této části jednoznačně ke zvýšení podílu cyklodopravy, jakožto udržitelné formy dopravy, při každodenní dojížďce za prací a zároveň bude zkvalitněna celá dálková trasa z hlediska turistického potenciálu.

Odbor dopravy, jako administrátor dotace,  předkládá Dodatek č. 2 ke smlouvě OLP/2659/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, v kterém je prodloužen termín realizace projektu a termín závěrečného vyúčtování projektu, ke schválení orgánům kraje. 

Přílohy:
048_P01 Žádost o změnu projektu a Nesouhlasné stanovisko GasNet, s.r.o.
048_P02 Smlouva OLP/2659/2016 
048_P03 Dodatek č. 1 Smlouvy OLP/2659/2016
048_P04 Dodatek č. 2 Smlouvy OLP/2659/2016