Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	52.	
		
Název :	Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016 s Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje – změna termínu realizace a rozšíření specifikace projektu – úpravy pracovišť krizového řízení Policie ČR v Liberci a Jablonci n. Nisou	

Důvod předložení:	Žádost České republiky - Krajského ředitelství policie Libereckého kraje	

Zpracoval:	Bc. Zuzana Škodová
odborný zaměstnanec oddělení krizového řízení - dotace
	
Projednal:	Bezpečnostní rada Libereckého kraje na svém zasedání dne 14.12.2017
     
Projedná Rada kraje na svém zasedání dne 19. 12. 2017

Předkládá:	Martin Půta
hejtman
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce daru, České republiky – Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, IČO: 72050501
1)	o rozšíření využití finančního daru ve výši 2.500.000 Kč poskytnutého na základě Darovací  smlouvy  č.  OLP/2877/2016,  ve znění Dodatku č. 1, na provedení úprav a pořízení vybavení pracoviště krizového řízení v Jablonci nad Nisou v ulici 28. října č. p. 424, o jeho součást v ulici 5. května	
2)	o prodloužení termínu realizace projektu financovaného z Krizového fondu Libereckého kraje na základě Darovací smlouvy č. OLP/2877/2016, která byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 354/16/ZK dne 21. 6. 2016, a na základě Dodatku č. 1 této smlouvy z  31. 12. 2017  na  31. 12. 2018 a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 30. 3. 2018 na 30. 4. 2019	
schvaluje
1)	rozšíření využití finančního daru ve výši 2.500.000 Kč, poskytnutého na základě Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016, na provedení úprav a pořízení vybavení pracoviště krizového řízení v Jablonci nad Nisou v ulici 28. října č. p. 424, o jeho součást v ulici 5. května	
2)	prodloužení termínu ukončení realizace projektu financovaného z Krizového fondu 
Libereckého kraje na základě Darovací smlouvy č. OLP/2877/2016, ve znění dodatku č. 1, z 31. 12. 2017 na 31. 12. 2018 a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 30. 3. 2018 na 30. 4. 2019,	
3)	dodatek č. 2 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2017 o poskytnutí daru z Krizového fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, IČO: 72050501, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu, změna termínu pro předložení závěrečné zprávy se závěrečným vyúčtováním a rozšíření využití finančního daru ve výši 2.500.000 Kč	
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2017, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 29. 12. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem předkládaného materiálu je schválení Dodatku č. 2 k Darovací smlouvě mezi Libereckým krajem a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, IČO: 72050501, o prodloužení termínu realizace projektu a změně specifikace využití finančních prostředků, poskytnutých na základě Darovací smlouvy č. OLP/2877/2016, ve výši 2.500.000 Kč. Tato darovací smlouva byla schválena usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 354/16/ZK ze dne 21. 6. 2016.

Zastupitelstvo Libereckého kraje následně schválilo dne 27. 6. 2017 usnesením č. 241/17/ZK Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016. V tomto Dodatku byla v čl. I v odst. 2 prodloužena lhůta pro realizaci projektu do 31. 12. 2017 a lhůta pro předložení závěrečné zprávy a závěrečného vyúčtování nejpozději do 30. března 2018.
Dne 5. 12. 2017 předložila Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje žádost (příloha č. 1) o prodloužení termínu pro realizaci projektu a předložení závěrečné zprávy se závěrečným vyúčtováním a dále žádost o změnu specifikace využití finančních prostředků poskytnutých na základě Darovací smlouvy č. OLP/2877/2016. Důvodem je úspora poskytnutých finančních prostředků, které by žadatel chtěl využít na dovybavení pracoviště krizového řízení v Jablonci nad Nisou. Část prostředků poskytnutých na základě Darovací smlouvy č. OLP/2877/2016 již žadatel využil na úpravu tohoto pracoviště na standardizované pracoviště krizového řízení.
Z výše uvedeného důvodu je předložen ke schválení Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě OLP/2877/2016, kterým se prodlužuje doba termínu realizace z 31. 12. 2017 na 31. 12. 2018 a zároveň lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování z 30. 3. 2018 na nejpozději do 30. 4. 2019. 

Dodatkem č. 2 se rovněž mění specifikace využití finančního daru ve výši 2.500.000 Kč, uvedeného v Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016 v čl. III odst. 3) 
z původního znění: 

„3) Obdarovaný se zavazuje, že nadepsaný finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy použije výhradně na zvýšení jeho akceschopnosti a připravenosti k řešení krizových situací a mimořádných událostí, a to na:
a) Modernizaci instalací vzduchotechniky a klimatizace včetně navazující 	 technologické místnosti oddělení utajovaných informací a operačního odboru    
(pracoviště krizového řízení v areálu Pastýřská č. p. 589, Liberec),

b) Úpravu stávající zasedací místnosti, její klimatizace a vybavení na standardizované pracoviště krizového řízení (pracoviště krizového řízení Jablonec n. N., 28. října    
č.p. 424).“

na nové znění:
„3)Obdarovaný se zavazuje, že nadepsaný finanční dar poskytnutý na základě této smlouvy použije výhradně na zvýšení jeho akceschopnosti a připravenosti k řešení krizových situací a mimořádných událostí, a to na:
a)	Modernizaci instalací vzduchotechniky a klimatizace včetně navazující technologické místnosti oddělení utajovaných informací a operačního odboru (pracoviště krizového řízení v areálu Pastýřská č. p. 589, Liberec),

b) Úpravu stávající zasedací místnosti, její klimatizace a vybavení na standardizované pracoviště krizového řízení (pracoviště krizového řízení Jablonec n. N., 28. října č.p. 424, a jeho součást v ul. 5. května).

Bezpečnostní rada tuto žádost České republiky – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje projednala na svém zasedání, které se konalo dne 14. prosince 2017.
Radě kraje bude tento materiál předložen k projednání na zasedání dne 19. prosince 2017.

Přílohy:
1. Žádost o změnu smlouvy
2. Původní smlouva č. OLP/2877/2016
3. Dodatek č. 1 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016
4. Dodatek č. 2 k Darovací smlouvě č. OLP/2877/2016
5. Výpis ze závěru Bezpečnostní rady Libereckého kraje ze dne 14. 12. 2017