Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 19.12.2017

Bod pořadu jednání:	53.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1139/2017 s obcí Bílá – změna termínu ukončení realizace projektu	

Důvod předložení:	Žádost obce Bílá	

Zpracoval:	Bc. Zuzana Škodová
odborný zaměstnanec oddělení krizového řízení - dotace
	
Projednal:	Bude předloženo Radě kraje na 22. zasedání dne 19. 12. 2017

Předkládá:	Martin Půta
hejtman
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Bílá, se sídlem Bílá 76, 463 43 Bílá, IČO: 00262668, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava a zateplení střechy a obvodových zdí hasičské zbrojnice Bílá“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 185/17/ZK dne 30. 5. 2017,
schvaluje
1)	prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava a zateplení střechy a obvodových zdí hasičské zbrojnice Bílá“ z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018, a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2018 na 19. 8. 2018,	
2)	dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1139/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Bílá, se sídlem Bílá 76, 463 43 Bílá, IČO: 00262668, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a předložení závěrečného vyúčtování	
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/1139/2017, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 29. 12. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem předkládaného materiálu je schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, č. OLP/1139/2017 mezi Libereckým krajem a obcí Bílá, se sídlem Bílá 76, 463 43 Bílá, IČO: 00262668, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava a zateplení střechy a obvodových zdí hasičské zbrojnice Bílá“.

Poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje obci Bílá ve výši 107.577 Kč neinvestičního charakteru na projekt „Oprava a zateplení střechy a obvodových zdí hasičské zbrojnice Bílá“, včetně vzorové smlouvy o poskytnutí dotace, bylo schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 30. 5. 2017 usnesením č. 185/17/ZK. 

Podepsaná smlouva stanoví v článku III., bod 4) termín realizace projektu do 31. 12. 2017. Tuto lhůtu však není možné dodržet z důvodů, které obec Bílá uvádí ve své žádosti (příloha č. 1). Realizace projektu je zpožděna nepříznivými klimatickými podmínkami, které již nedovolují realizaci projektu dokončit v původním termínu. Obec Bílá tedy žádá o prodloužení termínu realizace akce do 30. 6. 2018, aby byla schopna zajistit řádnou realizaci projektu.

Z výše uvedeného důvodu je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1139/2017, kterým se prodlužuje doba termínu realizace z 31. 12. 2017 na 30. 6. 2018 a zároveň lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy z 19. 2. 2018 na nejpozději do 19. 8. 2018.

Rada kraje projedná Žádost obce Bílá na svém zasedání dne 19. 12. 2017.

Přílohy:
1. Žádost o změnu smlouvy
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č OLP/1139/2017
3. Původní smlouva ev. č. OLP/1139/2017