Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 28.03.2017

Bod pořadu jednání:	33.	
		
Název :	Žádost o změnu termínu realizace projektu s registračním číslem 0518 v rámci programu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 389/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 7.3. 2017
     
Výbor hospodářského a regionálního rozvoje dne 14. 3. 2017

Předkládá:	Ing. Radka Loučková Kotasová
členka rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Radima Krutského, trvalé bydliště Radčice 113, 460 01 Liberec 32 datum narození 15. 3. 1978 o prodloužení termínu realizace projektu s registračním číslem 0518, který byl schválen radou kraje usnesením č. 1068/16/RK ze dne 7. 6. 2016, a to do 31. 7. 2017,
neschvaluje
prodloužení termínu realizace projektu s registračním číslem 0518 žadatele Radima Krutského, trvalé bydliště Radčice 113, 460 01 Liberec 32 datum narození 15. 3. 1978 schváleného v rámci Programu kotlíkové dotace v Libereckém kraji, a to do 31. 7. 2017
a ukládá
Ing. Radce Loučkové Kotasové, člence rady kraje, řízení rezortu hospodářského a regionální rozvoje, evropských projektů a územního plánování, informovat příjemce o přijatém usnesení.
Termín: 15. 04. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je posouzení žádosti o prodloužení termínu realizace příjemce dotace v rámci vyhlášeného Programu kotlíkové dotace v Libereckém kraji.

Liberecký kraj obdržel dne 23. 11. 2015 Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí (poskytovatel dotace) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (zprostředkující subjekt) o poskytnutí dotace na realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“, dne 22. 12. 2015 byl usnesením zastupitelstva kraje č. 571/15/ZK schválen Program (dále jen „Program“) a dne 23. 12. 2015 byl Libereckým krajem tento Program vyhlášen.

Dne 25. 1. 2016 začaly být Libereckým krajem přijímány žádosti konečných příjemců o kotlíkové dotace, v současné době je alokace určená na výměnu nevyhovujících zdrojů tepla vyčerpána. Program však pozastaven není, žádosti jsou přijímány do tzv. zásobníku projektů, ze kterého jsou pak žadatelé oslovováni dle pořadí, a to v případech, kdy žadatelé odstoupí nebo v případě zbylých finančních prostředků z vyúčtování již zrealizovaných projektů.

Schválený a vyhlášený program stanoví, že na realizaci projektu mají žadatelé 12 měsíců od podání kompletní žádosti, přičemž termín realizace jednotlivých projektů je schválen radou kraje spolu s rozhodnutím o poskytnutí dotace, poté je součástí uzavřené smlouvy mezi příjemce a Libereckým krajem.

Příjemci dotace Radimu Krutskému, jehož žádost o změnu termínu realizace je předmětem tohoto materiálu, rozhodla rada kraje dne 7. 6. 2016 usnesením č. 1068/16/RK o poskytnutí dotace ve výši  127.500,00 Kč na projekt s reg. č. 0518. Žadatel je na základě tohoto usnesení povinen realizovat projekt nejpozději do 31. 3. 2017. Vzhledem k tomu, že podmínka realizace projektu do 12 měsíců od podání žádosti je součástí schváleného Programu, je věc předložena k posouzení radě i zastupitelstvu kraje.

Příjemce předložil dne 23. 2. 2017 odboru regionálního rozvoje a evropských projektů žádost o změnu projektu – prodloužení termínu realizace do 31. 7. 2017 a to z důvodu, změny typu tepelného čerpadla z původní technologie vzduch – voda na tepelné čerpadlo země – voda, které podléhá povolení stavebního úřadu. Příjemce uvádí, že ověření předloženého seznamu požadovaných dokladů, stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, trvá stavebnímu úřadu zhruba tři měsíce. Z toho důvodu je projekt tepelného čerpadla země – voda do 31. 3. 2017 nerealizovatelný. Příjemce dosud nepodal žádost o povolení instalaci tepelného čerpadla ke stavebnímu úřadu, proto tato skutečnost není písemně podložena.

Stanovisko odboru regionálního rozvoje a evropských projektů:
Vzhledem k tomu, že je termín realizace součástí schváleného a vyhlášeného Programu, není změna podmínek rovným přístupem ke všem žadatelům, potenciálním žadatelům a příjemcům, proto budou kladně posouzeni jen ti žadatelé, jejichž důvod bude posouzen jako objektivní, tzn. v důsledku změn vnějších podmínek, které sami příjemci nezapříčinili a zároveň nemohli stav sami ovlivnit nebo změnit. Zdůvodnění příjemce dotace (žádost tvoří přílohu tohoto materiálu) se odboru regionálního rozvoje a evropských projektů nejeví jako objektivní, proto doporučuje zastupitelstvu kraje změnu termínu realizace neschválit.

Dne 1. 3. 2017 byla vyhlášena druhá výzva programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji. Vzhledem k zaměření výzvy výhradně na obnovitelné zdroje energie bude mít příjemce v případě odstoupení od projektu možnost znovu získat finanční prostředky z této další výzvy.

Přílohy:
P01_Žádost o změnu termínu realizace