Projednáno - usnesení přijato

4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 25.04.2017

Bod pořadu jednání:	30.	
		
Název :	Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/309/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Statutární město Liberec, na projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 608/17/RK z 4. 4. 2017	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne  4. 4. 2017
.
Výbor dopravy dne 18. 4. 2017
.
	
Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Statutárního města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, IČ 00262978, ze dne 23.3.2017 o změnu projektu „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20)“ ze dne 30. 6. 2017 na 30. 6. 2019, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2017 na 19. 8. 2019, z důvodu časové náročnosti zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a samotného získání stavebního povolení, včetně výkupu odpovídajících pozemků,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/309/2016, kterým se mění termín ukončení realizace projektu z 30. 6. 2017 na 30. 6. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2017 na 19. 8. 2019
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,	
Termín: 30. 04. 2017
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek,podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/309/2016.	
Termín: 25. 05. 2017

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je k projednání předkládán Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/309/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu na projekt „Cyklostezka od Košické po Poštovní náměstí (součást Cyklotrasy Odra Nisa, trasa č. 20“ uzavíraného mezi Libereckým krajem a příjemcem Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59, IČ 00262978.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2017 na 30. 6. 2019 a termínu závěrečného vyúčtování z 19. 8. 2017 na 19. 8. 2019 u výše uvedeného projektu, která byla odboru dopravy doručena dne 24. 3. 2017.

Příjemce dotace v žádosti o změnu projektu uvádí, že vzhledem k časové náročnosti celého zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a samotného získání stavebního povolení nelze termín ukončení realizace projektu splnit. Před zahájením stavebního řízení, jemuž předchází územní řízení, již musí být vypořádány veškeré majetkové vztahy s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou cyklostezky, přičemž jednání o výkupu či směně dotčených pozemků je záležitost velice složitá. Soupis vlastníků nemovitostí, se kterými je nutné řešit majetkoprávní vztahy je přílohou žádosti příjemce dotace.

V podmínkách Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – podpora projektové přípravy schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 50/16/ZK byl stanoven termín realizace aktivit od 1. 1. 2015 – 30. 6. 2017. Smlouva s příjemcem byla podepsána 31. 3. 2016 a realizaci příjemce dle žádosti o dotaci zahájil 1. 1. 2016.

Resort dopravy konstatuje, že zpracování projektové dokumentace a následně získání stavebního povolení na úsek Košická ulice - Poštovní náměstí je v souladu s Územně technickou studií ověření páteřní cyklotrasy Odra Nisa. Projektovou přípravou se uskuteční další krok ke spojení již funkčních úseků cyklotrasy Odra Nisa. Statutární město Liberec je smlouvou OLP/309/2016 zavázáno k následné stavební realizaci vyprojektovaného úseku. 

Z výše uvedených důvodů je velký předpoklad, že pokud dostane příjemce možnost pokračovat v projektové přípravě prodloužením termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování projektu, bude úsek cyklostezky vyprojektován a následně i postaven a dojde v této části jednoznačně ke zvýšení podílu cyklodopravy, jakožto udržitelné formy dopravy, při každodenní dojížďce za prací a zároveň bude zkvalitněna celá dálková trasa z hlediska turistického potenciálu.
 
Z výše uvedených důvodů, na základě žádosti příjemce dotace předkládá odbor dopravy, jako administrátor dotace,  dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/309/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, v kterém je prodloužen termín realizace projektu a termín závěrečného vyúčtování projektu, ke schválení orgánům kraje. 

Přílohy:
P01 Žádost o změnu projektu
P02 Smlouva OLP/309/2016 
P03 Dodatek č. 1 Smlouvy OLP/309/2016