Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.05.2017

Bod pořadu jednání:	53.	
		
Název :	Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2659/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.3 Podpora projektové přípravy pro Město Semily na projekt „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 893/17/RK ze dne 16. 5. 2017	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 16. 5. 2017
     
Výbor dopravy dne 23. 5. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Semily, Husova 82, 513 01 Semily, IČ 00276111, ze dne 24. 4. 2017 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“ ze dne 30. 6. 2017 na 30. 12. 2017 a o změně termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2017 na 18. 2. 2018, z důvodu problematických majetkoprávních vztahů v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2659/2016, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“ z 30. 6. 2017 na 30. 12. 2017 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2017 na 18. 2. 2018
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,	
Termín: 10. 06. 2017
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2659/2016.	
Termín: 30. 06. 2017

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je k projednání předkládán Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2659/2016
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu na projekt „Z údolí Jizery do údolí Bobru II (Greenway Jizera)“ uzavíraný mezi Libereckým krajem a příjemcem Městem Semily, Husova 82, 513 01  Semily, IČ 00276111.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 30. 6. 2017 na 31. 12. 2017 u výše uvedeného projektu, která byla odboru dopravy doručena dne 24. 4. 2017.

Příjemce dotace v žádosti o změnu projektu uvádí, že změnu termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování požaduje z důvodu problematických majetkoprávních vztahů v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení. Vzhledem k časové náročnosti celého zpracování této projektové dokumentace a následného dopracování dokumentace pro stavební řízení nelze termín ukončení realizace projektu splnit. 

V podmínkách Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – podpora projektové přípravy schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 49/16/ZK byl stanoven termín realizace aktivit od 1. 1. 2015 – 30. 12. 2017. Smlouva s příjemcem byla podepsána 19. 7. 2016 a realizaci příjemce dle žádosti o dotaci zahájil 1. 6. 2016.

Resort dopravy konstatuje, že prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2017 na 30. 12. 2017 a termínu závěrečného vyúčtování z 19. 8. 2017 na 18. 2. 2018 u výše uvedeného projektu je v souladu s podmínkami Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – podpora projektové přípravy schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 49/16/ZK. Město Semily je smlouvou OLP/2659/2016 zavázáno k následné stavební realizaci vyprojektovaného úseku. 

Z výše uvedených důvodů je pravděpodobné, že pokud dostane příjemce možnost pokračovat v projektové přípravě prodloužením termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování projektu, bude úsek cyklostezky vyprojektován a následně i postaven a dojde v této části jednoznačně ke zvýšení podílu cyklodopravy, jakožto udržitelné formy dopravy, při každodenní dojížďce za prací a zároveň bude zkvalitněna celá dálková trasa z hlediska turistického potenciálu.
 
Z výše uvedených důvodů, na základě žádosti příjemce dotace předkládá odbor dopravy, jako administrátor dotace,  dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2659/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, v kterém je prodloužen termín realizace projektu a termín závěrečného vyúčtování projektu, ke schválení orgánům kraje. 

Přílohy:
P01 Žádost o změnu projektu
P02 Smlouva OLP/2659/2016 
P03 Dodatek č. 1 Smlouvy OLP/2659/2016