Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.06.2017

Bod pořadu jednání:	70.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Nový Oldřichov	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1204/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 20. 6. 2017
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 22.6.2017

Předkládá:	Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Nový Oldřichov, se sídlem Mistrovice č.p. 51, 471 13 Nový Oldřichov, IČO: 00260789, o prodloužení termínu realizace projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 375/16/ZK ze dne 21.6.2016,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“ z 30. 6. 2017 na 31. 12. 2017, a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2017 na 19. 2. 2018, a z 30. 9. 2017 na 31. 3. 2018 pro případ, že se na projekt vztahuje podmínka kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č.OLP/5378/2016, o poskytnutí účelové dotace  z Dotačního  fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Nový Oldřichov, se sídlem Mistrovice č.p. 51, 471 13 Nový Oldřichov, IČO: 00260789 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování, projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“.
a ukládá
1)	Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace	
Termín: 30. 06. 2017
2)	Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, k podpisu.	
Termín: 30. 06. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace obce Nový Oldřichov o změnu termínu ukončení realizace projektů „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“.

Poskytnutí dotace na projekt „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“ bylo schváleno zastupitelstvem usnesením č. 375/16/ZK ze dne 21. 6. 2016 rozhodnutím o poskytnutí dotace z programu 2.1 Program obnovy venkova.

Mezi Libereckým krajem a obcí Nový Oldřichov byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č.OLP/5378/2016. V článku III. bod 4. je stanoven termín pro ukončení realizace výše uvedeného projektu nejpozději do 30. 6. 2017. Dle čl. 7 musí být projekt vyúčtován nejpozději do 50 kalendářních dnů po ukončení realizace, tj. do 19. 8. 2017. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu souhlasu k užívání stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydaný kolaudační souhlas nabude právní účinnosti, nejpozději však do 30. 9. 2017. V případě, že realizovaný projekt podléhá kolaudačnímu rozhodnutí (dle zákona č. 50/1976 Sb., stavební zákon), musí být projekt vyúčtován do 10 kalendářních dnů od dne, kdy vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nejpozději však do 30. 9. 2017. 

Dne 12. 6. 2017 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost starostky obec Nový Oldřichov (příloha č. 1) o změnu termínu realizace projektu „Oprava střechy budovy základní a mateřské školy“ do 31.12.2017, z níže uvedeného důvodu.

Na akci oprava střechy budovy ZŠ a MŠ Nový Oldřichov bylo řádně vypsáno výběrové řízení. Nabídku podala pouze jedna firma s nabídkovou cenou, která odpovídala zadanému rozpisu rozpočtu. S touto firmou obec Nový Oldřichov podepsala smlouvu o dílo. Bohužel dodavatel stavby do současné doby dílo nedokončil. Dílo vykazuje vady a nedodělky, které brání řádnému užívání. Přestože obec se po celou dobu snažila vyjít dodavateli v jeho požadavcích vstříc tak, aby bylo dílo řádně a v termínu dokončeno. 

Obec podala žádost o změnu termínu realizace projektu po termínu stanoveném smlouvou č. OLP/5378/2016, kde v článku III. bod 15. je stanoven termín pro podání žádosti o změnu projektu, nejdéle 30 dnů před ukončením realizace projektu. Důvodem je vypracování posudku od odborné firmy, který též dokazuje, že dílo není v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo. Obec je nucena záležitost řešit se svým právním zástupcem. 

Na základě žádosti obce Nový Oldřichov překládáme orgánům kraje dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/5378/2016 o poskytnutí účelové dotace, ve kterém je uveden nový termín pro ukončení a vyúčtování projektu. 

S ohledem na termín ukončení realizace projektu předkládá ORREP žádost o změnu na nejbližší jednání Zastupitelstva Libereckého kraje. 

P01: Žádost příjemce
P02 Dodatek č. 1 k OLP/5378/2016