Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.09.2017

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch – prodloužení termínu realizace projektu, změna závazných parametrů projektu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1631/17/RK	

Zpracoval:	Ing. Tereza Štochlová
zaměstnanec oddělení památkové péče
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 9. 2017
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury                            dne 19. 9. 2017

Předkládá:	Ing. Květa Vinklátová
členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
1)	žádost příjemce dotace Města Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá, IČ: 00260479, o změnu závazných parametrů projektu „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé - I. etapa“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 271/17/ZK ze dne 27. června 2017,	
2)	žádost příjemce dotace Obce Mírová pod Kozákovem, se sídlem Chutnovka 36, 511 01 Turnov, IČ: 00275913, o prodloužení termínu realizace projektu „Restaurování sochařské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapličce sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec Mírová pod Kozákovem“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK ze dne 30. května 2017,	
rozhoduje
1)	o změně závazných parametrů projektu „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé - I. etapa“, příjemce dotace Města Dubá, z těchto:	
Název parametru	Jednotka	Hodnota	
Statické zajištění – táhla	kpl	1	
Odvodnění objektu	kpl	1	

na tyto nové:
Název parametru	Jednotka	Hodnota	
Statické zajištění – táhla	kpl	1	
Sociální zařízení a bufet – jižní část (stavební část)	kpl	1	
Sociální zařízení – severní část (stavební část)	kpl	1	

2)	o prodloužení termínu realizace projektu „Restaurování sochařské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapličce sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec Mírová pod Kozákovem“ z 30. října 2017 na 31. května 2018, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 1. prosince 2017 na 20. července 2018,	
schvaluje
1)	dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1806/2017 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery na projekt „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé - I. etapa“, uzavřené dne 27. července 2017 mezi Libereckým krajem a Městem Dubá, jehož předmětem je změna závazných parametrů projektu,	
2)	dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2118/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Restaurování sochařské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapličce sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec Mírová pod Kozákovem“, uzavřené dne 30. června 2017 mezi Libereckým krajem a Obcí Mírová pod Kozákovem, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace projektu a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování	
a ukládá
1)	Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace	
Termín: 20. 10. 2017
2)	Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválené dodatky ke smlouvám k podpisu Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu.	
Termín: 15. 11. 2017

Důvodová zpráva

1. Městu Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá, IČ: 00260479 byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 271/17/ZK ze dne 27. června 2017 přiznána účelová investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje, kapitoly 917 07 – Transfery, ve výši 1.000.000 Kč na projekt „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé - I. etapa“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 27. července 2017 uzavřena smlouva č. OLP/1806/2017 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace závazných parametrů uvedených v Čl. I. odst. 3 smlouvy. Příjemce požádal dopisem ze dne 7. srpna 2017 poskytovatele o změnu závazných parametrů projektu vzhledem k obdržení rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 750.000 Kč na odvodnění objektu sušárny chmele a další s tím související práce z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2017. Vzhledem k tomu, že v individuální žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Libereckého kraje příjemce uvedl jako jeden ze závazných parametrů projektu také „odvodnění objektu – kpl – 1“, který byl následně převzat i do smlouvy o poskytnutí dotace, žádá nyní o jeho nahrazení jinými parametry tak, aby nedošlo ke zdvojení finančních zdrojů na jeden výstup tohoto projektu. Příjemce navrhuje nahradit parametr odvodnění objektu 2 novými parametry, které jsou v souladu s účelem projektu, kterým je záchrana, stabilizační opravy, úpravy a korektivní obnova nemovité kulturní památky, která je zároveň unikátem (technickou památkou), a zároveň památníkem na významnou etapu historie regionu.
Sušárna chmele je kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 35811/5-2910. Jedná se o patrový zděný objekt s dvojicí sušících věží, který je unikátním dokladem rozvoje chmelařství na Dubsku. Sušárna byla postavena v roce 1877 a  následně byla rozšířena v roce 1889. Do současnosti se dochovala nejen stavební část, ale i relikty technologií sušení chmele. Význam památky je dán tím, že dle názoru odborníků z oblasti památkové péče na celé evropské pevnině neexistuje další sušárna s válcovými věžemi, neboť tento typ byl běžný jen na britských ostrovech. Město Dubá převzalo objekt v roce 1996 od Pozemkového fondu ČR po desetiletích užívání Státním statkem Česká Kamenice. Od té doby již provedlo dílčí etapy oprav v zájmu záchrany památky. Výsledkem projektu kompletní záchrany dubské sušárny má být multifunkční objekt, zahrnující stálou expozici o tzv. Dubském Švýcarsku a chmelařství s ukázkou původního sušícího roštu ve věži. Rekonstruovaná sušárna s kompletní projektovanou úpravou okolí by také umožnila přesunout sem organizaci kulturních a společenských akcí a vytvořit zázemí pro místní spolky. V letošním a následujícím roce bude provedena část stavební obnovy, zejména odvodnění objektu, jeho statické zabezpečení ocelovými táhly, stavební úpravy v prostorách budoucích sociálních zařízení, rozvody kanalizace, rozvody elektro a další.
Změna závazných parametrů projektu „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé - I. etapa“ byla konzultována s odborem kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Příjemce si je sám vědom případných obtíží při zachování stávajícího parametru odvodnění objektu a sám navrhl jeho změnu. Nově navrhované závazné parametry projektu „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé - I. etapa“ jsou „sociální zařízení a bufet – jižní část (stavební část) – kpl – 1“ a „sociální zařízení – severní část (stavební část) – kpl – 1“. Na základě těchto skutečností je změna závazných parametrů projektu, jehož podstatou je 1. etapa obnovy ohrožené unikátní kulturní památky, přípustná, a to i s ohledem na skutečnost, že nikterak neohrozí účelovost poskytnutých finančních prostředků. Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu proto schválení změny parametru doporučuje.
  
Novými závaznými parametry jsou:

Název parametru	Jednotka	Hodnota	
Statické zajištění – táhla	kpl	1	
Sociální zařízení a bufet – jižní část (stavební část)	kpl	1	
Sociální zařízení – severní část (stavební část)	kpl	1	

Pro požadovanou změnu závazných parametrů je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/1806/2017 na základě dodatku č. 1, který uzavře Liberecký kraj a Město Dubá. Zastupitelstvu kraje tak předkládáme ke schválení změnu závazných parametrů projektu a znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/1806/2017. 

2. Obci Mírová pod Kozákovem, se sídlem Chutnovka 36, 511 01 Turnov byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK ze dne 30. května 2017 přiznána účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši 133.000 Kč na projekt „Restaurování sochařské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapličce sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec Mírová pod Kozákovem“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 30. června 2017 uzavřena smlouva č. OLP/2118/2017 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen ukončit projekt nejpozději do 30. října 2017, jak je uvedeno v Čl. III. odst. 4 smlouvy. Příjemce požádal dopisem ze dne 18. srpna 2017 poskytovatele o prodloužení termínu realizace do 31. května 2018 z důvodu návaznosti procesů restaurátorských prací, kdy je současně restaurována nika oltáře a vlastní oltář. Restaurování vyžaduje delší technologické postupy (vysychání podkladů, vyzrání tmelení, zasychání retuší a zlacení), které je nutné respektovat i vzhledem k povětrnostním podmínkám. Příjemce tak není z těchto objektivních důvodů schopen dokončit restaurování sochařské výzdoby včetně zpětného transferu do kapličky sv. Jana Nepomuckého v původním termínu do 30. října 2017.

Prodloužení termínu realizace projektu „Restaurování sochařské výzdoby oltáře sv. Jana Nepomuckého v kapličce sv. Jana Nepomuckého na Dubecku, obec Mírová pod Kozákovem“ bylo konzultováno se správcem dotačního programu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který prodloužení termínu doporučuje. Požadovaná změna nikterak neohrozí účelovost poskytnutých finančních prostředků, ani nemá dopad na celkové hodnocení projektu dle stanovených kritérií Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. Prodloužením termínu realizace budou dodrženy nutné postupy, památka, která je obnovována i za použití veřejných zdrojů, bude zrestaurována kvalitně bez dalších předpokládaných úprav v nejbližší době.

Pro požadované prodloužení termínu realizace je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/2118/2017 na základě dodatku č. 1, který uzavře Liberecký kraj a Obec Mírová pod Kozákovem. Zastupitelstvu kraje tak předkládáme ke schválení prodloužení termínu realizace projektu do 31. května 2018 a znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2118/2017. 

Přílohy:
026_P01_Žádost o změnu parametrů – Město Dubá
026_P02_Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/1806/2017 (Město Dubá)
026_P03_Žádost o prodloužení termínu – Obec Mírová pod Kozákovem
026_P04_Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2118/2017 (Obec Mírová pod Kozákovem)