Projednáno - usnesení přijato

8. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.09.2017

Bod pořadu jednání:	46.	
		
Název :	Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2510/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Bílý Kostel nad Nisou, na projekt „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel nad Nisou“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1682/17/mRK z 11. 9. 2017	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Mimořádná rada Libereckého kraje dne 11. 9. 2017
     
Výbor dopravy dne 19. 9. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Obce Bílý Kostel nad Nisou, Bílý Kostel nad Nisou 206, 463 31 Chrastava, IČ 00672106, ze dne 4. 9. 2017 o změnu projektu „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel nad Nisou“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel nad Nisou“ ze dne 31. 10. 2017 na 30. 11. 2018, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 20. 12. 2017 na 19. 1. 2019, z důvodu technického problému, který se vyskytl při stavbě cyklostezky,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2510/2017, č. 1 ke smlouvě OLP/2510/2017, kterým se mění termín ukončení realizace projektu z 31. 10. 2017 na 30. 11. 2018 a termín závěrečného vyúčtování projektu z 20. 12. 2017 na 19. 1. 2019
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,	
Termín: 29. 09. 2017
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2510/2017.	
Termín: 30. 10. 2017

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je k projednání předkládán Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2510/2017
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu na projekt „Cyklostezka Paradise – Bílý Kostel nad Nisou“ uzavíraného mezi Libereckým krajem a příjemcem Obcí Bílý Kostel nad Nisou, Bílý Kostel nad Nisou 206, 463 31 Chrastava, IČ 00672106.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 31. 10. 2017 na 30. 11. 2018 a termínu závěrečného vyúčtování z 20. 12. 2017 na 19. 1. 2019 u výše uvedeného projektu, která byla odboru dopravy doručena dne 4. 9. 2017.

Příjemce dotace v žádosti o změnu projektu uvádí, že vzhledem k technickému problému, který se vyskytl při stavbě cyklostezky, konkrétně se jedná o práce spojené s odstraněním průsaků zdi mezi náhonem a korytem řeky, nelze termín ukončení realizace projektu splnit. 

V podmínkách Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.1 – rozvoj cyklistické dopravy schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 93/17/ZK byl stanoven termín realizace aktivit od 1. 1. 2017 – 30. 12. 2018. Smlouva s příjemcem byla podepsána 24. 7. 2017.

Z výše uvedených důvodů, na základě žádosti příjemce dotace předkládá odbor dopravy, jako administrátor dotace,  dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/25109/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, v kterém je prodloužen termín realizace projektu a termín závěrečného vyúčtování projektu, ke schválení orgánům kraje. 

Přílohy:
P01 Žádost o změnu projektu
P02 Smlouva OLP_2510_2017 
P03 Dodatek č. 1_smlouvy_OLP_2510_2017