Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.10.2017

Bod pořadu jednání:	8.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/1200/2017 s městem Jilemnice – změna termínu ukončení realizace projektu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1770/17/RK	

Zpracoval:	Bc. Zuzana Škodová
odborný zaměstnanec oddělení krizového řízení - dotace
	
Projednal:	Rada kraje dne 3. 10.2017

Předkládá:	Martin Půta
hejtman
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace města Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 541 01 Jilemnice, IČO: 00275808, o prodloužení termínu realizace projektu „Pořízení nové cisternové automobilní stříkačky“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 185/17/ZK dne 30. 5. 2017,
schvaluje
1)	prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Pořízení nové cisternové automobilní stříkačky“ z 31. 12. 2017 na 30. 7. 2018, a termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2018 na 18. 9. 2018,	
2)	dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/1200/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje, uzavřené mezi městem Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 541 01 Jilemnice, IČO: 00275808, a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a předložení závěrečného vyúčtování	
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje, předložit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje č. OLP/1200/2017, Martinu Půtovi, hejtmanovi Libereckého kraje, k podpisu a informovat příjemce o schválené změně.
Termín: 01. 11. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem předkládaného materiálu je schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje, č. OLP/1200/2017 mezi Libereckým krajem 
a městem Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČO: 00275808 na projekt Pořízení nové cisternové automobilní stříkačky.
	
Poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje městu Jilemnice ve výši 
1.000.000 Kč investičního charakteru na projekt Pořízení nové cisternové automobilní stříkačky, včetně vzorové smlouvy o poskytnutí dotace, bylo schváleno Zastupitelstvem Libereckého kraje dne 30. 5. 2017 usnesením č. 185/17/ZK. 
Podepsaná smlouva stanoví v článku III., bod 4) termín realizace projektu do 31. 12. 2017. Tuto lhůtu však není možné z následujících důvodů dodržet. 
Na rok 2017 byla městu Jilemnice (dále jen „příjemce“) schválena také dotace ze státního rozpočtu, která je poskytována v rámci programu Ministerstva vnitra 
č. 014240 „Dotace pro jednotky SDH obcí“. Výše této dotace na pořízení cisternové automobilové stříkačky je 2.500.000,- Kč. Podle pravidel k této dotaci příjemce podal žádost v Evidenčním Dotačním Systému MV GŘ HZS ČR. Na základě žádosti obdržel až 3. 8. 2017 registraci akce s odsouhlasenými technickými podmínkami. Na základě této registrace byla ze strany příjemce připravena zadávací dokumentace k výběrovému řízení, která musela opět projít schvalovacím procesem MV HZS GŘ HZS ČR. Výsledek schvalovacího procesu obdržel příjemce až 31. 8. 2017.  Následně musela schválit zadávací dokumentaci 
k výběrovému řízení ještě Rada města Jilemnice. To se stalo neprodleně na jejím následujícím zasedání, které se konalo dne 13. 9. 2017. Otevírání obálek a vyhodnocení nabídek proběhne dne 26. 10. 2017 a teprve po té může dojít k podpisu smlouvy. Protože standartní dodací termíny na automobilové cisterny se pohybují okolo 180 dnů, není příjemce schopen do konce roku 2017 vyčerpat přidělenou dotaci z prostředků Libereckého kraje – Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje. Město Jilemnice proto žádá o prodloužení lhůty realizace projektu do 30. 7. 2018. MV GŘ HZS ČR již městu Jilemnici termín pro realizaci projektu a předložení dokumentace k závěrečnému hodnocení prodloužilo (viz příloha č. 3).
Z výše uvedeného důvodu je předložen ke schválení Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/1200/2017, kterým se prodlužuje doba termínu realizace z 31. 12. 2017 na 30. 7. 2018 
a zároveň lhůta pro předložení závěrečného vyúčtování z 19. 2. 2018 na nejpozději do 18. 9. 2018.

Přílohy:
1. Žádost o změnu smlouvy
2. Odůvodnění žádosti o změnu smlouvy
3. Potvrzení MV GŘ HZS ČR o zaslání změny Registrace akce EDS-PP 014 241
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě ev. č OLP/1200/2017
5. Původní smlouva ev. č. OLP/1200/2017