Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.10.2017

Bod pořadu jednání:	22.	
		
Název :	Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch OLP/2124/2017 - úprava názvu projektu, změna závazných parametrů projektu, změna termínu ukončení realizace projektu a posun termínu závěrečného vyúčtování projektu	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1918/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Lucie Prandnerová
vedoucí oddělení památkové péče
	
Projednal:	Rada kraje dne 17. 10. 2017
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury                                          dne 24. 10. 2017

Předkládá:	Ing. Květa Vinklátová
členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Římskokatolické farnosti Jenišovice, se sídlem Děkanská 87, 511 01 Turnov, IČ 49296221, o úpravu názvu projektu, o změnu závazných parametrů projektu a o prodloužení termínu realizace projektu „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – větrací kanálky“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK ze dne 30. 5. 2017,
rozhoduje
1)	o změně názvu projektu „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – větrací kanálky“ na název projektu „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – obvodová drenáž“,	
2)	o změně závazných parametrů nadepsaného projektu z tohoto:	
Název parametru	Jednotka	Hodnota	
Větrací kanálky	m	75	

na tento nový:
Název parametru	Jednotka	Hodnota	
Obvodová drenáž	m	92	

3)	o prodloužení termínu realizace nadepsaného projektu z 31. 10. 2017 na 30. 11. 2017 a o prodloužení termínu pro podání vyúčtování z 1. 12. 2017 na 19. 1. 2018	
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2124/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji na projekt „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – větrací kanálky“, uzavřené dne 30. 6. 2017, jehož předmětem je úprava názvu projektu, změna závazného parametru projektu a změna termínu ukončení realizace projektu a termínu pro podání závěrečného vyúčtování
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek ke smlouvě k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín: 20. 12. 2017

Důvodová zpráva

Římskokatolické farnosti Jenišovice, se sídlem Děkanská 75, 511 01 Turnov, byla usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 203/17/ZK ze dne 30. 5. 2017 přiznána účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory: 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č.: 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji ve výši 295.000,- Kč na projekt „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – větrací kanálky“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 30. 6. 2017 uzavřena smlouva č. OLP/2124/2017 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen realizovat projekt minimálně v rozsahu a dle specifikace závazných parametrů uvedených v Čl. I odst. 3 smlouvy. Příjemce požádal dopisem ze dne 26. 9. 2017 poskytovatele o změnu názvu projektu, závazných parametrů projektu a termínu realizace projektu to vzhledem k tomu, že při provádění prací na sanaci soklového zdiva kostela sv. Jiří v Jenišovicích bylo zjištěno, že podzemní část základového zdiva kostela sv. Jiří není a z průzkumu vyplynulo, že je kostel založen přímo na poloskalním podloží. V tomto případě tedy není možné provést větrací kanálky, kterým mělo být odvětráno a odvodněno základové zdivo, které chybí, kdy realizací větracích kanálků by došlo k podkopání obvodového zdiva kostela. Z tohoto důvodu byl vypracován nový návrh na sanaci soklového zdiva a to obvodovou drenáží, návrh vypracoval Ing. Tomáš Hocke. Obvodová drenáž bude odsazena od vnějšího obvodu kostela a zaústěna do dešťové kanalizace s funkcí odvedení zejména povrchových vod a snížení úrovně vlhkosti u paty zdiva kostela sv. Jiří. Na základě změny projektu dojde ke změně názvu smlouvy na „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – obvodová drenáž“, v návaznosti na změnu projektu je nutné změnit i závazný parametr z větracích kanálků v délce 75 m na obvodovou drenáž v délce m. 

Změna závazných parametrů projektu „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – větrací kanálky“ byla konzultována se správcem dotačního programu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Žadatel uvedl v žádosti o dotaci, že bude projekt realizovat mj. v rozsahu 75 m větracích kanálků. Tato hodnota parametru byla uvedena též v čl. I. odst. 3 smlouvy o poskytnutí dotace. Ve své žádosti příjemce předložil nutnost změnit projekt na sanaci soklového zdiva a to z důvodu možného podkopání obvodových zdí kostela sv. Jiří v Jenišovicích. Na základě těchto skutečností je změna závazného parametru projektu, jehož podstatou je sanace soklového zdiva, přípustná, a to i s ohledem na skutečnost, že nikterak neohrozí účelovost poskytnutých finančních prostředků. Správce dotačního titulu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu se v souvislosti s požadovanou změnou projektu zabýval i jejími případnými dopady na celkové hodnocení projektu. Požadovaná změna projektu nemá vliv na bodové hodnocení dle stanovených kritérií Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji. Správce dotačního programu proto schválení změny parametru doporučuje.

Novými závaznými parametry jsou:

           Název parametru	Jednotka	Hodnota	
Obvodová drenáž	m	92	
		
Příjemce požádal dopisem vzhledem ke změně projektu o změnu termínu ukončení realizace projektu z 31. 10. 2017 na 30. 11. 2017 a to z důvodu změny technologických postupů při sanaci soklového zdiva kostela sv. Jiří v Jenišovicích, které jsou nezbytné pro dodržení účelu projektu, tj. sanace (odvodnění) soklového zdiva kostela.
              
Prodloužení termínu realizace projektu „Sanace soklového zdiva – 2. etapa – větrací kanálky“ bylo konzultováno se správcem dotačního programu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu, který prodloužení termínu doporučuje. Požadovaná změna nikterak neohrozí účelovost poskytnutých finančních prostředků, ani nemá dopad na celkové hodnocení projektu dle stanovených kritérií Programu 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji.

Pro požadovanou změnu názvu projektu, změnu závazného parametru smlouvy a změny termínu realizace projektu je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/2124/2017 na základě dodatku č. 1, který uzavře Liberecký kraj a Římskokatolická farnost Jenišovice. Radě kraje tak předkládáme k odsouhlasení změnu názvu projektu, změnu parametru smlouvy a ukončení termínu realizace projektu a znění dodatku č. 1 ke smlouvě č. OLP/2124/2017. 

Přílohy:

022_P01 Žádost ŘKF Jenišovice
022_P02 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/2124/2017