Upraveno po projednání

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.10.2017

Bod pořadu jednání:	30.	
		
Název :	Žádost o změnu projektu „Oprava komunikace ppč.2614/3 a ppč.2605/2 kú Příkrý“ příjemce obec Příkrý	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1807/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 3. 10. 2017

Předkládá:	Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Příkrý o změnu v projektu „Oprava komunikace ppč.2614/3 a ppč.2605/2 kú Příkrý“
mění
část usnesení č. 340/17/ZK ze dne 29.8 2017 v části termín realizace projektu „Oprava komunikace ppč.2614/3 a ppč.2605/2 kú Příkrý“ příjemce obec Příkrý, č.p.70, 513 01 Příkrý, IČ 00276022 takto:
Poř. číslo	20	
IČ	00276022	
Příjemce dotace/ žadatel	obec Příkrý	
Dotační titul	DT4	
Název projektu	Oprava komunikace ppč.2614/3 a ppč.2605/2 kú Příkrý	
Účel projektu	Oprava komunikace za účelem odstranění havarijního stavu	
Parametry projektu	oprava komunikace-m2-2036	
Celkové plánované náklady projektu (Kč)	2.000.000	
Podíl dotace na nákladech projektu (%)	20	
Požadované prostředky (Kč)	400.000	
Investice/           neinvestice	Neivestiční	
Termín realizace projektu	1.4.2017 - 30.6.2018	

a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace obec Příkrý o změně v projektu.
Termín: 31. 12. 2017

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace obce Příkrý o změnu v projektu „Oprava komunikace ppč.2614/3 a ppč.2605/2 kú Příkrý“ v části termín realizace projektu. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 29.8.2017 rozhodlo o poskytnutí dotace z programu 2.1 Program obnovy venkova výše uvedenému příjemci usnesením č. 340/17/ZK. 

Obci Příkrý byla na základě předložené žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova schválena účelová neinvestiční dotace na projekt „Oprava komunikace ppč.2614/3 a ppč.2605/2 kú Příkrý“ s termínem realizace projektu od 1.4.2017 do 31.12.2017. 

Dne 13. 9. 2017 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost starosty obce Příkrý (příloha č. 1) o změnu termínu realizace projektu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
Pro realizaci projektu již obec Příkrý vybrala firmu, ale pro její současnou vytíženost, by firma práce na opravě komunikace zahájila až 2.polovině měsíce října. Jelikož je uvedená akce dosti rozsáhlá a závislá na venkovních klimatických podmínkách, nedala by se v případě špatného počasí (sníh, mráz) kvalitně realizovat.   

Z výše uvedených důvodu  žádá obec Příkrý o schválení změny ukončení termínu realizace projektu, a to z 31.12.2017 do 30.6.2018. 

Uvedená změna nemá vliv na bodové hodnocení projektu.

Vzhledem k tomu, že termín realizace byl schválen orgány kraje, předkládáme ke schválení změnu termínu realizace projektu, který bude uveden ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace, jejíž vzor byl schválen zastupitelstvem usnesením číslo 340/17/ZK dne 29.8.2017.

P01: Žádost příjemce