Projednáno - usnesení přijato

9. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 31.10.2017

Bod pořadu jednání:	50.	
		
Název :	Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2504/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje Program 6.1 Rozvoj cyklistické dopravy pro Obec Rakousy, na projekt „Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1913/17/RK ze dne 17. 10. 2017	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne  17. 10. 2017
     
Výbor dopravy dne 24. 10. 2017

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Obce Rakousy, Rakousy 34, 511 01 Rakousy, IČ 00276049, ze dne 2. 10. 2017 o změnu projektu „Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“ ze dne 30. 6. 2017 na 31. 12. 2019, a o prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2018 na 19. 2. 2020, z důvodu technického problému týkajícího se vodovodního řádu, který se vyskytl při opravě cyklostezky,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2504/2017, kterým se mění termín ukončení realizace projektu z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu z 19. 8. 2018 na 19. 2. 2020
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek zajistit, vyrozumět příjemce dotace o přijatém usnesení.	
Termín: 10. 11. 2017
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek zajistit, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2504/2017.	
Termín: 15. 12. 2017

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je k projednání předkládán Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2504/2017
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu na projekt „Oprava místní komunikace – část Greenway Jizera“ uzavíraného mezi Libereckým krajem a příjemcem Obcí Rakousy, Rakousy 34, 511 01 Turnov, IČ 00276049.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2018 na 31. 12. 2019 a termínu závěrečného vyúčtování z 19. 8. 2018 na 19. 2. 2020 u výše uvedeného projektu, která byla odboru dopravy doručena dne 2. 10. 2017.

Příjemce dotace v žádosti o změnu projektu uvádí, že vzhledem k rekonstrukci starého vodovodního řádu z roku 1930 v obci Rakousy a vzhledem k tomu, že vlastník pozemku, kudy vede stávající vodovodní řád, odmítl umožnit přístup na pozemek, je nutné vedení vodovodního řádu v tělese místní komunikace, která je součástí podpořeného projektu. Na rekonstrukci starého vodovodního řádu je nutno zpracovat projektovou dokumentaci a stavební povolení ke stavbě, což bude trvat minimálně 1 rok. Na základě výše uvedeného technického problému, který se vyskytl až po podání žádosti o dotaci, nelze termín ukončení realizace projektu splnit. 

V podmínkách Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.1 – rozvoj cyklistické dopravy schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 93/17/ZK byl stanoven termín realizace aktivit od 1. 1. 2017 – 30. 12. 2018. Smlouva s příjemcem byla podepsána 7. 8. 2017.

Resort dopravy konstatuje, že příjemce má důvod požádat o prodloužení termínu pro realizaci projektu – opravu komunikace, a to vzhledem k efektivnímu využití finančních prostředků. V souvislosti s nepředpokládanou rekonstrukcí starého vodovodního řádu a neochotou vlastníka pozemku, přes který vede starý vodovodní řád, bude muset příjemce (obec) řešit vedení nového vodovodního řádu v tělese místní komunikace/cyklotrasy, která je součástí dotované opravy. Potřeba zpracování projektové dokumentace a následně získání stavebního povolení na rekonstrukci vodovodu bude trvat nejméně 1 rok. Projekt opravy komunikace řešený v rámci dotace, má obec rozdělen na dvě části. První část komunikace opraví příjemce již na jaře roku 2018. Druhou část, která je v lepším stavu a částečně v ní bude vedena výstavba nového vodovodu, opraví v roce 2019.

Z výše uvedených důvodů, na základě žádosti příjemce dotace předkládá odbor dopravy, jako administrátor dotace,  dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2504/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, v kterém je prodloužen termín realizace projektu a termín závěrečného vyúčtování projektu, ke schválení orgánům kraje. 

Přílohy:
P01 Žádost o změnu projektu
P02 Smlouva OLP_2504_2017 
P03 Dodatek č. 1_smlouvy_OLP_2504_2017