Projednáno - usnesení přijato

11. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 18.12.2018

Bod pořadu jednání:	42.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2513/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Mimoň na projekt „Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice – Ploužnice“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2329/18/RK ze dne 4. 12. 2018	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 4. 12. 2018
     
Výbor dopravy dne 11. 12. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Mimoň, Mírová 120, 471 24 Mimoň, IČ 00260746, ze dne 30. 10. 2018 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka Mimoň, potoční ulice - Ploužnice“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka Mimoň, potoční ulice - Ploužnice“ ze dne 30. 12. 2018 na 31. 7. 2019 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2019 na 19. 9. 2019, z důvodu problematického výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2513/2017, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Cyklostezka Mimoň, potoční ulice - Ploužnice“ ze dne 30. 12. 2018 na 31. 7. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 18. 2. 2019 na 19. 9. 2019
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,	
Termín: 21. 12. 2018
2.	Marku Pieterovi, náměstkovi hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2513/2017.	
Termín: 30. 12. 2018

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je k projednání předkládán Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2513/2017
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu na projekt „Cyklostezka Mimoň, potoční ulice - Ploužnice“, uzavíraný mezi Libereckým krajem a příjemcem Městem Mimoň, Mírová, 471 24 Mimoň, IČ 00260746.

Odkaz na smlouvu OLP/2513/2017 - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2993146 .
Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 30. 12. 2018 na 31. 7. 2019 u výše uvedeného projektu, která byla odboru dopravy doručena dne 30. 10. 2018.

Příjemce dotace v žádosti o změnu projektu uvádí, že změnu termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování požaduje především z důvodu problematického výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. 
Dne 22. 8. 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na „PD – Cyklostezka Mimoň, Potoční ulice – Ploužnice“. Osloveni byli celkem čtyři dodavatelé. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 06. 09. 2018. V této lhůtě nebyla doručena žádná nabídka. Termín pro podání nabídek byl prodloužen do 21. 09. 2018. V této lhůtě opět nebyla podána žádná nabídka. Termín byl podruhé prodloužen a to do 26. 09. 2018. V této lhůtě byly podány dvě nabídky a následně mohlo proběhnout zhodnocení a výběr zhotovitele. Výběr zhotovitele byl schválen Radou města dne 15. 10. 2018 a Smlouva o dílo byla podepsána 01. 11. 2018.
Na základě výše uvedeného problematického výběrového řízení už není reálné vše úspěšně zrealizovat do 30. 12. 2018.

V podmínkách Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – podpora projektové přípravy schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 93/17/ZK byl stanoven termín realizace aktivit od 1. 1. 2017 – 30. 12. 2018. Smlouva s příjemcem byla podepsána 25. 8. 2017 a realizaci příjemce dle žádosti o dotaci zahájil 19. 4. 2017.

Resort dopravy konstatuje, že prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 12. 2018 na 31. 7. 2019 a termínu závěrečného vyúčtování z 18. 2. 2019 na 19. 9. 2019 u výše uvedeného projektu by bylo již nad rámec termínu realizace aktivit od 1. 1. 2017 – 30. 12. 2018 stanoveného v podmínkách příslušného Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – podpora projektové přípravy. 
Požadovaná změna však nemá dodatečný dopad na provedené bodové hodnocení projektů, neovlivní účel, na který byla dotace poskytnuta, ani závazné parametry projektu. 

Z výše uvedených důvodů je pravděpodobné, že pokud dostane příjemce možnost pokračovat v projektové přípravě prodloužením termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování projektu, bude úsek cyklostezky v budoucnu dokončen. Příjemce je ve smlouvě zavázán, že nejpozději do 5 let od ukončení realizace projektu musí zajistit financování další fáze projektu směřujícího k naplnění cíle projektu.
Dostavbou úseku dojde jednoznačně ke zvýšení podílu cyklodopravy, jakožto udržitelné formy dopravy, při každodenní dojížďce za prací a zároveň dojde ke zvýšení turistického potenciálu.

Z výše uvedených důvodů, na základě žádosti příjemce dotace předkládá odbor dopravy, jako administrátor dotace,  dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2513/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, v kterém je prodloužen termín realizace projektu a termín závěrečného vyúčtování projektu, ke schválení orgánům kraje. 

Přílohy:
042_P01 Žádost o změnu projektu
042_P02 Dodatek č. 1 Smlouvy OLP/2513/2017