Projednáno - usnesení přijato

1. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 30.01.2018

Bod pořadu jednání:	26.	
		
Název :	Žádost o změnu projektu „Oprava místní komunikace na p.č.1892/3 a 2548/1, Dolní Řasnice“ příjemce obec Dolní Řasnice	

Důvod předložení:	Usnesení č. 2464/17/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 19. 12. 2017
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 25.1.2018

Předkládá:	Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Dolní Řasnice o změnu v projektu „Oprava místní komunikace na p.č.1892/3 a 2548/1, Dolní Řasnice“
mění
část usnesení č. 340/17/ZK ze dne 29.8. 2017 v části termín realizace projektu „Oprava místní komunikace na p.č.1892/3 a 2548/1, Dolní Řasnice“ příjemce obec Dolní Řasnice, č.p.153, 463 67 Dolní Řasnice, IČ 00262757, z původního termínu realizace 1.6. 2017– 31.10.2017 na nový termín realizace 1.6. 2017 – 31.8.2018
a ukládá
Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, řízení resortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova, zajistit vyrozumění příjemce dotace obec Dolní Řasnice o schválení změny v projektu.
Termín: 15. 02. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace obce Dolní Řasnice o změnu v projektu „Oprava místní komunikace na p.č.1892/3 a 2548/1, Dolní Řasnice“ v části termín realizace projektu. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém jednání dne 29.8.2017 rozhodlo o poskytnutí dotace z programu 2.1 Program obnovy venkova výše uvedenému příjemci usnesením č. 340/17/ZK. 

Obci Dolní Řasnice byla na základě předložené žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova schválena účelová investiční dotace na projekt „Oprava místní komunikace na p.č.1892/3 a 2548/1, Dolní Řasnice“ s termínem realizace projektu od 1.6.2017 do 31.10.2017. 

Dne 4. 12. 2017 byla odboru regionálního rozvoje a evropských projektů doručena žádost starosty obce Dolní Řasnice (příloha č. 1) o změnu termínu realizace projektu ještě před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace. 
V rámci poptávkového řízení reagovala pouze jedna firma s nabídkou technologie opravy, která byla pro obec neakceptovatelná. Ostatní poptávané firmy se řízení nezúčastnily z důvodu vytíženosti, a při pozdějším termínu by nebyly schopny zajistit kvalitu díla. Dalším důvodem je nezkušenost pana starosty s čerpáním dotaci z DF LK, jelikož měl za to, že pokud nemá uzavřenou Smlouvu o dílo dodavatelskou firmou, nemůže již dotaci čerpat. Nevěděl, že lze požádat o prodloužení termínu realizace projektu před podpisem smlouvy. Z výše uvedených důvodů žádá starosta obce Dolní Řasnice o schválení změny ukončení termínu realizace projektu, a to z 31. 10. 2017 na 31.8.2018. 

Uvedená změna nemá vliv na bodové hodnocení projektu.

Vzhledem k tomu, že termín realizace byl schválen orgány kraje, předkládáme ke schválení změnu termínu realizace projektu, který bude uveden ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace, jejíž vzor byl schválen zastupitelstvem usnesením číslo 340/17/ZK dne 29.8.2017.

P01: Žádost příjemce