Projednáno - usnesení přijato

3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 27.03.2018

Bod pořadu jednání:	25.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4149/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Jestřebí	

Důvod předložení:	Usnesení č. 503/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Rada kraje dne 20.3. 2018
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 22.2.2018

Předkládá:	Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Jestřebí, se sídlem č.p. 142, 471 61 Jestřebí, IČO 00260878,
a)	o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017,	
b)	o změnu projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“, na jehož realizaci byla schválena neinvestiční účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017, na investiční dotaci.	
rozhoduje
a)	o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“ z 31. 3. 2018 na 31. 5. 2018, a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 20. 5. 2018 na 20. 7. 2018.	
b)	o změně projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“, na jehož realizaci byla schválena neinvestiční účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017, na investiční dotaci,	
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4149/2017, o poskytnutí účelové dotace  z Dotačního  fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Jestřebí, se sídlem č.p. 142, 471 61 Jestřebí, IČO: 00260878 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování, projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“, a změna neinvestiční dotace na investiční dotaci, projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, k podpisu.
Termín: 31. 03. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace obce Jestřebí o změnu termínu ukončení realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“ a změna poskytnuté neinvestiční dotace na dotaci investiční.

Poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“ bylo schváleno zastupitelstvem usnesením č. 340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017 rozhodnutím o poskytnutí dotace z programu 2.1 Program obnovy venkova.

Mezi Libereckým krajem a obcí Jestřebí byla uzavřena smlouva o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/4149/2017 (příloha č. 3). V článku III. bod 4. byl stanoven termín pro ukončení realizace výše uvedeného projektu nejpozději do 31. 3. 2018. 

1) Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (dále ORREP) obdržel dne 1. 2. 2018 žádost starosty obce Jestřebí o prodloužení termínu realizace projektu „Rekonstrukce a modernizace kulturního sálu v obci Jestřebí“ do 31. 5. 2018. Důvodem žádosti bylo, že stavební povolení na realizaci akce s nabytím právní moci se podařilo získat až dne 27.1.2018. Firma BARNATHERM s.r.o.  mohla započít s realizací akce dne 30.1.2018. Termín dokončení do 31.3.2018 je možné dodržet pouze v případě optimálního a bezproblémového průběhu akce. Vzhledem k tomu, že při realizaci stavebních prací se často vyskytují vícepráce, s kterými projektová dokumentace nepočítala, žádá starosta obce Jestřebí o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu a vyúčtování projektu o dva měsíce, tj do 31.5.2018 (příloha č.1). 

2) Dne 12.3.2018 obdržel ORREP druhou žádost (příloha č.2), ve které obec žádá o změnu poskytnuté neinvestiční dotace na dotaci investiční. 

Uvedené změny nemají vliv na bodové hodnocení projektu.

Na základě žádostí obce Jestřabí překládáme orgánům kraje dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/4149/2017 o poskytnutí účelové dotace, ve kterém je uveden nový termín pro ukončení a vyúčtování projektu a změna charakteru dotace na investiční.

P01 Žádost příjemce
P02 Žádost příjemce
P03 Smlouva OLP/4149/2017
P04 Dodatek č. 1 k OLP/4149/2017