Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.05.2018

Bod pořadu jednání:	53.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2514/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro obec Košťálov na projekt „Cyklostezka Oleška“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 934/18/RK z 15. 5. 2018	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 15. 5. 2018
     
Výbor dopravy dne 22. 5. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost obce Košťálov, Košťálov 201, IČ 00275841, ze dne 18. 4. 2018 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka Oleška“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Cyklostezka Oleška“ ze dne 30. 6. 2018 na 30. 6. 2019 a se změnou termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2018 na 19. 8. 2019, z důvodu problematických majetkoprávních vztahů v rámci stavby cyklostezky Oleška,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2514/2017, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Cyklostezka Oleška“ z 30. 6. 2018 na 30. 6. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2018 na 19. 8. 2019
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení,	
Termín: 10. 06. 2018
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2514/2017.	
Termín: 30. 06. 2018

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je k projednání předkládán Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2514/2017
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu na projekt „Cyklostezka Oleška“ uzavíraný mezi Libereckým krajem a příjemcem Obcí Košťálov, Košťálov 201, 512 02 Košťálov, IČ 00275841.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 30. 6. 2018 na 30. 6. 2019 u výše uvedeného projektu, která byla odboru dopravy doručena dne 18. 4. 2018.

Příjemce dotace v žádosti o změnu projektu uvádí, že změnu termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování požaduje z důvodu problematických majetkoprávních vztahů v rámci v rámci stavby cyklostezky Oleška. 
Koncept zpracovávané dokumentace byl projednáván v únoru 2018 v zastupitelstvu obce Slaná, která je stavbou dotčena nejvíce a zastupitelé obce projevili nesouhlas s navrženým řešením vedení cyklostezky pod železniční tratí z důvodu nutné platby za věcné břemeno ještě před realizací projektu a vzhledem k předpokládaným vysokým nákladům na založení cyklostezky mezi svahem železniční trati a břehem Olešky. Následně projektová kancelář začala zpracovávat novou verzi úseku na území obce Slaná, a to trasu blíže zástavbě. Vzhledem k tomu, že se tato nová trasa dotkne většího množství pozemků a více soukromých vlastníků, předpokládá se delší doba na projednání dokumentace pro územní řízení a pro získání souhlasu vlastníků a nelze termín ukončení realizace projektu splnit. 

V podmínkách Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – podpora projektové přípravy schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 93/17/ZK byl stanoven termín realizace aktivit od 1. 1. 2017 – 30. 12. 2018. Smlouva s příjemcem byla podepsána 7. 8. 2017 a realizaci příjemce dle žádosti o dotaci zahájil 1. 7. 2017.

Resort dopravy konstatuje, že prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2018 na 30. 6. 2019 a termínu závěrečného vyúčtování z 19. 8. 2018 na 19. 8. 2019 u výše uvedeného projektu by bylo již nad rámec termínu realizace aktivit od 1. 1. 2017 – 30. 12. 2018 stanoveného v příslušném Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – podpora projektové přípravy. Požadovaná změna, oproti schváleným podmínkám a vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 podpora projektové přípravy, nemá dodatečný dopad na provedené bodové hodnocení projektů, neovlivní účel, na který byla dotace poskytnuta, ani závazné parametry projektu. 

Z výše uvedených důvodů je pravděpodobné, že pokud dostane příjemce možnost pokračovat ve výstavbě cyklostezky prodloužením termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování projektu, bude úsek cyklostezky dokončen. 
Dostavbou úseku dojde jednoznačně ke zvýšení podílu cyklodopravy, jakožto udržitelné formy dopravy, při každodenní dojížďce za prací a zároveň dojde ke zvýšení turistického potenciálu.

Z výše uvedených důvodů, na základě žádosti příjemce dotace předkládá odbor dopravy, jako administrátor dotace,  dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2514/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, v kterém je prodloužen termín realizace projektu a termín závěrečného vyúčtování projektu, ke schválení orgánům kraje. 

Přílohy:
053_P01 Žádost o změnu projektu
053_P02 Smlouva OLP/2514/2017 
053_P03 Dodatek č. 1 Smlouvy OLP/2514/2017