Projednáno - usnesení přijato

5. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 29.05.2018

Bod pořadu jednání:	62.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4032/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje obci Hamr na Jezeře	

Důvod předložení:	Usnesení č. 985/18/mRK	

Zpracoval:	Mgr. Michael Otta
vedoucí odboru regionálního rozvoje a evropských projektů
	
Projednal:	Mimořádná Rada kraje dne 28. 5. 2018
     
Výbor zemědělství a životního prostředí dne 24.5.2018

Předkládá:	Jiří Löffelmann
člen rady kraje, řízení rezortu životního prostředí, zemědělství a rozvoje venkova
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace obce Hamr na Jezeře, se sídlem Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře, IČO 00673498, o prodloužení termínu realizace projektu „Okružní – chodník, schodiště, veřejné osvětlení – Hamr na Jezeře“, na jehož realizaci byla schválena dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 2.1 – Program obnovy venkova usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017,
rozhoduje
o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Okružní – chodník, schodiště, veřejné osvětlení – Hamr na Jezeře“ z 31. 5. 2018 na 30. 11. 2018, a prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z 20. 7. 2018 na 19. 1. 2019,
schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě č. OLP/4032/2017, o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, uzavřené mezi obcí Hamr na Jezeře, se sídlem Děvínská 1, 471 28 Hamr na Jezeře, IČO 00673498 a Libereckým krajem, jehož předmětem je změna termínu ukončení projektu a závěrečného vyúčtování projektu „Okružní - chodník, schodiště, veřejné osvětlení - Hamr na Jezeře“
a ukládá
Mgr. René Havlíkovi, řediteli úřadu, předložit výše schválený dodatek Jiřímu Löffelmannovi, členu rady kraje, k podpisu
Termín: 31. 05. 2018

Důvodová zpráva

Předmětem materiálu je žádost příjemce dotace obce Hamr na Jezeře o změnu termínu ukončení realizace projektu „Okružní - chodník, schodiště, veřejné osvětlení - Hamr na Jezeře“.

Poskytnutí dotace na projekt „Okružní - chodník, schodiště, veřejné osvětlení - Hamr na Jezeře“ bylo schváleno zastupitelstvem usnesením č. 340/17/ZK ze dne 29. 8. 2017 rozhodnutím o poskytnutí dotace z programu 2.1 Program obnovy venkova.

Mezi Libereckým krajem a obcí Hamr na Jezeře byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje č. OLP/4032/2017 (příloha č. 2). V článku III. bod 4. byl stanoven termín pro ukončení realizace výše uvedeného projektu nejpozději do 31. 5. 2018. 

Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů obdržel dne 24. 5. 2018 žádost starosty obce Hamr na Jezeře o prodloužení termínu realizace projektu „Okružní - chodník, schodiště, veřejné osvětlení - Hamr na Jezeře“ do 30. 11. 2018 z níže uvedeného důvodu.

Obec Hamr v souladu se smlouvou zahájila realizaci projektu provedením zadávacího řízení na přelomu září a října v roce 2017. Na základě výsledku zadávacího řízení byla zakázka přidělena firmě SaM Silnice a mosty Děčín a.s. a smlouva o dílo byla uzavřena dne 18.1.2018. Ve smlouvě o dílo objednatel stanovil, že dílo bude dokončeno do 8 týdnů od předání staveniště. K předání staveniště došlo dne 3.4.2018 tzn. že dílo mělo být dokončeno do 28.5.2018. Po předání staveniště zhotovitel zahájil stavební práce provedením odstranění stávajících lamp veřejného osvětlení, schodiště a převážné části opěrné zdi. Po provedení těchto prací měly být vybudovány základy pro novou opěrnou zeď, ale na základě vyjádření zhotovitelem přizvaného geologa bylo zjištěno, že v podloží se nachází nezpevněný zvětralý pískovec, proto byly práce přerušeny a ze strany zhotovitele byl vznesen požadavek jak na úpravy u projektové dokumentace, tak na předložení návrhu stabilizace svahu. Obec Hamr n.J. na základě těchto požadavků nechal zpracovat statické posouzení, které zároveň řeší i návrh dodatečného pažení pomocí silničních panelů. Tento posudek byl předán zhotoviteli k vyjádření a nacenění víceprací. Nicméně i přes vyjádření statika zhotovitel tvrdil, že dílo nelze realizovat a kladl si další podmínky, z nichž některé byly akceptovatelné některé nikoliv, zejména navýšení ceny díla o více než 1,2 mil. Kč. Dne 14.5.2018 obec Hamr na Jezeře obdržela výpověď smlouvy o dílo s odůvodněním, že nelze dílo dokončit neboť objednatel neakceptoval změnu ceny díla. Objednatel změnu ceny díla akceptoval, ale jen do výše, která je dle jeho názoru únosná a doložitelná. V současné době obci nezbývá nic jiného než se zhotovitelem jednat o ukončení smluvního vztahu a uzavření dohody o narovnání.
Přestože obec podala žádost o změnu termínu realizace projektu po termínu stanoveném smlouvou č. OLP/4032/2017, kde v článku III. bod 15. je stanoven termín pro podání žádosti o změnu projektu, nejdéle 30 dnů před ukončením realizace projektu, žádá o schválení změny termínu dokončení akce. V současné době intenzivně pracuje na uzavření smlouvy o dílo s jiným dodavatelem, protože uvedené schodiště je důležitou pěší tepnou v Hamru na Jezeře, ale také jakýmkoliv odkladem prací dochází k postupné degradaci obnaženého svahu splavováním písku vodou a postupné erozi vlivem vysychání. Jelikož obec ponese vícenáklady spojené se stabilizací svahu je pro ni získaná dotace velmi důležitá.
Na základě žádosti obce Hamr na Jezeře překládáme orgánům kraje dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/4032/2017 o poskytnutí účelové dotace, ve kterém je uveden nový termín pro ukončení a vyúčtování projektu. 

Uvedená změna nemá vliv na bodové hodnocení projektu.

P01: Žádost příjemce
P02 Smlouva OLP/4032/2017
P03 Dodatek č. 1 k OLP/4032/2017