Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.06.2018

Bod pořadu jednání:	38.	
		
Název :	Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace na „Obnovu objektu bývalé sušárny chmele v Dubé – I. etapa“, oblast podpory Kultura, památková péče a cestovní ruch, č. OLP/1806/2017	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1031/18/RK	

Zpracoval:	Mgr. Lucie Prandnerová
vedoucí oddělení památkové péče
	
Projednal:	Rada kraje dne 5. 6. 2018
     
Výbor cestovního ruchu, památkové péče a kultury                                         dne 19. 6. 2018

Předkládá:	Ing. Květa Vinklátová
členka rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost příjemce dotace Město Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá, IČ 00260479, o prodloužení termínu realizace projektu „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé – I. etapa“, na jehož realizaci byla přiznána dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblast podpory 7. Kultura, památková péče a cestovní ruch, program č. 7.2 Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji, na základě usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 271/17/ZK ze dne 27. 6. 2017,
rozhoduje
o prodloužení termínu realizace nadepsaného projektu z 15. 7. 2018 na 15. 9. 2018, a s prodloužením termínu pro podání vyúčtování z 3. 9. 2018 na 2. 11. 2018,
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1806/2017 o poskytnutí účelové dotace z  rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 91707 – Transfery – na projekt „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé – I. etapa“, uzavřené dne 27. 7. 2017, jehož předmětem je změna termínu ukončení realizace projektu a termínu pro podání závěrečného vyúčtování
a ukládá
1)	Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, informovat o usnesení zastupitelstva kraje příjemce dotace,	
Termín: 31. 07. 2018
2)	Ing. René Havlíkovi, řediteli krajského úřadu, předložit výše schválený dodatek ke smlouvě k podpisu Ing. Květě Vinklátové, člence rady kraje, řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu, a to na základě plné moci č. PM 22/2017.	
Termín: 31. 07. 2018

Důvodová zpráva

Městu Dubá, se sídlem Masarykovo náměstí 138, 471 41 Dubá, bylo usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 271/17/ZK ze dne 27. 6. 2017 přiznána účelová neinvestiční dotace z  rozpočtu Libereckého kraje – kapitoly 91707 – Transfery ve výši 1.000.000,- Kč na projekt „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé – I. etapa“. Mezi Libereckým krajem a příjemcem dotace byla následně dne 27. 7. 2017 uzavřena smlouva č. OLP/1806/2017 o poskytnutí účelové dotace, dle které je příjemce dotace povinen realizovat projekt v termínu ukončení realizace projektu uvedeném v Čl. III odst. 4 smlouvy. Příjemce požádal dopisem ze dne 10. 5. 2018 poskytovatele o změnu termínu realizace projektu a to vzhledem k tomu, že bylo upraveno nové požárně bezpečnostní opatření pro realizaci II. etapy obnovy sušárny chmele. Toto opatření se však dotklo i již realizované I. etapy obnovy, resp. elektroinstalací, které mají být již nyní pokládány v sociálních zařízeních objektu bývalé sušárny chmele. Vzhledem k tomu, že původní zpracovatel požárně bezpečnostního opatření odstoupil od smlouvy, došlo ke zpoždění v prováděcí dokumentaci na elektroinstalaci a tím i celkového dokončení I. etapy obnovy objektu bývalé sušárny chmele v Dubé. 

Změna ukončení termínu realizace projektu „Obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé – I. etapa“ byla konzultována se správcem dotačního programu z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu. Žadatel uvedl v žádosti o dotaci, že bude projekt realizovat mj. předpokládaný termín ukončení realizace 15. 7. 2018. Tento termín byl uveden též v čl. III. odst. 4 smlouvy o poskytnutí dotace. Ve své žádosti příjemce předložil nutnost prodloužit termín realizace projektu z důvodu zdržení na prováděcí dokumentaci, která vyplynula z nového požárně bezpečnostního opatření. Na základě této skutečnosti je změna termínu ukončení realizace projektu, jehož podstatou je obnova objektu bývalé sušárny chmele v Dubé, přípustná, a to i s ohledem na skutečnost, že nikterak neohrozí účelovost poskytnutých finančních prostředků. 

Pro požadovanou změnu termínu realizace projektu je nutné upravit uzavřenou smlouvu č. OLP/1806/2017 na základě dodatku č. 2, který uzavře Liberecký kraj a Město Dubá. Radě kraje tak předkládáme k odsouhlasení ukončení termínu realizace projektu a znění dodatku č. 2 ke smlouvě č. OLP/1806/2017. 

Přílohy:

P01 Žádost o termínu realizace projektu Města Dubá
P02 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. OLP/1806/2017