Projednáno - usnesení přijato

6. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje dne 26.06.2018

Bod pořadu jednání:	54.	
		
Název :	Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2520/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, program 6.3 Podpora projektové přípravy, pro Město Stráž pod Ralskem na projekt „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – Pláž – projekt ke stavebnímu povolení“	

Důvod předložení:	Usnesení č. 1127/18/RK ze dne 5. 6. 2018	

Zpracoval:	Ing. Iveta Moravcová
koordinátor cyklodopravy odboru dopravy
	
Projednal:	Rada Libereckého kraje dne 5. 6. 2018
     
Výbor dopravy dne 19. 6. 2018

Předkládá:	Marek Pieter
náměstek hejtmana, řízení rezortu dopravy, investic a veřejných zakázek
	
K jednání přizván:	     

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo kraje po projednání
bere na vědomí
žádost Města Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ 00260967, ze dne 18. 5. 2018 o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – Pláž – projekt ke stavebnímu povolení“,
rozhoduje
o změně termínu ukončení realizace projektu „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – Pláž – projekt ke stavebnímu povolení“ ze dne 30. 6. 2018 na 30. 6. 2019 a o změně termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2018 na 19. 8. 2019, z důvodu problematického výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace a zájmu Zastupitelstva města o změnu Studie ve vedení cyklostezky,
schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2520/2017, kterým se mění termín ukončení realizace projektu „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – Pláž – projekt ke stavebnímu povolení“ z 30. 6. 2018 na 30. 6. 2019 a termín závěrečného vyúčtování projektu ze dne 19. 8. 2018 na 19. 8. 2019
a ukládá
1.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, zajistit vyrozumění příjemce dotace o přijatém usnesení.	
Termín: 10. 07. 2018
2.	Marku Pieterovi, náměstku hejtmana, řízení resortu dopravy, investic a veřejných zakázek, podepsat Dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2520/2017.	
Termín: 30. 07. 2018

Důvodová zpráva

Orgánům kraje je k projednání předkládán Dodatek č. 1 smlouvy č. OLP/2520/2017
o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu na projekt „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – Pláž – projekt ke stavebnímu povolení“ uzavíraný mezi Libereckým krajem a příjemcem Městem Stráž pod Ralskem, Revoluční 164, 471 27 Stráž pod Ralskem, IČ 00260967.

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je žádost příjemce o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze dne 30. 6. 2018 na 30. 6. 2019 u výše uvedeného projektu, která byla odboru dopravy doručena dne 18. 5. 2018.

Příjemce dotace v žádosti o změnu projektu uvádí, že změnu termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování požaduje především z důvodu problematického výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. V otevřeném zadávacím řízení oslovili 10 projektových kanceláří a výzvu zveřejnili na profilu zadavatele, kde si tuto zakázku zobrazilo 133 společností, bohužel žádnou nabídku neobdrželi. Zadávací řízení dále neopakovali, jelikož Zastupitelstvo města na březnovém zasedání projevilo zájem o změnu vedení cyklostezky ve zpracované Studii „Klidová zóna ve Stráži pod Ralskem – pláž“. Záměr změny bude projednán na zastupitelstvu města 30. 5. 2018.  Bez ohledu na souhlas nebo nesouhlas se změnou studie už není reálné vše úspěšně zrealizovat do 30. 6. 2018.

V podmínkách Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – podpora projektové přípravy schválených usnesením Zastupitelstva Libereckého kraje č. 93/17/ZK byl stanoven termín realizace aktivit od 1. 1. 2017 – 30. 12. 2018. Smlouva s příjemcem byla podepsána 7. 8. 2017 a realizaci příjemce dle žádosti o dotaci zahájil 1. 8. 2017.

Resort dopravy konstatuje, že prodloužení termínu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2018 na 30. 6. 2019 a termínu závěrečného vyúčtování z 19. 8. 2018 na 19. 8. 2019 u výše uvedeného projektu by bylo již nad rámec termínu realizace aktivit od 1. 1. 2017 – 30. 12. 2018 stanoveného v příslušném Vyhlášení programu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací z Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 – podpora projektové přípravy. Požadovaná změna, oproti schváleným podmínkám a vyhlášení programu Dotačního fondu Libereckého kraje, oblasti podpory DOPRAVA, programu 6.3 podpora projektové přípravy, nemá dodatečný dopad na provedené bodové hodnocení projektů, neovlivní účel, na který byla dotace poskytnuta, ani závazné parametry projektu. 

Z výše uvedených důvodů je pravděpodobné, že pokud dostane příjemce možnost pokračovat ve výstavbě cyklostezky prodloužením termínu ukončení realizace projektu a termínu závěrečného vyúčtování projektu, bude úsek cyklostezky dokončen. 
Dostavbou úseku dojde jednoznačně ke zvýšení podílu cyklodopravy, jakožto udržitelné formy dopravy, při každodenní dojížďce za prací a zároveň dojde ke zvýšení turistického potenciálu.

Z výše uvedených důvodů, na základě žádosti příjemce dotace předkládá odbor dopravy, jako administrátor dotace,  dodatek č. 1 ke smlouvě OLP/2520/2017 o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, v kterém je prodloužen termín realizace projektu a termín závěrečného vyúčtování projektu, ke schválení orgánům kraje. 

Přílohy:
054_P01 Žádost o změnu projektu
054_P02 Smlouva OLP/2520/2017 
054_P03 Dodatek č. 1 Smlouvy OLP/2520/2017